교통유도 신호수 산출

1. 공릉2빗물펌프장 신설

○ 유입관로 부설 : 403m

ㆍ□2.0m×2.0m 303.3m, □1.0m×2.0m 100.5m

ㆍ시공일수 : 403.8m ÷ 6m/day = 68day

○ 교통처리 인원(1일 2인)

ㆍ68일×2인 = 136인

2. 면목4배수관로 설치공사

○ 유입관로 부설 : 385m

ㆍ□1.0m×1.0m  57m, Ø800mm ~ Ø700mm 328m

ㆍ시공일수 : 328m ÷ 10m/day = 33day

ㆍ상수도관 이설 : 7day

○ 교통처리 인원(1일 2인)

ㆍ(33일+7일)×2인 = 80인