기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 호
구 분	전 기

건 명	22.9kV변전실 및 2소화조 수배전반 설치공사 감리용역

요청기관명	중랑물재생센터 시설보수과
제출년월일	2022년 3월 일

기술용역사업계획

용역개요	○ 용 역 명 : 22.9kV변전실 및 2소화조 수배전반 설치공사 감리용역 ○ 용 역 비 : 31,232천원 ○ 용역기간 : 계약일로부터 180일간 ○ 사업규모 - 22.9kV변전실 배전반 교체 - 2소화조 변전실 배전반 교체 ○ 계약방법 : 수의계약
자체시행 가능여부	○ 용역 목적 - 중랑물재생센터내 22.9kV변전실 및 2소화조 전기설비 성능 개선 사업(수배전반 교체)으로 전력시설물의 품질확보, 안전 관리 등 안전한 시공확보를 하기 위함. ○ 추진근거 - 전기설비 개량사업 감리용역 추진 계획(시설보수과-1184) · 전력시설물의 품질 확보 및 안전관리 - 중대재해법 시행 관련 안전사고 예방을 위해 전문업체에 감리
	○ 자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ■ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : - ※ 알림 : 주요 공종이 자체시행 대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체 추진

과업내용 (요약)	○ 과업의 기본방향 - 전력시설물의 품질확보, 안전관리 등 안전한 시공 확보 ○ 과업의 범위 - 22.9kV변전실 배전반 교체 공사 감리 · 변압기(2000kVA,750kVA) 4대, 배전반 9면 교체 - 2소화조 변전실 배전반 교체 공사 감리 · 변압기(500kVA) 2대, 배전반 4면 교체 ○ 주요 과업내용 - 사업공정관리 - 자재 및 품질관리(물품제작 공장검수) - 시공관리 - 안전관리 및 기술지도 등
사업추진 계획 (절차)	○ 감리용역 추진 일정계획 - 2022. 3 : 기술용역타당성 심사 의뢰 - 2022. 3 : 용역발주 - 2022. 3 : 용역계약 - 2022. 3 ~ 10 : 용역 수행 - 2022. 10 : 준공
유사용역 자료활용 계획 (최근5년 이내)	- 해당사항 없음
리스크관리심사항목	○ 용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 : 없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 - 용역수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 ○ 용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 없음 ○ 기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 없음
사업의 예상효과	○ 전력시설물의 품질확보, 안전관리 등 안전한 시공확보 ○ 노후 전기설비 교체로 중단없는 하수처리 기능 확보