납품기한 연기조치 의뢰서

1. 납품내용

가. 납 품 명 : 시민의숲 CCTV 구매설치

나. 납품업체 : ㈜ 영국전자

다. 납 품 비 : 139,000,000원(조달수수료 미포함)

라. 납품기한 : 2014. 04. 12

2. 위 물품의 납품기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 납품기한 : 2014. 04. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 납품기한 연기사유

▷ 통합관제센터인 서초구청과의 협의 지연으로 장비 설치가 불가하여 납품기한 연장이 불가피 함.

2014.  4.    .

동부공원녹지사업소 시설과장   변  규  열(인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하