납품기한 연기의뢰서

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

1. 계약내용

가. 계약건명: 난지물재생센터 단단터보 송풍기 제조 구매 설치

나. 계약업체: (주)남원터보원(대표 이병학)

다. 계약금액: 금1,197,967,880원(금일십일억구천칠백구십육만칠천팔백팔십원)

라. 계약년월일: 2019.04.01.

마. 납품기한: 2019.06.30.

2. 위 계약의 납품기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한: 2019.07.30.(30일 연장)

나. 연기사유 귀책 소재: 서울특별시난지물재생센터

다. 지체상금 부과여부: 부과 없음.

라. 연기사유: 송풍기 5대 교체로 현재 운영 중인 송풍기로 인하여 일시 철거, 설치 시 운영상 수질관리에 어려움이 있기에 순차적으로 교체 철거, 설치하여야 하는 상황으로써, 운영부서와 업무협의를 통하여 수질관리에 영향이 없는 범위 내에서 순차적 작업 시행 필요하므로, 정상적인 사업을 진행하기 위하여 계약기간 연장이 불가피 함.

2019년  6월  일

작성자	난지물재생센터 시설보수과	지방공업주사	우배용
검토자	난지물재생센터 시설보수과	시설팀장	이호복
확인자	난지물재생센터 시설보수과	시설보수과장	조선행