동호대교 남단 진입램프 개량공사 공정회의 내용

○ 일시 : 2014. 9. 17.(수) 13:00

○ 장소 : 교량보수과 사무실

○ 참석자 : 교량보수과장, 담당 김형섭, 공단감독 이정복,

현장소장 장성민, 가설교량업체(KSC) 김상남 차장

○ 회의내용

- 성토용 토사반입 현장 확보 완료 : 성남시 수정구 탄천로 성남시수질보건센터 현장(L=17km)

⇒ 반입토사에 대하여 토양오염조사 실시

-  가설교량 Pile 천공장비 및 크레인 준비 완료

- 오탁방지망 설치 : 바지선 이용 다음주내 설치

- 상수도관, 가로등관 등 지하매설물 도면 작성하여 관리 철저

- 가교부분 제작은 경기도 광주 공장부지내 작업 후 현장 반입예정(자전거도로 이용)

⇒ 운반장비 25톤 츄레라, 반입시간 등은 자전거 이용 시민 고려 조정 필요

- 현장 가교 조립 설치소요일수 : 28일 정도 소요 (현장책임자 : KSC 김상남)

- 가교설치 완료 후 현장 안전진단 실시(일정 추후 협의)

- 기존 슬래브 및 방호울타리 철거시 안전관리 철저 : 작업시 편심작용으로 안전사고 우려있으니 작업순서 및 안전관리 사전조치 철저

(철거업체와의 작업순서에 대해 충분한 협의 실시)

- 슬래브 콘크리트 타설시 철근 피복두께 확보 등 철근가공조립 작업 철저히 하고 레미콘 타설시 온도 강하대비 보온양생 등 사전준비 철저(거푸집 설치시 보온막 설치 감안)

- 레미콘 타설시 횡단경사 구배 확보하여 물고임등 배수불량 없도록 시공 철저

- 슬래브 상부면 레이턴스 제거 후 물청소 실시하여 교면방수 시공 철저

- 아스콘 포설 및 다짐작업 철저(성형줄눈, 주입줄눈 시공 철저히 하여 우수 유입방지)

- 하부 강박스 내부 폐전선관 제거 및 점검등 정비 등 내부 정비물량 조사 및 실시

- 특히 가시설공사 및 고공작업이 많은 관계로 사전 안전조치 철저 및 수시 안전점검 확인

- 하부 한강고수부지 이용 시민에게 통행불편이 발생치 않도록 안전시설 설치 및 안전요원 배치 철저

- 기온이 강하하고 있는 점을 감안 수시로 안전점검 실시하여 안전을 최우선으로 작업 추진