몽촌토성 내성농장부지 및 북문지 외측

문화재 발굴(연장)조사 계획서

2016. 4.

한성백제박물관

(백제학연구소)

몽촌토성 내성농장부지 및 북문지 외측

문화재 발굴(연장)조사 계획서

□ 조사명

몽촌토성 내성농장부지 및 북문지 외측 발굴조사

□ 조사지역의 위치

서울특별시 송파구 올림픽로 424(방이동 88-3공)

□ 조사 목적

백제왕도유적인 몽촌토성의 내성농장부지·북문지 외측 일원에 대한 발굴조사를 실시하여 몽촌토성의 축조 및 경영시기, 성격규명을 위한 기초자료를 확보하고 박물관 전시자료의 안정적 확보를 도모하고자 함

□ 조사 경위 및 경과

❍ 조사 경위

- 사적 제297호인 몽촌토성은 1983년부터 1989년까지 총 6차례에 걸쳐 발굴조       사가 이루어졌으며, 그 결과 한성백제 왕성으로 주목받아 옴

- 기존 1980년대 발굴조사 시, 몽촌토성의 성격규명과 성내 구역에 대한 정형       파악에 미흡한 부분이 지적되고 있음

- 한성백제박물관 개관과 더불어 한성도읍기 500년 백제왕도에 관한 체계적        학술발굴 필요성이 학계에서 꾸준히 제기되고 있으며, 백제유적 유네스코        세계문화유산 등재에 필요한 학술자료 보완이 시급

- 학술발굴조사를 통해 한성백제의 도성구조에 관한 자료를 학계·시민에게        제공하고 한성백제사 복원을 위한 기초자료 확보 필요

❍ 조사 경과

- 2015. 02. 13. : 2015년 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 허가 신청

- 2015. 03. 05. :몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 허가(허가 제2015-0186호)

∘ 발굴조사 면적 : 5,800㎡

∘ 발굴조사 실조사일수 : 130일

- 2015. 03. 17. : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 착수

- 2015. 05. : 1차 학술자문회의 개최

- 2015. 10. : 2차 학술자문회의 개최

- 2015. 10. 20 : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 변경허가 신청

- 2015. 10. 26 : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 변경허가

∘ 발굴조사 면적 : 변동없음

∘ 발굴조사 실조사일수 : 190일(증 60일)

- 2015. 10. 27 : 몽촌토성 북문지 일원 연장발굴조사 착수

- 2015. 12. 16 : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 동절기 조사 중지

- 2016. 03. 16 : 몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 재착수

□ 조사기간 연장사유

- 2013~2014년도 내성농장부지 발굴조사 결과를 바탕으로 2015년도 발굴조사       를 진행한 결과 북문지 내측에서는 중층으로 분포하는 백제 도로 5기, 수혈       유구 16기, 구상유구 3기 등이 백제문화층에서 확인되었으며, 이외에 통일       신라문화층에서 추가로 도로 2기, 우물 1기, 굴립주 건물지, 주혈군 등이        확인되었음

- 조사결과를 바탕으로 2015년 10월 학술자문회의를 개최한 결과 조사지역 내       에서 중층으로 확인된 도로의 건설, 개·보축에 대한 정보 등을 파악하기        위한 추가 확인조사가 필요한 부분이 많으므로 조사기간을 연장하여 조사목       적을 달성할 필요가 있으며,

- 2016년도 발굴조사는 북문지 내측의 백제도로와 수혈유구 등이 확인된 Ⅰ·       Ⅱ지구 사이와 그 주변일대의 구역을 백제유구가 파악될 때까지 발굴조사를       진행하는 것이 바람직하다는 의견이 제시됨.

□ 조사 면적

❍ 전체 조사면적 7,500㎡

∘ 당초 허가면적 : 5,800㎡, ∘ 2016년도 추가면적 : 1,700㎡

- 북문지 내측(내성농장부지) : 6,300㎡

- 북문지 외측(피크닉장)     : 1,200㎡

□ 발굴 기간

∘ 기 허가일수 : 실 조사일수 190일

∘ 연장 발굴조사 신청일수 : 실 조사일수  120일

□ 발굴 기관

한성백제박물관(백제학연구소)

□ 발굴조사단의 구성

❍ 조사   단장 : 이 인 숙 (한성백제박물관장)

❍ 조사   위원 : 김 지 연 (한성백제박물관 백제학연구소장)

김 기 섭 (한성백제박물관 전시기획과장)

❍ 책임 조사원 : 박 중 균 (한성백제박물관 발굴조사팀장)

❍ 조  사   원 : 강 현 정 (한성백제박물관 학예연구사)

이 혁 희 (한성백제박물관 학예연구사)

❍ 준 조 사 원 : 윤 정 현 (한성백제박물관 연구원)

❍ 보  조   원 : 이 홍 주 (한성백제박물관 연구원)

성 기 열 (한성백제박물관 연구원)

박 선 호 (한성백제박물관 연구원)

신 화 영 (한성백제박물관 연구원)

□ 조사방법

❍ 중층으로 분포하는 백제 유구의 층서 및 선후관계에 따른 정확한 양상과 성       격을 파악하는데 중점을 두고 정밀한 층위 발굴을 실시

❍ 특히, 상·하층으로 중첩되어 확인된 도로의 축조방법과 구조, 개·보축에       따른 시기별 도로의 변화상을 파악하고, 각 단계별 도로의 축조 및 사용시       점을 파악하기 위하여 정확한 층서를 파악하고, 층서에 따른 유구조사 및        유물수습을 진행

❍ 이외에 확인된 유구는 고고학적 방법에 의하여 조사를 진행하고, 조사된 유       구 및 유물의 성격, 편년, 보존대책 등에 대하여 관계 전문가를 초빙하여        학술자문회의를 개최

□ 소요예산

금 십사억삼천사백오십만원정 (\1,434,500,000)

∘ 당초 641,100,000원, ∘ 증 793,400,000원

□ 발굴보고서

발굴조사 완료 후 20일 이내에 발굴조사 완료약보고서를 발간하고 2년 이내에 발굴조사 보고서를 발간한다.

□ 기타

○ 출토유구 및 유물은 관계법령에 따라 처리한다.

○ 이외 발굴조사와 관련된 사항은 문화재청과 협의하여 처리한다.

참고자료 1. [도면 1] 발굴조사지역 위치 및 기 조사지역 현황도(1:5,000)

2. [도면 2] 발굴조사지역 현황도(1:2,000)

3. [사진 1] 몽촌토성 북문지 내측(Ⅰ·Ⅱ지구) 조사지역 전경(항공사진)

4. [사진 2] 몽촌토성 북문지 내측(Ⅰ지구) 백제 도로유구 전경

[도면 1] 발굴조사지역 위치 및 기 조사지역 현황도(1:5,000)

[도면 2] 2016년 발굴(연장)조사 지역 및 현상변경 변경허가 신청지역 현황도(1/2,000)

[사진 1] 몽촌토성 북문지 내측(Ⅰ·Ⅱ지구) 조사지역 전경(항공사진)

[사진 2] 몽촌토성 북문지 내측(Ⅰ지구) 백제 도로유구 전경