하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	지급자재 계약변경 검토[상계장암 5단지 및 신내3지구 3,4단지 건설공사(조경석)]

1. 상계장암 5단지 및 신내3지구 3,4단지 도시형생활주택 건설공사와 관련하여 지급자재(조경석) 변경사항이 발생하여 변경계약을 체결코자 아래와 같이 검토∙보고합니다.

아       래      -

□ 계약현황

계약건명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
상계장암 5단지 및 신내3지구 3,4단지 건설공사(토목) 조경석 구매	온양문석개발	12,772,000	2016.05.02. ~ 2018.04.18

□ 변경사유

○ 2단계 준공 이후 설계 조정사항이 발생하여 현장여건 등을 반영한 설계도서 변경에 따른 지급자재 물량 조정

□ 검토내용

○ 수량 변경

계약명	품명	규격	단위	수량		증감
				당초	변경
상계장암 5단지 및 신내3지구 3,4단지 건설공사(토목) 조경석 구매	정원석	50*60*70	ton	354	250	감)104
		40*60*50	ton	-	349	증)349

○ 단가검토

- 기존 계약에 없는 규격(40*60*50)은 별도 발주하면 공사준공이 임박하여 자재조달시기를 맞추기 어렵고, 별도 발주하기에는 금액이 너무 적어 기존계약 업체에 계약변경 검토

- 기존 계약업체의 조달청 계약단가로 계약 변경

□ 변경사항

계약건명	계약금액(원)		비고
	당초	변경
상계장암 5단지 및 신내3지구 3,4단지 건설공사(토목) 조경석 구매	12,772,000	18,792,000	증)6,020,000

□ 조치계획

○ 상기 검토내용에 대하여 변경계약 요청(계약부)

붙임  1. 지급자재 변경내역서(조경석)

2. 가격조사.  끝.

부 원						부원				파트장			건설사업처장		12/13
		김주연						백용철			정용			김동일
협조자

시행			토목조경공사부-4474				(2017.12.13)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울시 강남구 개포동 14-5								/
전화		3410-8949			전송	3410-8996		/	juyoun@i-sh.co.kr					/	비공개(5)