부  의  안

1. 제안부서 : 택지사업본부 기반시설사업부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.2)

3. 제안사유 :

○ □동남권유통단지 기반시설조성공사(탄천우안 및 서측도로공사)□와 관련하여 탄천 서측도로 구간내 저촉되는 분당~수서간 지하철 환기구시설 이설에 대한 관리청(한국철도시설공단, 한국철도공사)협의 결과, 설계변경 사항이 발생되어 반영코자 함.

4. 심사‧의결 요구사항 : 원안가결

❍ 설계변경 사유의 적정성

❍ 단가적용의 적정성

❍ 소요예산의 적정성

※ 붙임 : 부의안 설명서 1부

2016년  8월 일

제 안 자 : 택지사업본부 기반시설사업부   토목3급      김 재 훈 □

토목3급대우  박 수 영 □

<부의안 설명서>

환기구 이설에 따른 시설물 개량공사 반영 검토

탄천서측도로 공사과정에서 저촉되는 분당~수서간 지하철 환기구 시설 이설 관련, 관리청(한국철도공사, 한국철도시설공단) 협의 결과에 따른 시설물 개량공사에 대하여 반영시행코자 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

❍ 위 치 : 서울시 송파구 장지동, 문정동, 강남구 율현동,자곡동 일원

❍ 공사명 : 동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사

❍ 규  모 : 도시기반시설 2개 노선(B=20~55m, L=2,548m)

- 탄천우안도로 : 폭 25~55m, 연장 1,298m(지하차도 2대소 포함)

- 탄천서측도로 : 폭 20m, 연장 1,250m

❍ 공사기간 : `08.12.22. ~ `16.10.1.(도급액 40,160백만원)

❍ 도급자 : ㈜엠지엘, 대보건설(주)

❍ 감리자 : ㈜유신, ㈜일신하이텍

Ⅱ		분당~수서간 지하철 환기구 시설물 현황

환기구 저촉 현황

위치도	저촉 현황

Ⅲ		관리청 협의 사항

협의 배경

❍ 탄천서측도로 공사시, 저촉되는 분당수서간 지하철 환기구시설은 철도안전법상 철도보호지역내 철도시설물로서 철도관리청 협의를 거쳐 시설물 이설 및 개량공사가 추진되는 공사로서

❍ 지하철과 연접한 철도시설물의 특수성, 원활한 공정 추진 및 향후 관리청 인계 등을 감안, 철도관리청 요구사항 반영 이행을 통한 이설 공사 추진이 시급한 실정임

협의 경위[환기구 이설 시설물 개량공사]

❍ `13.02.04 : 공사 착공 협의(SH→한국철도시설공단)

❍ `13.04.16 : 검토사항 협의 회신(한국철도시설공단→SH)

❍ `15.07.03 : 시공계획서 협의(SH→한국철도공사)

❍ `15.08.03 : 검토사항 협의 회신(한국철도공사→SH)

❍ `15.10.30 : 추가 협의(SH→한국철도공사)

❍ `16.01.05 : 추가 협의 회신(한국철도공사→SH)

❍ `16.01월 ~`16.2월 : 한국철도공사 주관 현장회의 개최(4회)

- 참석기관 : 한국철도공사(수도권동부본부 선릉건축팀, 청량리건축팀), SH, 감리단, 시공사 등【1차(1.26), 2차(1.27), 3차(2.4), 4차(2.11)】

협의 결과

❍ 관리청인 한국철도시설공단과 한국철도공사와의 지하철 환기구 이설 협의 과정에서 환기구 하부(지하 약 40m의 협소한 지하철 운행 연접구역)의 시설물(펌프,배관,집수정, 자동제어설비 등)개량을 포함하여 환기구 이설토록 협의 완료

※ 관리청 요구사항 반영내용

연번	협의결과 반영사항		근거
	항목	세부반영사항
1	수중배수펌프	공사중 및 신설 배수펌프 설치	관련 공문 및 회의록 (붙임 참조)
2	기존배관 교체 (배수펌프배관,블로워 배관, 송수화구 배관)	기존배관 철거, 신설배관 설치, 열선공사 가설환기닥트설치 및 철거, 우수배관설치, 지하수 유도배수공사, 집수정 준설 등
3	호이스트 설치	장비반출입용 호이스트 설치
4	지하철 연접부 차단벽 설치	차단벽 설치 및 열차감시 시스템 설치
5	관리자 배치	철도운행안전관리자, 전기안전관리자 배치 등
6	감시기능	수위감시시스템, 자동제어, 인터폰 설치
7	기타	안전시설물 설치, 임시가설 전기설치 등

협의결과 반영 도면

❍ 이설 개념도

❍ 내부 횡단면도

당초	변경
기존 배관 및 펌프 철거 등	펌프 및 배관설치, 차단벽설치, 가설환기덕트설치, 집수정 준설, 안전시설물 설치공사 등

❍ 환기구 하부 평면도

구분	평면도
신설 펌프설치
공사중 펌프설치

Ⅳ		검토결과

설계변경 타당성 검토

❍ 관리청 협의에 따른 지하철 환기구 시설물 개량공사 추진 사항으로

❍ 【공사계약 일반조건】 제19조 ①항 4호. 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 규정에 따라 설계변경 추진함이 타당

단가 검토

❍ 신규비목 : 협의율 90.676% 적용[(계약낙찰률 + 100)/2]

❍ 증감된 공사량의 단가는 계약단가 적용

❍ 기술심사(단가심사) 완료

- 심사 결과 : SH 자원자료 적용, 공구손료 및 잡재료비 할증 제외

‣ 조정액 → 감) 16백만원

- 관련 근거 : 【계약심사부(TF)-2117호(2016.8.29)】

소요예산

- 당초 360백만원 → 변경 1,883백만원, (증) 1,523백만원

(제경비, 부가세 포함)

‣ 공사 완료후 정산 조치 예정

Ⅴ		조치계획

본 건에 대하여 설계변경심사위원회에 부의 및 심사를 거쳐 도급자로 하여금 우선 시행토록 하고, 추후 설계변경시 정산 반영코함,

붙임 1. 감리단 실정보고서 1식

2. 산출내역서 1부.

3. 관련공문 1식.