■ 설계VE 제안 및 채택결과

○ 사업명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계

	아이디어 발상 및 평가 분석

구 분	아이디어 제안			계	채택 여부
	대안 개발	설계보완	기각		반 영		미반영 (대안 및 설·보)	합계
					대안	설계보완
토목구조	7	3	-	10	2	3	5	10
토목시공	11	11	-	22	7	9	6	22
토질	5	8	-	13	2	5	6	13
도로	3	7	-	10	1	7	2	10
전기	5	1	-	6	5	1	-	6
합 계	31	30	0	61	17	25	19	61

1. 채택 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	비용변화(초기공사비)			비고
			개선전	개선후	절감액
1	구조	세로보를 추가설치하자.	1,382	1,387	-5
2	구조	강재두께를 최적화 하자.	6,745	6,711	34
3	토목시공	RAMP-H교 차수용 가시설의 근입깊이를 축소하자	438	343	95
4	토목시공	현장타설말뚝 장비조립 및 해체수량을 축소하자	45	28	17
5	토목시공	강재거푸집(교각)은 기존 선시공된 (F, B교등) 강재거푸집을 재사용하자	1,252	1,034	218
6	토목시공	RAMP-D,H 구간의 현장타설말뚝 및 교각의 직경을 ∅3000에서 ∅2500으로 변경하자	767	675	92
7	토목시공	케미컬 앵커의 인장력(풍하중 반영등)에 의한 검토를 수행하자	27	27	0
8	토목시공	구조계산상 기둥 및 부재응력의 여유치가 않음으로 단면을 최적화하자	9,701	8,890	811
9	토목시공	덮개 우수 빗물 받이 배수관을 반영하자	-	35	-35
10	토질	기반암에 근입되는 현장타설말뚝 길이를 최적화 하자	105	79	26
11	토질	RAMP-D A1 교대 잡석치환 깊이를 최적화 하자	44	33	11
12	도로	양질의 토량을 인근에 매각하자	388	202	186
13	전기	항로표시등 설치공사 접지선 굵기 변경	23.4	9.9	13.5
14	전기	항로표시등 설치공사 가로등용 접지선 굵기 변경하자	0.2	0.1	0.1
15	전기	피뢰 및 교량접지 설치공사 접지선 굵기 변경하자	3.5	1.5	2
16	전기	가로등 설치공사 접지선 굵기 변경하자	22.4	8.9	13.5
17	전기	가로등 설치공사 접지터파기 시공을 생략하자	8.7	-	8.7

2. 미반영 아이디어

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	미반영 사유	비고
1	구조-01	말뚝직경을 변경하자.	∙ 토목시공-06 (RAMP-D,H 구간의 현장타설말뚝 및 교각의 직경을 ∅3000에서 ∅2500으로 변경하자) 내용과 중복
2	구조-04	관급자재 적용범위를 조정하자.	∙ 본 사업은 기존 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교의 형식변경등을 검토, 보완하는 사업으로 2009년 발주내역서를 준용, 관급자재는 철근, 레미콘, 아스콘만 반영하는 것이 타당할 것으로 판단됨 ∙ 현재 일부 구간 시공 중이므로, 원활치 못한 자재수급에 따른 공기지연을 방지하기 위하여, 당초안으로 관급자재 항목을 적용
3	구조-05	보도육교 기초파일 형식을 변경하자.	∙ PHC 파일의 시공량 과소에 따른 장비 추가투입 및 시공서 저하가 우려되고, 소량자재 구매에 따른 수급애로와 장기간 소요등을 감안하여, 당초안인 강관말뚝을 적용
4	구조-06	침전지 영구덮개 구조시설을 관급자재로 적용하자	∙ 영구덮개의 기자재는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조와 같은법 시행령 제11조에 고시된 중소기업자 간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목에 지정되어 있지 않으며, 동종의 제품군 또한 조달청에도 등록되어 있지 않는 관계로 관급자재 적용은 불가할 것으로 판단 됨. ∙ 또한, 도급공사의 낙찰율(최소 80%) 고려 시 관급발주 방식과 도급발주 방식의 최종 계약금액 차이는 근소한 것으로 판단됨.
5	구조-07	침전지 영구덮개와 교량 상부 투척방지시설의 중복기능을 최적화하자	∙ 침전지 영구덮개 및 투척방지시설은 영등포정수센터 보안 및 월드컵대교로부터 낙하물 발생시 응집침전지를 보호할 수 있도록 상수도사업본부 요구사항 및 제1차 사업계획변경 조정 심의회 에서 적정성을 심의하여 진행된 사항으로 변경이 불가할 것으로 판단됨.
6	토목시공-02	RAMP-H교 옹벽-4 구간 P1 간섭구간 옹벽 평면을 직선으로 배치하자	∙ RAMP-H의 옹벽 선형을 직선화로 계획 시, 양화교 접속램프 보도부에 옹벽 벽체가 침범하여 보도폭원이 줄어들어 관련실과의 협의를 추가로 시행하여야 하며, 시공성 또한 개선 효과는 크지 않은 것으로 판단됨. (전체 보도폭 2.5m에서 0.43m를 침범하여 보도폭원 2.07m로 축소)
7	토목시공-04	교량이 염해에 영향을 많이 받는 지역이 아니므로 내염도장을 삭제하자	∙ 콘크리트 방호벽의 교량 내측 수직면에, 재설용 염수 포설에 의한 콘크리트 내구성을 확보하기 위하여 내염도장을 반영함 ∙ 연결로 구간 염수분사장치 설치 반영
8	토목시공-09	철골구조의 제작 및 설치품을 잡철물(1,542 만원/ ton)로 적용하였으나 경량철골 제작 설치로 변경하자	∙ 건설공사 표준시장단가(한국건설기술연구원)의 경량철골(천정틀) 제작설치품은 천정재료에 대한 단가로서 자재규격(M-BAR, BAR클립 등) 및 적용단위(㎡)가 영구덮개 구조물의 자재(형강류) 및 단위(ton)와 상이하여 적용하기 어려울 것으로 판단됨. ∙ 침전지 영구덮개 구조물은 알루미늄 재질로 「건설공사 표준품셈(대한건설협회, P1260)」 8-4-1 각종 잡철물 제작 설치의 ⑧항 ㉲ 기타 철골 공사에 해당되지 않는 철제품의 제작 및 설치에 해당되는 것으로 판단됨.
9	토목시공-10	침전지 덮개를 1지~2지만 SHC판넬로 적용하고 3지~8지 구간은 일반 판넬로 적용	∙ 침전지 영구덮개의 재질은 상수도사업본부 요구사항 및 서울특별시 기술심사담당관 검토를 바탕으로 특정공법 심의를 거쳐 규격 및 재질이 선정 된 사항으로 변경이 불가할 것으로 판단됨.
10	토질-02	옹벽기초 강관말뚝의 허용지지력을 고려 규격 또는 본수를 최적화 하자	∙ 옹벽기초의 강관말뚝은, 기존구조물의 말뚝간격과 동일하게 배치하였으며, 말뚝 본수는 허용지지력과 부재응력을 고려하여 선정하였음 ∙ 강관말뚝 두께를 축소 할 수 있는 구간은, 전체 260본에서 18본으로 변경대상 수량이 소량이므로, 시공시 혼선방지와 자재구매의 수급 애로등를 감안하여 당초안으로 동일한 규격으로 적용
11	토질-04	지붕 Truss 경사를 적설 완화를 위하여 경사 조정	∙ 급경사 지붕이 적설 배출에는 용이하나, 구조 검토 시 주요부재의 안전율이 부족한 것으로 검토되어, 성능 요건을 만족하는 규격으로 변경한 결과 공사비의 상승이 발생됨.
12	토질-05	Truss 기둥 높이를 축소 조정하자	∙ 기둥부재의 소요량을 감소시키는 효과가 있으나, Truss 부재 수량이 증가하여 그 효과가 상쇄되며, 정수센터 요청사항에 의한 크레인 설치로 인해 적용 구간에도 한계가 있는 것으로 판단 됨.
13	도로-02	통합지주를 계획하자	∙ 본 과업은 기존표지판 유용이 대다수이며 R-H,D 각 시점부 2개소에 통합지주 설치가 가능하나 주변연계성 및 일관성이 떨어지며 19년 6월 경관심의를 득하였으나 통합지주로 인한 경관심의를 추가로 받아야 하므로 과업일정상의 어려움이 있음
14	도로-03	투척방지시설 상부를 개방하자(판->망)	∙ 투척방지시설은 영등포정수센터 보안 및 월드컵대교로부터 낙하물 발생시 응집침전지를 보호할 수 있도록 상수도사업본부 요구사항 및 제1차 사업계획변경 조정 심의회에서 적정성을 심의하여 진행된 사항으로 변경이 불가할 것으로 판단됨.
15	토목시공	교량가설 및 안양천 횡단공사 등 공사시기를 고려하여 공정계획을 반영하자	공사기간 산정기준은 2019년에 제정된 기준으로 본과업과 무관
16	토목시공	덮개공사는 월드컵남단연결로와 연계성이 적음으로 수의계약 하지 말고 분리발주하자	상수도본부 요청사항으로 연결로와 상호 연계성이 존재함
17	토질	RAMP-H 시점부 교대 기초 강관말뚝 근입깊이를 상부작용하중을 고려하여 최적화하자	미시추구간, 탄성파탐사 반영 지층급변 예상 시공중 확인시추후 현장 설계변경 사항임
18	토질	기반암 근입 현장타설말뚝 RAMP-F교 P11은 현장확인시추 결과를 반영하여 직접기초로 변경	미시추구간, 탄성파탐사 반영 다수의 현장 확인 시추중으로 결과 반영시 설계기간 부족 시추결과를 적용하여 현장 설계변경 사항임
19	토질	Ramp-H 성토구간하부 콘크리트 수로를 PC플륨관으로 변경하자	당초 표준횡단면도 적용단면 오류로 표준횡단면도를 수정하겠으며, PC플륨관은 적용이 불필요한 사항임

3. 설계보완

(단위 : 백만원)

번호	분야	제안명	조치 계획	채택 여부
1	토목구조	강재규격을 개정규격으로 변경하자(KS 규격변경)	강재규격 표기를 수정하겠음	반영
2	토목구조	램프D 교각 1의 말뚝시공시 인접한 기존옹벽의 간섭이 우려되므로 조치방안의 수립이 필요	옹벽 철거 및 설치는 반영하였으며 위치도를 추가하겠음	반영
3	토목구조	설계도서(보고서...등)를 보완하자	설계도서를 보완하겠음	반영
4	토목시공	RAMP-D교 배수시설의 P3구간이 하천용으로 되어있으나 하부에 교량 및 보도가 통과함으로 육교형으로 변경하자	육교용으로 변경하겠음	반영
5	토목시공	RAMP-H교 가설교량이 안양천 자전거도로 및 보도를 저촉함으로 이설계획을 수립하자	이설계획을 수립하겠음	반영
6	토목시공	RAMP-H교 시점부 기존구조물 철거 계획도를 추가하자	철거계획도 추가하겠음	반영
7	토목시공	교량배수관(하천용)의 직관을 본선 거더 하부까지 연장하자.	배수 직관을 연장하겠음	반영
8	토목시공	시스템비계 및 가설계단 위치 및 상세도를 추가하자	상세도를 추가하겠음	반영
9	토목시공	케미컬앵커 시공을 위한 콘크리트 천공시 분진발생에 대한 대책을 수립하자	천공시 분진발생에 대한 대책을 도면 및 시방서에 반영하겠음	반영
10	토목시공	앵커 천공을 위한 정수장 구조물의 폭원이 협소함으로 작업자의 안전을 고려하여 작업발판등을 반영하자	작업발판등을 도면에 반영하겠음	반영
11	토목시공	덮개가설을 위한 덮개분할계획 및 가설크레인 중량 가설위치 크레인 반경 등을 검토하여 가설상세도를 추가하자	가설상세도를 도면에 반영하겠음	반영
12	토목시공	가설중 정수장에 오염물질 유입이 예상됨으로 이를 방지할 수 있는 대책을 수립하자	오염물질 유입대책을 설계에 반영하겠음	반영
13	토질	RAMP-F A2 좌측절토부 옹벽 보강앵커 길이를 재검토하여 최적화하자	절토부 옹벽 보강앵커 길이를 재검토하여 최적화 하겠음	반영
14	토질	강남방향 램프교 P2, RAMP-H교 P5 현장타설말뚝 길이를 재검토하여 최적화하자	현장타설말뚝 길이 재검토를 통하여 최적화 하겠음	반영
15	토질	차수용 가시설에 대하여 계측계획을 최소한 반영하자	서울청의 안양천내 우기시 공사중지 요청을 고려하여 계측기간 3개월(당초) → 18개월(변경)로 조정하여 반영하겠음	반영
16	토질	보강토옹벽 배면 배수용 뒷채움골재 치수를 명기하자	배면 배수용 뒷채움골재 치수를 명기하겠음	반영
17	토질	가설교량의 H-PILE 규격을 상부하중 고려 최적화 하자	허용지지력을 풍화암기준으로 산정하겠음	반영
18	도로	RAMP 설치시 기존도로 및 계획도로를 횡단시 차량높이 제한표시를 계획하자	차량높이 제한표지 계획을 검토 후 적용하겠음.	반영
19	도로	RAMP-D STA.0+150 지점 하부램프 구간의 교량계획에 따른 안전시설을 추가하자	교통안전시설계획을 검토 후 적용하겠음.	반영
20	도로	RAMP-D 시점부는 당초 2방향 분기에서 3방향 분기로 변경되므로 과업구간 이전에 노면표시, 표지판등을 계획하자	노면표시, 표지판 등을 검토 후 적용하겠음.	반영
21	도로	RAMP-H와 양화교 접속램프의 평면도를 잘보이게 구분하자	평면도를 잘 보이게 구분하여 작성하겠음.	반영
22	도로	노즈 상세도의 노즈부를 램프별로 확인가능하도록 구분하자	노즈부를 램프별로 구분하여 표시하겠음.	반영
23	도로	RAMP-H,D 시점부 기존도로 접속부의 시공시 교통안내 및 처리계획을 상세계획하자	교통안내 및 처리계획을 상세히 계획하겠음.	반영
24	도로	차로축소구간을 도면에 표시하자	차로축소구간을 도면에 표시 적용하겠음.	반영
25	전기	간선 계산서가 없으므로 보완하자	간선 계산서를 보완하겠음	반영