서울총괄건축가 자문 신청·의견서

신청기관	실·국·본부	기후환경본부	부서명	기후변화대응과	신청일	2020. 07. 30.
▪ 자문요청사항
- ‘21. 09. 발주 예정인 ’수소체험 박물관(가칭) 건립’에 대해 서울특별시 건축 기본 조례 제36조에 제③항 제2호 및 도시공간개선단-5453(2019.4.17. ’서울총괄건축가 자문 의견 관리 개선방안 알림‘)에 따라 건립 기본 계획 및 공모(전시계획 포함)방안 등에 대해 자문을 요청드림.
▪ 일반사항
사 업 명	수소체험 박물관(가칭) 건립
사업위치	서울시 마포구 상암동 481-6,481-94번지 일원
사업기간	2020.4. ~ 2023.6.
사업규모	부지면적 4,542.72 ㎡	연면적 2,422.53 ㎡
사업유형	■신축 □증축 □개·재축 □대수선 □기타
투자유형	□국비( ) □민자( ) ■시비( 156억 )
총사업비	156억원
사업개요
1. 사업목적 · 청정 연료인 수소에너지에 대한 시민 인식전환 필요 · 체험·전시시설 부족에 따라 시민의 불안감 해소 및 직접 체험할 수 있는 공간 조성으로 미래 에너지 수소에 홍보의 장 마련 2. 추진근거 · 『2050 수소경제 활성화 로드맵』 수립 추진계획(안) (기후대기과-3253호 ’20. 3.2, 기후환경본부장) 3. 추진경위 · 2019년 04월 : 김기덕 시의원 및 마포구 수소박물관 건립 제안 · 2019년 04월~05월 : 건립부지 현황조사 및 관련기관 의견조회 · 2019년 05월 : 건립 부지 내 천공 불가로 건축 불가 통보 · 2019년 06월 : 마포구에서 박물관 건립 대체부지 제시 · 2020년 03월 : ‘2050수소경제 활성화 로드맵’ 수립 추진계획(안)방침 · 2020년 04월 : 건립 타당성·안전성 조사 및 기본계획 수립 용역 · 2020년 05월 : 용역 착수보고회 개최 ⇒ 사업부지 재검토 필요 · 2020년 05월 ~ 06월 : 부지 확정 (마포구 , 서부공원녹지사업소 등 협의 후) · 2020년 07월 : 지방재정 중앙투자심사 의뢰 4. 향후계획 · 2020년 07월 ∼ 10월 : 지방재정 중앙투자심사 의뢰 및 심사 · 2020년 10월 : 서울시 중기지방재정계획 반영 · 2020년 11월 : 도시계획시설 변경 · 2021년 : 설계공모 및 실시설계 · 2021년 : 전시콘텐츠 기획제작 및 프로그램 개발 용역 · 2021년 하반기 : 공사시행
▪ 사업계약관련사항
타당성 용역	수소체험박물관(가칭)건립 타당성, 안정성 및 기본계획 용역
용역수행자	구우건축사사무소 대표 구선주
▪ 사업수행관련 메모(추진 진행과정 및 향후 추진계획)
※ 첨부 : 수소체험박물관(가칭)건립 기본계획서
▣총괄건축가 자문의견
위 자문요청사항에 대하여 「서울특별시 총괄건축가」의 자문의견을 제시합니다. 2020년 월 일 서울시 총괄건축가 김 승 회 (인)
◎사업전략목표분류(도시공간개선단 작성)
□공공시설 및 공공프로그램	□도시흐름연결 및 공공영역 확보	□도심재생 및 활성화	□에너지 공급 및 낙후지역 자립지원
□도시자연복원	□수도권:인프라 통합	□주거환경 개선 및 주택 정책	□산업 지역 활성화
□도시혁신 및 스마트 시티	□에너지 효율	□기타( )