설계변경 사유서

1. 용역현황

가. 용 역 명 : 2023년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

나. 공사개요

- 건설폐기물 운반 : 9,038㎥

- 건설폐기물 처리 : 20,668ton

다. 총용역비 : 848,530천원

라. 공사기간 : 2023. 4. 6. ~ 2023. 12. 31.

마. 도 급 자 : (주)지솔알이에이치 대표 유재원

2. 설계변경 사유

○ 김상옥로 보행환경 개선사업 등 추가공사 발생으로 인한 시공물량 증가

○ 각 공사장별 폐기물 수량 증·감 발생에 따른 변경

3. 변경 내역

○ 시공물량 증가

공 종	단위	당초	변경	증.감
건설폐기물 운반	㎥	9,038	10,795	증) 1,757
건설폐기물 처리	ton	20,668	25,079	증) 4,411

4. 용역비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 . 감
총용역비	848,530,000	1,025,183,000	증) 176,653,000
공급가액	771,390,909	931,984,545	증) 160,593,636
부가가치세	77,139,091	93,198,455	증) 16,059,364