설계변경 대공원위원회 자문요청서

문서번호		요청부서	조경과 담당 조진성			요 청 일		2014.5.19
공 사 명	백두산호랑이숲 조성공사
공사개요	공사규모	호랑이사 내실정비, 야외방사장 정비 등
	공사기간	2012. 12. 27 ~ 2014. 5. 29
	감 리 사	-
	설 계 사	㈜수성엔지니어링
	시 공 사	미래종합조경(주)
자문 안건명		백두산호랑이숲 조성공사 설계변경					요청금액		144,000천원
자문 요청사유		■ 30,000천원 이상 변경사항 □ 부서(담당별)간 조정∙통합이 필요한 경우
설계변경 유형		□ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) □ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 □ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ■ 민원해결, 보수, 보강 □ 문화재 및 지장물 이설 □ 공법변경(신기술, 신공법 포함) □ 제도, 기준 변경 □ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내 용 : 동물탈출 방지 시설물, 관람시설 점검과 동물생태 등 전반에 대한 외부자문 및 의견수렴에 대한 조치사항, 일부 실시공물량 변경에 따른 증감반영
원설계자 의견(요약) ○ 내 용 : 특이사항 없음
주요변경내역 및 공종
○ 변경개요 - 조경식재 : 수종 및 수량변경 - 조경시설물 : 안전시설 설치 및 관람시설 보완 - 토목공사 : 실시공물량 반영 - 설비공사 : 지하수 인입 등 ○ 물량 증감내역 ※ 설계변경 물량증감표 별첨				○ 공사비 증감내역 - 당 초 : 2,377,213천원 - 변 경 : 2,521,213천원 - 증 감 : 144,000천원 ○ 설계변경 주요 공종 - 조경시설물, 조경식재, 토공, 설비공 등
별첨서류	변경 전후도면 사본 1부 설계내역서 1부 설계자 검토의견 사본 1부 물량증감표 1부				○ 준공기한 : ‘14.5.29