서남권지역 돔야구장 건립

《서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장공사》

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장

○ 사업기간 : ’13. 4. 8 ~ ’16. 8. 31

○ 도 급 비 : 30,953백만원 (4차 13,230)

○ 시 공 사 : 대지건설(주), 한동건설(주)

○ 감 리 사 : ㈜삼보기술단 외 2개사

○ 사업내용

- 보행광장 설치 : B=28.3m, L=150m (완료)

- 고척교 확장 : B=37.5→52.5m, L=203m (완료)

- 다목적광장 조성 1식, 경관개선 1식, 만탄치안센터 및 전망대 신축

※ 다목적광장 조성 :  돔야구장 개장시 교통혼란을 최소화 할 수 있도록 안양천변에 우회도로 및 포장(예비주차장) 등을 포함한 시민편의 제공

□ 2016년 예산현황(도시기반시설본부 재배정)

○ 세부사업명 : 서남권지역 돔야구장 건립

(단위:천원)

구 분	재배정액	지출액	잔 액 (감배정)	비 고
도시개발 특별회계	3,613,390	3,154,601	454,000	잔액발생사유 : 하천점용허가 지연으로 인한 징검다리 미시공 등 실정산 (향후 소요예산 4,789천원 제외)

- 사고이월 : 보행광장설치(시설비 32,390천원, 감리비 173,000천원)

- 명시이월 : 안양천다목적광장조성(시설비 3,099,000천원, 감리비 309,000천원)

□ 추가 공사 추진경위

○ ´15.04.28 : 다목적광장조성 기본설계 용역 준공(용역착수 ´14.2.17)

○ ´15.05.08 : “명품교량 건설” 관련 설계용역 착수(도기본)

○ ´15.05.29 : 하천점용허가 및 실시계획인가(서울 제1489호, 지방국토관리청)

○ ´15.06.02 : 하천점용허가 및 실시계획인가에 따른 사업시행계획(본부장방침. 체육진흥과-6984)

○ ´15.06.04 : 안양천변 다목적광장 조성사업 시행계획 통보(시→도기본)

○ ´15.09.   : 본 공사 완료(도기본)

- 보행자전용도로(보행광장) 및 고척교 확장 완료 및 공용

○ ´15.10.02 : 안양천변 다목적광장 조성사업 추진계획 보고

- 실시설계 및 시설공사 (도기본 토목부)

○ ´15.12.01 : 공사 착공(도기본)

○ ´15.12.17 : 다목적광장 하천점용허가(서울지방국토관리청)

○ ´16.1월 ~ 7월 : 징검다리 설치 하천점용허가 4회 협의

- 하천점용신청내용

· 사업목적 : 고척교 보도교의 이동 인구를 분산시키고, 하천경관을 따라              야구장까지 이동하는 동선 계획을 수립

· 사업개요 : 징검다리 1개소 (폭 2.4m, 길이 62m)

- 서울지방국토관리청 의견 : 고척교 교각 안전을 위해 이격거리 확보 등

○ ´16.08.01 : 안양천(고척교) 인근 징검다리 설치관련 협의(구로구)

- 돔구장주변 개선공사에 계획된 돔구장주변 징검다리 설치 지연에 따라 지역주민 민원발생, 현재 단계에서 공사 집행잔액의 재배정 요청

○ ´16.08.08 : 서울지방국토관리청 방문(구로구)

- 고척교 상류측 징검다리 설치에 긍정적인 답변(서울지방국토관리청)

○ ´16.08.23 : 안양천(고척교) 인근 징검다리 ‘17년 예산확보 요청(구로구)

○ ´16.08.31 : 공사 준공(도기본)

○ ´16.09.13 : 사업비(서남권 돔야구장 건립) 감배정 요청(도기본)

- 감배정 사유 : 하천점용허가 지연으로 인한 징검다리 미시공 잔액발생               (454,000천원)

징검다리