12월 (주간, 월간)업무현황보고서

[ 2013. 10. 01. ～ 2013. 12. 31. ]

[ 2013. 12. 01. ～ 2013. 12. 31. ]

주관기관	서울시 데이터센터 운영 1과		사업책임자	김 인 호 인
사 업 자	에버밸류컨설팅㈜		용역책임자	정 용 균 인
추진단계명	미래모델, 이행계획수립 단계
실적(2013. 12. 01 ～ 2013. 12. 31)		계획(2014. 01. 01 ～ 2014. 01. 08)
1. 전략과제 수립 (11/27~12/13) 가. 수립 내용 - 과제정의서 - 과제관련 주요현황 및 사례 - 목표모델 수립 - 추진내용 및 기대효과 나. 전략과제 목록 - 가치창출을 위한 대시민 정보인프라 개방 - 공공데이터센터 구축 및 운영관리 모델 제공 - 클라우드 기반 빅데이터 및 모바일 공통플랫폼 운영 - 클라우드형 제2데이터센터 구축 - 정보자원의 지속적 통합 - 데이터센터 에너지 효율화 - 수요기관 중심 정보자원 관리체계 효율화 - 미래형 데이터센터 조직기능 재정립 2. 이행계획 수립 (12/16~12/27) 가. 16개 이행과제 도출 및 정의 나. 과제간 우선순위 선정 다. 추진계획일정 수립 라. 소요예산 산정 및 기대효과 분석 3. 사업결과물 리뷰 준비 (12/30~12/31) 가. 사업결과물 리뷰자료 작성 나. 사업산출물 검수요청 (12/30)		1. 사업결과물 검토 및 완료보고 가. 사업결과 TF팀 리뷰 - 사업 TF팀 11명 대상 리뷰회의 - `14년 1월 2일(목) 14:00 - 4층 대회의실 나. 자문회의 개최 - 외부전문가 3명, 데이터센터 이해관계자 결과물 검토 및 의견 수렴 - `14년 1월 3일(금) 14:00 - 4층 대회의실 다. 완료보고회 개최 - 내·외부 데이터센터 이해관계자 사업완료보고 - `14년 1월 8일(수) 14:00 - 4층 대회의실
미결업무 및 문제(이슈)사항 또는 요청사항	- `13년 12월 30일 결과물 검수요청 - `14년 1월8일 완료보고회 후 종료예정

-  -