“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수 신	서울교통공사사장
(경유)
제 목	세출예산 추진현황 점검회의(1분기) 지시사항 통보(지하철 1~4호선 노후시설 재투자)

1. 도시철도 노후시설 개선을 위해 ’11년부터 추진 중인 “지하철 1~4호선 노후시설 재투자”사업과 관련입니다.

2. 세출예산 추진현황 점검회의(1분기)에 따른 지시사항에 대하여 아래와 같이 통보하오니 조치결과(계획)를 ’19. 4. 30.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 지 시 사 항 -

가. ’19년 국고보조사업 추진

1) ’19년말 목표공정이 20%미만(변전설비 등 9건)인 사업에 대한 공정만회 대책을 마련하고, 만회대책 및 수정 공정계획표 제출(’19년말 목표공정을 최소 20%이상 추진)

2) ’19년 세출예산(서울교통공사 예산) 미 편성으로 사업이 지연될 수 밖에 없는 실정임으로 미 편성된 사업(2개 사업)에 대하여 총 사업비의 20% 이상을 세출예산(추경반영)으로 편성하고, 사업별 예산(변경)편성 계획 제출

- ’19년 집행목표 : 310억 원 이상 지출(’18년 사업의 예산집행 등을 감안 30% 정도로 ’19년 집행목표 설정)

나. ’18년 국고보조사업 추진

1) 현재 예산집행(집행률 29%)이 매우 저조한바, 공정 및 집행 제고대책을 마련하고 제고대책 및 공정(집행)계획표 제출(모든 사업은 ’19년 12월말 완료 목표로 추진)

2) 국비가 수년간 노력 끝에 편성된 점을 감안, 반납액이 발생하지 않도록 지하철 노후시설 개선에 최대한 사용하시기 바라며, 반납액 최소화를 위한 집행잔액(낙찰차액, 계약심사 절감액 등) 사용계획서 제출

3. 市에서는 도시교통실장 주재하에 매월(분기) 공정보고회(점검회의)를 개최하여 사업추진 현황을 점검할 계획이오니, 예산처장 및 사업부처장(담당자)은 사업관리 및 집행률 제고에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관			도시철도안전팀장			도시철도과장
협조자
시행	도시철도과-3838	(	2019.04.10.	)	접수	예산처-1013	(	2019.04.12.	)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-4162	/전송	02-2133-1048	/	san730@seoul.go.kr	/	대시민공개