설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 박웅교		요청일		2017년 05월
공 사 명	장안교(구교) 성능개선공사
공사개요	공사규모		- 기존교량 철거(B=17m, L=200m) - 교량신설 (B=17m, L=218m : 라멘교 + Pre-Flex Beam교) - 교통우회용 가교 : L=220m(TRIAS 공법)
	공사기간		2014.12.16. ~ 2017.08.31.
	감 리 사		㈜삼안, ㈜유신, ㈜경동엔지니어링
	설 계 사		㈜서영eng, ㈜삼보기술단
	시 공 사		새천년종합건설(주), ㈜서한기술공사
자문 안건명			교량 하부 수변공간 조성 등 시공방법 변경				요청금액		증 694,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보행친화적 명품교량 건설과 함께 교량하부 중랑천 수변공간 등 주변경관(물놀이장 등)과 조화를 이뤄 시민들이 즐겨 찾을 수 있는 쾌적한 휴식공간 조성
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 해당없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 교량하부포장 : 기존블럭 재활용(당초) → 인조화강석블럭(변경) - 목재가림벽 설치 - 게이트볼장 삭제 - 중랑천 식생(초화류) 조성(물억새, 수크령) ▪ 물량 증감내역 - 보도블럭철거 : 증 4,262㎡ - 식생조성 : 증 3,800㎡ - 게이트볼장 : 감 1개소 - 인조화강석블럭 : 증 4,135㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 70,000 천원 - 변 경 : 764,000 천원 - 증 감 : 증 694,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 : 기존구조물깨기, 식생조성 - 원상복구공 : 경사로교면포장, 자전거도로설치 시설물 설치(목재가림벽, 벤치 등) - 포장공 및 부대공 : 인조화강석블럭, 호안블럭
별첨서류	1. 설계변경 심의자료 1부.					▪ 공사예정시기 - ‘17년 05월 ~ ’17년 08월 ▪ 소요관급자재 - 레미콘, 초화류(물억새 등)

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	장안교(구교) 성능개선공사(4차)
계약금액	13,403,060천원	계약일	2014. 12.10	시공사	새천년종합건설 외 1개사
공사기간	2014.12.16. ~ 2017.08.31.	낙찰율	82.096 %	설계자	㈜서영eng 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	(주)삼안 외 2개사
공사규모	• 기존교량 철거(B = 17 m, L = 200 m) • 교량신설 (B = 17 m, L = 218 m) : 라멘교 + Pre-Flex Beam교 • 교통우회용 가교 : L= 220 m(TRIAS 공법)			※ 작성자 : 박 웅 교 (☎ 02-3708-2547)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 식생매트설치( -㎡) • 칼라아스콘포장 (t=7㎝, 316㎡) • 게이트볼장( 1식) • 벤치(철재·목재, 12ea) • 목재가림벽( -m) • 보도용블럭(3,093㎡)		• 식생매트설치(3,800㎡) • 칼라아스콘포장 (t=7㎝, 540㎡) • 게이트볼장( -식) • 벤치(철재·목재, 46ea) • 목재가림벽( 221m) • 인조화강석블럭(4,135㎡)	• 식생매트설치(증 3,800㎡) • 칼라아스콘포장(증 224㎡) • 게이트볼장(감 1식) • 벤치(증 34ea) • 목재가림벽(증 221m) • 인조화강석블럭(증 4,135㎡) • 보도용블럭(감 3,093㎡)
공 사 비	70,000 천원		764,000 천원	증 694,000 천원
적 용 요 율	낙찰률(82.096 %)		협의률(91.048 %)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약일반조건 제7절 “1. 나” 계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우 관련공문 : 토목부-24868(2016.12.05.) 명품교량건설 신규공종 단가협의 결과 통보
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반 시설본부 17-4600, 2017.05.11.)
	관련규정	[지방자치단체 공사계약일반조건] 제6절 1호의 가 “설계변경”에 의거 계약금액 조정
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	· 보행친화적 명품교량 건설과 함께 교량하부 중랑천 수변공간 등 주변경관(물놀이장 등)과 조화를 이뤄 시민들이 즐겨 찾을 수 있는 쾌적한 휴식공간 조성.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 실정보고 승인요청 : 삼안 장안교 2017-072(2017.04.17.)

- 실정보고 승인알림 : 도시기반시설본부 17-4600(2017.05.11.)

- 실정보고 승인통보 : 삼안 장안교 2017-087(2017.05.11.)