설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		터널건설과 담당 박근우		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	방화대교 남단접속도로건설공사
공사개요	공사규모		도로개설 L=3,021m (교량 : 756m, 터널 : 949m, 토공 : 1,316m)
	공사기간		2005.10.05~2015.10.31
	감 리 사		(주)삼보기술단
	설 계 사		(주)다산컨설턴트외 1개사
	시 공 사		(주)금광기업, 보령종합건설(주)
자문 안건명			확장부 공사용부지 일시점용 및 지장물보상				요청금액		129,151천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 확장부 교량(램프-A 및 C)구조물은 시공완료된 기존부교량과 하부구조를 일체화하는 공법으로 현장타설말뚝 및 강교가설시 공사용부지(방화동 53-2외 5필지)의 일시점용이 불가피하여 사유지 임대료 및 지장물 이설비를 설계변경 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 교량 설치를 위한 공사용 가도부지 임대료 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 6필지(2,738㎡) - 증 감 : 증 6필지(2,738㎡)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 129,151천원 - 증 감 : 증 129,151천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 제비율적용 제외공종
별첨서류	1. 실정보고서 사본 1부.					▪공사예정시기 2014. 10~2015.10 ▪소요관급자재 - 해당사항 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	방화대교 남단접속도로 건설공사
계약금액	66,092,972천원	계약일	2005.09.29	시공사	(주)금광기업외 1사
공사기간	2005.10.05~2015.10.31	낙찰율	81.045%	설계자	(주)다산컨설턴트외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)삼보기술단
공사규모	도로개설 L=3,021m - 교량 : 756m, 터널 : 949m, 토공 : 1,316m			※ 작성자 : 업무담당 박근우 (☎ 3708-2569)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		6필지(2,738㎡)	증 6필지(2,738㎡)
공 사 비	- 천원		129,151 천원	증 129,151천원
적 용 요 율	-		-
설계변경요구자	□ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부SMIH-14-46453호, 2014.12.03)
	관련규정	공사계약일반조건 제11조 및 제19조)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ②설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	1. 확장부 교량 가설을 위한 공사용부지 임대료 및 지장물 이설비 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 (확장부 공사용부지 일시점용 및 지장물보상 협의 결과 반영 ; 방화제2014-154호, 2014.12.01)

· 실정보고 승인 (토목부SMIH-14-46453호, 2014.12.03)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

2

요청부서

토목부   담당 이상근

요청일

2014년 12월   일

공 사 명

신사사거리~고양시계간 도로개설공사

공사개요

공사규모

본선: 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복 4차로)

NATM: 서울시 방향 440m, 고양시 방향 405m, 개착터널: 서울방향 55m, 고양시방향 70m

공사기간

2012년 12월 27일 ~ 2015년 12월 26일 (36개월)

감 리 사

(주)신명건설기술공사, (주)삼보기술단, (주)무림설계기술단

설 계 사

(주)천마기술단

시 공 사

현대건설(주)

자문 안건명

암판정에 따른 토공수량 변경

요청금액

719,000천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 2014년 6월 11일, 7월 3일, 8월 18일 총 3차에 걸쳐 실시한 당 현장 종점부(서울시측) 암판정 결과를 반영

한 토공량에 대하여 실정보고 함

원설계자 의견(요약)

○ 내용 :

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 총 3차에 걸쳐 실시한 당 현장 종점부(서울측) 암판정

결과를 반영한 토공량에 대하여 공사비를 실정보고함

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 5,253,000 천원

- 변 경 : 5,972,000 천원

- 증 감 :  719,000 천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토  공

▪ 물량증감내역

흙깍기
구 분	단 위	당 초	변 경	증 감
토 사	㎥	44,154	51,028	6,874
리핑암	㎥	28,921	7,933	-20,998
발파암	㎥	29,327	43,441	14,114
사토운반
토 사	㎥	110,482	124,230	13,748
리핑암	㎥	29,044	8,056	-20,988
발파암	㎥	116,765	130,879	14,114

별첨서류

1. 실정보고서 사본 1부.

2. 감리단 검토보고서 사본 1부.

3. 관련공문 사본 1부.

▪ 공사예정시기

2015년 12월 26일까지

▪ 소요관급자재

없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
계약금액	24,014,291천원	계약일	2014년12월27일	시공사	현대건설(주)
공사기간	‘12년12월27일~’15년12월26일	낙찰율	82.12%	설계자	(주)천마기술단
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	신명건설기술공사외2개사
공사규모	본선 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복4차로) NATM : 서울시 방향 440m, 고양시 방향 : 405m 개착터널 : 서울시 방향 55m, 고양시 방향 : 70m			※ 작성자 : 업무담당 이상근 (☎ 02-3708-2579)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전			설 계 변 경 후		증/감
변 경 개 요	흙깍기 -토 사: 67,688㎥ -리핑암: 29,316㎥ -발파암: 41,359㎥		사토운반 -토 사: 110,482㎥ -리핑암: 29,044㎥ -발파암: 116,765㎥	흙깍기 -토 사: 75,562㎥ -리핑암: 8,328㎥ -발파암: 61,982㎥	사토운반 -토 사: 124,230㎥ -리핑암: 8,056㎥ -발파암: 130,879㎥	흙깍기 -토 사: 6,874㎥ -리핑암:: -20,988㎥ -발파암: 14,114㎥	사토운반 -토 사: 13,748㎥ -리핑암: -20,988㎥ -발파암: 14,114㎥
공 사 비	5,253,000천원			5,972,000천원		719,000천원
적 용 요 율	낙찰율 82.12%			낙찰율 82.12%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고사항 승인(암판정에 따른 토공 수량 변경)(토목부-23320)
	관련규정	공사계약일반조건 6절 3항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	2014년 6월 11일, 7월 3일, 8월 18일 총 3차에 걸쳐 실시한 당 현장 종점부(서울시측) 암판정 결과를 반영한 토공량에 대하여 실정보고 함
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

1. 실정보고(현건신사 제2014-231호),

2. 실정보고(암판정에 따른 토공수량 변경)승인 통보(신명신사 제2014-370호)

3. 실정보고사항 승인(암판정에 따른 토공 수량 변경)(토목부-23320)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

3

요청부서

토목부   담당 이상근

요청일

2014년 12월   일

공 사 명

신사사거리~고양시계간 도로개설공사

공사개요

공사규모

본선: 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복 4차로)

NATM: 서울시 방향 440m, 고양시 방향 405m, 개착터널: 서울방향 55m, 고양시방향 70m

공사기간

2012년 12월 27일 ~ 2015년 12월 26일 (36개월)

감 리 사

(주)신명건설기술공사, (주)삼보기술단, (주)무림설계기술단

설 계 사

(주)천마기술단

시 공 사

현대건설(주)

자문 안건명

회차로 옹벽공법 변경

요청금액

231,000천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

☑ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

☑ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 서울시측 터널 상부에 회차로 설치시 저촉되는 덕산중학교 옹벽을 회차로 공사를 위하여 철거하고자 하였으나, 덕산중학교측에서 공사 진행시 학생들의 학습권 침해방지 및 안전관리를 위하여 기존 옹벽 존치를 요구하여 기존 옹벽을 존치시키는 공법으로 변경 시공하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 :

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 덕산중학교 옹벽이 회차로구간에 저촉되어 학교측과

수차례 협의한 바 학교측에서 학습권침해방지 및 안전

관리를 위해 옹벽 존치를 요구하여 대체 공법으로 변경

시공하고자 함.

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 425,000 천원

- 변 경 : 656,000 천원

- 증 감 : 231,000 천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토   공

▪ 물량증감내역

구 분	단 위	당 초	변 경	증 감
터파기	㎥	1,599	418	-1,181
콘크리트	㎥	600	43	-557
철근가공및조립	ton	34.595	1.539	-31.054
거푸집	㎡	1,264	247	-1,017
가시설	식	1	-	-1
D-Wall	식	-	1	1

별첨서류

1. 실정보고서 사본 1부.

2. 감리단 검토보고서 사본 1부.

3. 관련공문 사본 1부.

▪ 공사예정시기

2015년 2월 28일까지

▪ 소요관급자재

이형철근(절감), 콘크리트(절감)

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
계약금액	24,014,291천원	계약일	2014년12월27일	시공사	현대건설(주)
공사기간	‘12년12월27일~’15년12월26일	낙찰율	82.12%	설계자	(주)천마기술단
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	신명건설기술공사외2개사
공사규모	본선 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복4차로) NATM : 서울시 방향 440m, 고양시 방향 : 405m 개착터널 : 서울시 방향 55m, 고양시 방향 : 70m			※ 작성자 : 업무담당 이상근 (☎ 02-3708-2579)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

터 파 기	1,599	㎥
콘 크 리 트	600	㎥
철근가공및조립	34.595	ton
거 푸 집	1,264	㎡
가 시 설	1	식
D-Wall 공 법	-	식

터 파 기	418	㎥
콘 크 리 트	43	㎥
철근가공및조립	1.539	ton
거 푸 집	247	㎡
가 시 설	-	식
D-Wall 공 법	1	식

터 파 기	-1,181	㎥
콘 크 리 트	-557	㎥
철근가공및조립	-31.054	ton
거 푸 집	-1,017	㎡
가 시 설	-1	식
D-Wall 공 법	1	식

공  사  비

425,000천원

656,000천원

231,000천원

적 용 요 율

낙찰율 82.12%

낙찰율 82.12%

설계변경요구자

▢ 발주처  ☑ 계약상대자

협의율 적용 근거

설계변경 근거

방    침

실정보고사항 승인(토목부-19198)

관련규정

공사계약일반조건 6절 3항

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

덕산중학교 옹벽이 회차로 설치구간에 저촉되어 학교측과 수차례 협의한 바 학습권침해 방지 및

안전관리를 위하여 옹벽 존치를 요구하여 대체공법으로 대체 시공하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

□ 이행     □ 미이행

□ 관련문서

1. 실정보고(현건신사 제2014-200호),

2. 실정보고(D-Wall,회차로 옹벽공법 변경)승인 통보(신명신사 제2014-320호)

3. 실정보고사항 승인(토목부-19198)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	4	요청부서		토목부 담당 이상근		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
공사개요	공사규모		본선: 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복 4차로) NATM: 서울시 방향 440m, 고양시 방향 405m, 개착터널: 서울방향 55m, 고양시방향 70m
	공사기간		2012년 12월 27일 ~ 2015년 12월 26일 (36개월)
	감 리 사		(주)신명건설기술공사, (주)삼보기술단, (주)무림설계기술단
	설 계 사		(주)천마기술단
	시 공 사		현대건설(주)
자문 안건명			방수쉬트 부착형 앵커설치비 반영				요청금액		72,600천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당 현장 라이닝철근 시공을 위한 방수쉬트 부착형 앵커설치와 관련하여 당초 설계시 방수쉬트 부착형 앵커가 설계되어 있으나 실시설계완료후 원가분석자문회의 결과에 따라 내역에 미반영 된 실정임, 이후 발주처의 기동불시특별점검시 방수쉬트 부착형 앵커를 설치하라는 지시가 있어 방수쉬트부착형 앵커를 설치하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 현장 라이닝철근 시공을위한 방수쉬트 부착형앵커 설치 관련 설계도면 및 기동불시 특별점검 지적사항에 따라 방수쉬트 부착형 앵커를 설치하고자 함. ▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 72,600 천원 - 증 감 : 72,600 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 터널공사					▪ 물량증감내역 - 당 초 : - EA - 변 경 : 845 EA - 증 감 : 845 EA
별첨서류	1. 실정보고서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 관련공문 사본 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 12월 31일까지 ▪ 소요관급자재 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
계약금액	24,014,291천원	계약일	2014년12월27일	시공사	현대건설(주)
공사기간	‘12년12월27일~’15년12월26일	낙찰율	82.12%	설계자	(주)천마기술단
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	신명건설기술공사외2개사
공사규모	본선 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복4차로) NATM : 서울시 방향 440m, 고양시 방향 : 405m 개착터널 : 서울시 방향 55m, 고양시 방향 : 70m			※ 작성자 : 업무담당 이상근 (☎ 02-3708-2579)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	방수쉬트부착형앵커 : - EA		방수쉬트부착형앵커 : 845EA	방수쉬트부착형앵커 : 845EA
공 사 비	- 천원		72,600천원	72,600천원
적 용 요 율			낙찰율 82.12%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☐ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고사항 승인(토목부-23573호, ‘14.11.28)
	관련규정	공사계약일반조건 6절 3항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	당 현장 라이닝철근 시공을 위한 방수쉬트 부착형 앵커설치 관련 설계도면 및 기동불시 특별점검 지적사항에 따라 방수쉬트 부착형 앵커를 설치하고자 실정보고 함
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

1. 실정보고(현건신사 제2014-165호),

2. 실정보고사항 승인(토목부-23573호, ‘14.11.28)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	5	요청부서		토목부 담당 이상근		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
공사개요	공사규모		본선: 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복 4차로) NATM: 서울시 방향 440m, 고양시 방향 405m, 개착터널: 서울방향 55m, 고양시방향 70m
	공사기간		2012년 12월 27일 ~ 2015년 12월 26일 (36개월)
	감 리 사		(주)신명건설기술공사, (주)삼보기술단, (주)무림설계기술단
	설 계 사		(주)천마기술단
	시 공 사		현대건설(주)
자문 안건명			초기점검비 계상				요청금액		60,390천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 착공전 설계검토시 기 협의된 사항으로 초기안전점검비가 내역에 누락되어 감리단 및 원 설계자 검토를 통하여 내역에 반영.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 단가산출서 상의 견적서를 적용하였으며, 견적서 확인결과 초기점검비는 누락되어 있으므로 반영하는 것이타당함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 착공전 설계검토시 기 협의된 사항으로 초기점검비가 내역에 누락되어 감리단 및 원설계자 검토를 통하여 내역에 반영 ▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 60,390 천원 - 증 감 : 60,390 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 -					▪ 물량증감내역 - 당 초 : 초기점검 - 식 - 변 경 : 초기점검 1 식 - 증 감 : 1 식
별첨서류	1. 실정보고서 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 관련공문 사본 1부.					▪ 공사예정시기 2015년 12월 26일까지 ▪ 소요관급자재 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신사사거리~고양시계간 도로개설공사
계약금액	24,014,291천원	계약일	2014년12월27일	시공사	현대건설(주)
공사기간	‘12년12월27일~’15년12월26일	낙찰율	82.12%	설계자	(주)천마기술단
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	신명건설기술공사외2개사
공사규모	본선 867m(터널 L=485m, 토공 L=382m), 폭원 25m(왕복4차로) NATM : 서울시 방향 440m, 고양시 방향 : 405m 개착터널 : 서울시 방향 55m, 고양시 방향 : 70m			※ 작성자 : 업무담당 이상근 (☎ 02-3708-2579)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			- 초기점검비 : 1식	초기점검비 : 1식
공 사 비			60,390천원	60,390천원
적 용 요 율			낙찰율 100%-PS단가
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고사항 승인(초기점검비 반영) 토목부-18615
	관련규정	공사계약일반조건 6절 3항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	착공전 설계검토시 기 협의된 사항으로 초기안전점검비가 내역에 누락되어 감리단 및 원설계자 검토를 통하여 내역에 반영.
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

1. 실정보고(현건신사 제2014-207호),

2. 실정보고(초기점검비 반영) 승인통보 (신명신사 제2014-304호)

3. 실정보고사항 승인(초기점검비 반영) (토목부-18615)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

6

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

한전철탑가시설 안전점검 및 자문회의 결과에 따른 보강반영

요청금액

125,000 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○한전철탑가시설의 공용기간(약2년) 경과에 따른 노후로 인한 안전점검 및 1,2차 자문회의를 실시한 결과 어스앵커(49공) 보강이 필요한 것으로 확정됨에 따라 소요 공사비 보고

원설계자 의견(요약)

○현재 락볼트로 보강된 연암층 구간은 기존 락볼트축력이 감소되고 있어 향후 가시설 구조의 안정성 확보가 필요하므로 앵커에 의한 보강 적용이 필요함.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 어스앵커 49공 추가

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :
- 변 경 :	띠장설치	238	m
	어스앵카	49	공
- 증 감 :	띠장설치	238	m
	어스앵카	49	공

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	125,000	천원
- 증 감 :	125,000	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 2014년 5월

▪ 소요관급자재 : -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010. 09. 30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

띠장설치	238	m
어스앵카	49	공

띠장설치	238	m
어스앵카	49	공

공  사  비

- 천원

125,000 천원

125,000 천원

적 용 요 율

-

신규품목-협의율(86.352%)

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

[신규단가 협의조서] 참고

설계변경 근거

방    침

실정보고(한전철탑 가시설 안전점검 및 자문회의 결과에 따른 보강반영)승인

업무연락전 SMIH-14-26209(2014.05.14)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○한전철탑가시설 안전점검 및 1,2차 자문회의 결과 가시설 보강이 필요할것으로 판단되며 준공까지 장기간이 소요될것으로 예상되는바 한전철탑부 가시설의 보강이 조속히 이뤄져야할것으로 판단됨

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림, 토목부-16904(2013.09.06)]

2)[업무지시(한전철탑가시설 및 가교안정성 확보), 토목부-21037(2013.11.14)]

3)[1,2차 자문회의 결과보고 및 승인, 토목부-3827(2014.02.26)]

4)[실정보고(한전철탑 가시설 안전점검 및 자문회의 결과에 따른 보강반영)승인,

업무연락전 SMIH-14-26209(2014.05.14)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

7

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

가교 정밀안전진단

용역결과에 따른 보강

요청금액

429,100 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○가설교량의 공용기간(2년) 경과에 따른 노후로 인한 정밀안전진단 및 자문회의를 실시한 결과 녹방지도장, 복공판 패드교체 및 포장, 변형률계설치 등을 실시하여 가교 및 보행자, 통행차량의 안전사고 위험을 방지하고자 보수,보강를 실시하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○가교 사용기한이 현재까지 2년, 향후 3년간 추가사용이 필요한바 현상태는 안정하나 장기사용에 따른 보수보강은 필요함.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 녹방지도장, 복공판패드교체, 미끄럼방지포장,

변형률계 설치

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :
- 변 경 :	방청도장	3,614	M2
	비계설치	3,329	M2
	복공판패드교체	260	M2
	미끄럼방지포장	520	M2
	변형률계	2	ea

- 증 감 :	방청도장	3,614	M2
	비계설치	3,329	M2
	복공판패드교체	260	M2
	미끄럼방지포장	520	M2
	변형률계	2	ea

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	429,100	천원
- 증 감 :	429,100	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 2014년 11월

▪ 소요관급자재 : -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010.09.30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

방청도장	3,614	M2
비계설치	3,329	M2
복공판패드교체	260	M2
미끄럼방지포장	520	M2
변형률계	2	ea

방청도장	3,614	M2
비계설치	3,329	M2
복공판패드교체	260	M2
미끄럼방지포장	520	M2
변형률계	2	ea

공  사  비

-

429,100 천원

429,100 천원

적 용 요 율

-

신규품목-협의율(86.352%)

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

[신규단가 협의조서] 참고

설계변경 근거

방    침

실정보고(임시 가설교량 보강방안 조치검토 보고)승인

업무연락전 도시기반시설본부-14-41435(2014.10.20)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○가설교량의 공용기간(2년) 경과에 따른 노후로 인한 정밀안전진단 및 자문회의를 실시한 결과 녹방지도장, 복공판 패드교체 및 포장, 변형률계설치 등을 실시하여 가교 및 보행자, 통행차량의 안전사고 위험을 방지하고자 보수,보강를 실시하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림, 토목부-16904(2013.09.06)]

2)[업무지시(한전철탑가시설 및 가교안정성 확보), 토목부-21037(2013.11.14)]

3)[가교 정밀안전진단보고서]

4)[실정보고(임시 가설교량 보강방안 조치검토 보고)승인, 도시기반시설본부-14-41435(2014.10.20)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

8

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

깎기비탈면 안정성 사면보강

요청금액

642,200 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○지하차도 구조물 시공을 위한 구조물터파기로 인하여 차량이 통행중인 도로부 및 비탈면 절취면의 낙석, 붕괴사고 위험을 방지하고자 Face Mapping을 통해 사면보강을 실시하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○본 구간의 경우 비탈면 전구간에 걸쳐 절리가 발달되어 있으며 부분적으로 풍화가 진행되어 낙석이 다수 발생하여 낙석 및 암반파괴, 표면유실, 풍화방지 등을 위해 안정성, 경제성, 시공성을 고려하여 대책방안(숏크리트, Rock Bolt 등)을 강구할 것.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 친환경생태복원공법, 락볼트, 숏크리트, 교반토

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :
- 변 경 :	법면녹화	2,740	㎡
	락볼트	56	공
	수평배수공	112	공
	숏크리트	4,799	㎡
	교반토	1,853	㎥

- 증 감 :	법면녹화	2,740	㎡
	락볼트	56	공
	수평배수공	112	공
	숏크리트	4,799	㎡
	교반토	1,853	㎥

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	642,200	천원
- 증 감 :	642,200	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 2014년 10월

▪ 소요관급자재 : -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010. 09. 30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

법면녹화	2,740	㎡
락볼트	56	공
수평배수공	112	공
숏크리트	4,799	㎡
교반토	1,853	㎥

법면녹화	2,740	㎡
락볼트	56	공
수평배수공	112	공
숏크리트	4,799	㎡
교반토	1,853	㎥

공  사  비

-

642,200 천원

642,200 천원

적 용 요 율

-

계약단가 적용

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

해당없음

설계변경 근거

방    침

실정보고(깍기 비탈면 안전성 확보방안 검토보고)승인

업무연락전 SMIH-14-38353(2014.09.24)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○지하차도 구조물 시공을 위한 구조물터파기로 인하여 차량이 통행중인 도로부 및 비탈면 절취면의 낙석, 붕괴사고 위험을 방지하고자 Face Mapping을 통해 사면보강을 실시하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[비탈면 안정성검토 보고서]

2)[업무지시(현장 안전점검 T/F팀 구성운영 철저), SMIH-14-23788(2014.04.22)]

3)[원설계자, 기술지원감리 검토의견]

4)[실정보고(깍기 비탈면 안전성 확보방안 검토보고)승인, SMIH-14-38353(2014.09.24)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

9

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

아차산배수지 상부도로 정비

요청금액

420,600 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○대절토구간 상부에 위치한 아차산배수지 상부도로의 우수가 대절토사면으로 유입됨에 따라 사면유실을 방지하고자 배수시설 및 포장을 실시하고자 하며, 또한 상수도 이설공사로 인하여 단절된 상부데크을 연결하여 시민의 접근성 및 시민편의를 향상하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○아차산배수지 상부도로 포장형식은 표층(5cm), 기층(8cm), 보조기층(15cm), 동결심도(60cm)으로 포장두께를 검토하였음.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 아스콘포장, 목재데크, 측구수로관 설치

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	콘크리트포장	960	㎡
- 변 경 :	아스콘포장	1,483	㎡
	경계석	329	m
	목재데크	239	경간
	측구수로관	238	m

- 증 감 :	아스콘포장	1,483	㎡
	경계석	329	m
	목재데크	239	경간
	측구수로관	238	m

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	27,100	천원
- 변 경 :	447,700	천원
- 증 감 :	420,600	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공, 배수및옹벽공, 포장공, 상수공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 2014년 10월

▪ 소요관급자재 : 아스콘, 레미콘,

경계석

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010. 09. 30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

콘크리트포장	960	㎡

아스콘포장	1,483	㎡
경계석	329	m
목재데크	239	경간
측구수로관	238	m

아스콘포장	1,483	㎡
경계석	329	m
목재데크	239	경간
측구수로관	238	m

공  사  비

27,100 천원

447,700 천원

420,600 천원

적 용 요 율

-

신규품목-협의율(86.352%)

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

[신규단가 협의조서] 참고

설계변경 근거

방    침

실정보고(아차산배수지 주변도로 정비계획 보고)승인

업무연락전 SMIH-14-38353(2014.09.24)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○대절토구간 상부에 위치한 아차산배수지 상부도로의 우수가 대절토사면으로 유입됨에 따라 사면유실을 방지하고자 배수시설 및 포장을 실시하고자 하며, 또한 상수도 이설공사로 인하여 단절된 상부데크을 연결하여 시민의 접근성 및 시민편의를 향상하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[업무연락전(본부장 현장점검 지적사항 업무지시), SMIH-14-22709, 2014.04.11]

2)[동부수도사업소 협의공문, 급수운영과-11310, 2014.05.19]

3)[원설계자, 기술지원감리 검토의견]

4)[실정보고(아차산배수지 주변도로 정비계획 보고)승인, SMIH-14-38353(2014.09.24)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

10

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

광장중학교 민원사항 조치방안 반영

요청금액

91,200 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○광장중학교와 접한 보강토옹벽 시공을 위하여 학교측과 협의시 화단정비, 보도블럭철거, 마사토복토 및 식재, 계단설치, 파고라설치 등의 요구사항이 있어 관계자회의(시의원, 공사관리관, 교장 등)를 거쳐 결정된 의견을 반영하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 보도블럭헐기, 경계석설치, 목재계단, 수목이식,

파고라 설치 등

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :	계단설치	1	식
- 변 경 :	흙쌓기	253	㎥
	경계석	85	m
	목재계단	25	m
	수목이식	4	주
	파고라	1	개소

- 증 감 :	흙쌓기	253	㎥
	경계석	85	m
	목재계단	25	m
	수목이식	4	주
	파고라	1	개소

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	1,100	천원
- 변 경 :	92,300	천원
- 증 감 :	91,200	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공, 포장공, 부대공, 조경공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 2014년 11월

▪ 소요관급자재 : 레미콘, 경계석

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010. 09. 30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

계단설치	1	식

흙쌓기	253	㎥
경계석	85	m
목재계단	25	m
수목이식	4	주
파고라	1	개소

흙쌓기	253	㎥
경계석	85	m
목재계단	25	m
수목이식	4	주
파고라	1	개소

공  사  비

1,100 천원

92,300 천원

91,200 천원

적 용 요 율

-

신규품목-협의율(86.352%)

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

[신규단가 협의조서] 참고

설계변경 근거

방    침

실정보고(광장중학교 민원사항 조치계획)승인

도시기반시설본부-14-44133(2014.11.12)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○광장중학교와 접한 보강토옹벽 시공을 위하여 학교측과 협의시 화단정비, 보도블럭철거, 마사토복토 및 식재, 계단설치, 파고라설치 등의 요구사항이 있어 관계자회의(시의원, 공사관리관, 교장 등)를 거쳐 결정된 의견을 반영하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[광장중학교 민원요청 공문]

2)[실정보고(광장중학교 민원사항 조치계획)승인, 도시기반시설본부-14-44133(2014.11.12)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

11

요청부서

토목부 김동현

요청일

2014년 11월

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

공사개요

공사규모

도로확장(6차로→10차로, L=900m), 지하차도 580m

공사기간

2010. 10. 11 ~ 2015. 12. 31

감 리 사

(주)수성엔지니어링

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 1개사

자문 안건명

건설기계대여대금

지급보증수수료 반영

요청금액

85,426 천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

☑ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○건설산업기본법 개정(2012.12.18)에 따른 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제3항과 같은 법 시행령 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시) 제1항을 고려한 건설기계 대여대금 지급보증수수료 비용을 반영하고자 함.

원설계자 의견(요약)

○해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 건설기계대여대금 지급보증수수료

▪ 물량 증감내역

- 당 초 :
- 변 경 :	건설기계대여대금 지급보증수수료	1	식
- 증 감 :	건설기계대여대금 지급보증수수료	1	식

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :	-	천원
- 변 경 :	85,426	천원
- 증 감 :	85,426	천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 부대공

별첨서류

1. 설계변경 심의자료 1부.

▪ 공사예정시기 : 발생시

▪ 소요관급자재 : -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	천호대로(광나루역)확장공사
계약금액	42,872 백만원	계약일	2010. 09. 30.	시공사	대보건설(주)외 1개사
공사기간	2010.10.11~2015.12.31	낙찰율	72.704%	설계자	(주)대한콘설탄트
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	도로확장(6차로→10차로, L=900m) 지하차도 580m			※ 작성자 : 김 동 현 (☎ 02-3708-2576)

□ 자문안건 설계변경 현황

구      분

설 계 변 경 전

설 계 변 경 후

증/감

변 경 개 요

건설기계대여대금 지급보증수수료	1	식

건설기계대여대금 지급보증수수료	1	식

공  사  비

-

85,426 천원

85,426 천원

적 용 요 율

-

보증수수요율

(직공비 x 0.41%)

-

설계변경요구자

☑ 발주처  ▢ 계약상대자

협의율적용 근거

해당없음

설계변경 근거

방    침

실정보고(건설기계대여대금 지급보증수수료 반영)승인

업무연락전 SMIH-14-35310(2014.08.25)

관련규정

공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에

관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.

설계변경 유형

①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설

⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡

설계변경 내용

○건설산업기본법 개정(2012.12.18)에 따른 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 제3항과 같은 법 시행령 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시) 제1항을 고려한 건설기계 대여대금 지급보증수수료 비용을 반영하고자 함.

효      과

① 공기단축(   월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진,  ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감,

⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

제비율 검증

이행여부

☑ 이행  ▢ 미이행

□ 관련문서

1)[건설산업기본법, 시행령]

2)[실정보고(건설기계대여대금 지급보증수수료 반영)승인, SMIH-14-35310(2014.08.25)]