설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	1	요청부서		방재시설부 담당 조양호		요청일		2014년 11 월 일
공 사 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
공사개요	공사규모		- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일 - 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일
	공사기간		2009. 2. 13 ~ 2015. 2. 28
	감 리 사		㈜한국종합기술 외 1개사
	설 계 사		㈜삼안 외 1개사(총인처리시설 : 우리엔지니어링)
	시 공 사		지에스건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 변경				요청금액		6,252,000천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공공하수처리시설 총인(T-P)항목에 대한 방류수질기준이 2012년 1월 1일부터 강화(2㎎/ℓ이하 → 0.5㎎/ℓ이하)됨에 따라 중랑물재생센터에서 배출되는 처리수가 강화되는 방류수 수질기준을 준수하기 위하여 당초 중랑물재생센터 시설현대화(Q=250,000㎥/일) 여과시설(MDF)을 화학응집교반과 섬유여과기(YDF)의 총인처리시설로 설계변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 기존설계와의 연계성이 우수한 시설배치, 대규모처리시설에 대한 적용실적이 많은 처리공법 선정에 따른 처리효율 향상기대 등 종합적인 검토결과 적정하게 계획됨
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 여과시설(A=1,754㎡) → 응집교반조 및 섬유여과조(A=3,351㎡) - 약품저장조 신설 (W : 3.5m x L : 8.1m x He 4.0m x 3조) ▪ 물량 증감내역 - 철근 : 당초 4,982ton →변경 5,868ton, 증 886) - 레미콘 : 당초 13,006㎥→변경 19,855㎥, 증 6,849) - 부력앵커 : 당초 12본→변경 63본, 증 51)					▪ 공사비(토목) 증감내역 - 당 초 : 129,336,643천원 - 변 경 : 135,588,643천원 - 증 감 : 6,252,000천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토 공 : 터파기, 되메우기, 성토 및 다짐 등 - 구조물공 : 레미콘타설, 방수 철근조립 등 - 가시설공 : 시트파일 등 - 기 타 : 부대공
별첨서류	1. 변경전·후 도면 사본 1부 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 원설계자 검토의견 사본 1부 4. 신규공종 등 단가결정 근거 1부 5. 설계내역서 1부 등					▪ 공사예정시기 - 2014. 12월 ▪ 소요 관급자재 - 관급자재 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공 사 명)	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
계약금액	305,962,000천원	계약일	2009. 2. 12.	시공사	지에스건설㈜ 외 3개사
공사기간	2009. 2. 13 ~ 2015. 2. 28	투찰율	94.9%	설계자	㈜삼안 외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰( ), 턴키(●), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜한국종합기술 외 1개사
공사규모	• 시설현대화 25만톤/일 • 고도처리개량 88만톤/일 • 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일			※ 작성자 : 방재시설부 조양호 (☎3708-8784)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	• 3차처리시설 25만톤/일 - (MDF 10대) • 부력앵커 : 12본 • 가 시 설 : L=238.9m		• 응집교반시설 - (급속혼화조 6조, 완속혼화조 6조) • 총인처리시설 25만톤/일 - (YDF 16대) • 약품주입시설 저장조 - 구조 RC구조물, 용량 340.2㎥ • 부력앵커 : 63본 • 가시설 : L=364.39m	• 3차처리시설 : 삭제 • 응집교반 및 총인처리 시설 등 신설 • 부력앵커 및 가시설 증가
공 사 비 (토목분야)	129,336,643천원		135,588,643천원	6,252,000천원
적 용 요 율	-		• 적용요율 : 없음 - 공사계약 일반조건 제21조 제3항(감소, 증가, 신규) 규정 적용 (입찰안내서 기준)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	• 중랑 시설현대화 총인처리시설 설계변경 단가산정기준 (방재시설부 - 8365호, ‘14. 8.29) - 공사계약 일반조건 제21조 제3항(감소, 증가, 신규) 규정 중 증가된 물량(입찰안내서)
설계변경 근거	방 침	물재생센터 총인처리시설 설치계획(행정2부시장 방침 제183호, ‘13. 5.28) 총인처리시설 설계변경 시행(설비부 - 6556호), 실정보고 승인(’방재시설부 - 11013호)
	관련규정	공사계약 일반조건 제21조 제2,3,4항(입찰안내서)
설계변경 유형	① 사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ② 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④ 민원해결, 보수, 보강 ⑤ 문화재 및 지장물 이설 ⑥ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦ 제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 법적 방류수질강화(T-P : 2.0mg/L → 0.5mg/L)에 따라 보증수질 준수를 위해 당초 기계식여과를 화학적 응집교반 + 기계식 총인처리시설로 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 중랑 시설현대화 총인처리 설계변경 실정보고 승인 (방재시설부 – 11053호, ‘14.10.31)

- 총인처리시설 설계변경 시행 (설비부 – 6556호, ‘13. 6.18)

- 물재생센터 총인처리시설 설치계획 (행정2부시장 방침 제183호, 물재생시설과 - 6942호, ‘13. 5.28)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	2	요청부서		터널건설과 담당 박근우		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사
공사개요	공사규모		고가철거 및 신설 L=753m (고가설치405m, 옹벽설치: 208m,기존보수보강: 140m)
	공사기간		2011.01.06~2014.12.31
	감 리 사		(주)한국종합기술, ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소
	설 계 사		(주)동일기술공사외 1개사
	시 공 사		(주)흥화, 보훈종합건설(주)
자문 안건명			철도보호지구내 작업시 철도안전관리자 배치				요청금액		358,650천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 철도안전법제45조(철도보호지구내에서의 행위제한), 관련근거에 의거하여 철도경계선(가장 바깥선 궤도의 끝선)으로부터 30m이내 작업시 철도안전관리자(철도운행안전관리자, 철도전기안전관리자, 열차감시원)를 관련 규정에 의해 배치하여 설계변경 하고자 함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 철도안전관리자 배치 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 철도운행안전관리자 외2인 투입 (2,213인) - 증 감 : 철도운행안전관리자 외2인 투입 (2,213인)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 358,650 천원 - 증 감 : 증 358,650 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류	도면사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부. 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪공사예정시기 2013. 04~2015.12 ▪소요관급자재 -

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사
계약금액	19,539,300천원	계약일	2010.12.30	시공사	(주흥화)외 1사
공사기간	2011.01.06~2014.12.31	낙찰율	81.57%	설계자	(주)동일기술공사외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)한국종합기술외 1사
공사규모	고가철거 및 신설 L=753m - 고가설치 : 405m, 옹벽설치 : 208m, 기존보수보강 : 140m			※ 작성자 : 업무담당 박근우 (☎ 3708-2569)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		철도운행안전관리자 외2인 투입(2,213인)	철도운행안전관리자 외2인 투입 (2,213인)
공 사 비	-		358,650 천원	증 358,650천원
적 용 요 율	-		낙찰율 81.57% 적용
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인( 토목부-22281. 2014.11.12 )
	관련규정	공사계약일반조건 제19조
설계변경 유형	③ 안정성 증진
설계변경 내용	1. 철도운행안전관리자 배치(주간 : 755인, 야간 : 245인) 2. 철도전기안전관리자 배치(야간 : 229인) 3. 열차감시원 배치(주간 : 739인, 야간 : 245인)
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 현장실정보고 (철도보호지구내 작업시 철도안전관리자 배치, 한종(서빙고)제14-262호, 2014.10.31)

· 실정보고 승인 (토목부-22281. 2014.11.12)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	3	요청부서		도시고속도로과 담당 박웅교		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사
공사개요	공사규모		• 도로 L=553m B=5～6.2m
	공사기간		2013. 12. 30 ~ 2016. 12. 29
	감 리 사		극동엔지니어링(주),(주)동일기술공사
	설 계 사		(주)수성엔지니어링,(주)대한콘설탄트,
	시 공 사		풍림산업(주), 흥일토건
자문 안건명			가설방음벽 설치 변경				요청금액		증)81,602천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사시 건설장비 소음 및 진동 저감 대책으로 환경관리시설인 가설방음벽 설치 철거 설계반영 - 설계내역서 : EGI휀스 설치철거 - 종합보고서 및 도면, 수량산출서 : 가설방음벽 ⇒ 설계내역서와 종합보고서 및 도면, 수량산출서 상호 모순 ⇒ EGI휀스 설치철거는 소음․진동등을 저감할수 없으므로 가설방음벽 설치철거로 변경
설계자 의견(요약) ○ 내용 : 공사시 건설장비 소음․진동 대책인 가설방음판넬은 설계위치,연장 및 공사진행 개월수,단가를 반영하여 감독원(감리원)이 판단하여 여건변경(작업조건,공사일정등)을 발주처와 협의조정하기 바람
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 환경관리시설 EGI 휀스 설치철거 - 변 경 : 환경관리시설 가설방음벽 설치철거 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : EGI휀스 설치철거 640m - 변 경 : 가설방음벽 설치철거 640m - 증 감 : -					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 24,673 천원 - 변 경 : 106,275 천원 - 증 감 : 81,602 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공(환경관리시설)
별첨서류	1. 실정보고 사본 1부					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 해당사항 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사
계약금액	8,899,000천원	계약일	2013. 12. 30	시공사	풍림산업(주)외 1
공사기간	2013.12.26 ~ 2016.12.29	낙찰율	88.151%	설계자	(주)대한콘설탄트외 1
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	극동엔지니어링(주)외 1
공사규모	• 도로 L=553m B=5.1～6.2m • 램프교 L=202m B=5.1～6.2m • 보도BOX 및 U-TYPE L=67m B=6.24m			※ 작성자 : 업무담당 박웅교 (☎:3708-8664)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	환경관리시설 - EGI 휀스 설치철거 L=640m		환경관리시설 - 가설방음벽 설치철거 L=640m	증 액
공 사 비	24,673 천원		106,275 천원	81,602 천원
적 용 요 율	낙찰율 88.151%		낙찰율 88.151%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(’14.11.07):도시기반시설본부-14-43438
	관련규정	공사계약일반조건 제19조2 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등 ) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	건설장비 진동소음 저감대책으로 당초 EGI 휀스 설치철거를 가설방음벽 설치철거로 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고 승인 요청 – 극감정릉 제14-94호(2014.11.4.)

· 실정보고 승인 알림 – 도시기반시설본부-14-43438호(2014.11.7.)

· 실정보고 승인 알림 – 극감정릉 제14-98호(2014.11.7.)

설계변경 소위원회 자문 요청서

문서번호	4	요청부서		방재시설부 담당 이정국		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	신림2 빗물펌프장 설치공사
공사개요	공사규모		토목:집수정 구조물 V=5,300M3 , 흡수정 W25.0 * L80.6 * H7.1 건축 : 연면적 700M2, 철골조 2층(1층:펌프실,전기실, 2층:관리실)
	공사기간		2013.01.04~2014.12.15
	감 리 사		도화엔지니어링 외 1개사
	설 계 사		(주) 삼안 외 1개사
	시 공 사		임원개발(주) 외 1개사
자문 안건명			우기대비 임시펌핑시설 반영				요청금액		162,800천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 임시 수중펌프 설치 1. 펌프가동 시기를 금년 우기전(6월)을 목표로 추진하였으나, 공사중 교통소통대책 규제심의 지연 및 2차분 흙막이 가시설 공법변경(어스앵커→버팀보)되어 절대공기 부족으로 금년 우기전(6월) 펌프가동이 불가한 실정임. 2. 흡수정을 이용한 임시펌핑 (수중펌프D400*2대, 수중펌프D350*4대 Q=140ton/min)을 실시하여 우기철 신사동 일대에 침수를 방지하고자 실정 보고함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 임시 수중펌프 설치 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 임시펌핑 1식 (Q=140ton/min) - 증 감 : 증) 임시펌핑 1식 (Q=140ton/min)					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 162,800천원 - 증 감 : 증 162,800천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 부대공
별첨서류						▪ 공사시기:2014. 7. ▪ 소요 관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신림2 빗물펌프장 설치공사
계약금액	6,626,400천원	계약일	2012.12.28	시공사	임원개발(주) 외 1사
공사기간	2013.01.04~2014.12.15	낙찰율	84.976%	설계자	㈜삼안 외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비 공사			감리자	도화엔지니어링 외 1사
공사규모	토목 - 집수정 구조물 V=5,300M3 , 흡수정 W25.0 * L80.6 * H7.1 , 토출조 1식 , 유입, 방류수문 1식 건축 - 연면적 : 700M2 철골조 2층(1층 : 펌프실, 전기실, 2층 : 관리실)			※ 작성자 : 업무담당 이정국 (☎ 3708-8764)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		임시펌핑 1식 (Q=140ton/min)	증) 임시펌핑 1식 (Q=140ton/min)
공 사 비	- 천원		162,800천원	증 162,800천원
적 용 요 율	낙찰율 84.976%		낙찰율 84.976%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당사항없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 (SMIH-14-24248 2014.04.251)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제4항
설계변경 유형	①설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ②지질, 용수 등 현장여건 상이 ⑦구조형식 변경
설계변경 내용	1. 펌프가동 시기를 금년 우기전(6월)을 목표로 추진하였으나, 공사중 교통소통대책 규제심의 지연 및 2차분 흙막이 가시설 공법변경(어스앵커→버팀보)되어 절대공기 부족으로 금년 우기전(6월) 펌프가동이 불가한 실정임. 2 흡수정을 이용한 임시펌핑 (수중펌프D400*2대, 수중펌프D350*4대 Q=140ton/min)을 실시하여 우기철 신사동일대에 침수를 방지하고자 실정 보고함.
효 과	③ 안정성 증진 ⑥ 시민편익증진 ⑦ 민원해소

· 실정보고  (자연방류수로 임시펌핑 , 신림 2014-36호, 2014.4.3)

· 실정보고 승인 통보 (자연방류수로 임시펌핑 , 신림감 2014-103호, 2014.4.28)

· 실정보고 승인 통보 (자연방류수로 임시펌핑 , SMIH-14-24248  2014.04.25)

□ 관련문서

설계변경 소위원회 자문 요청서

문서번호	5	요청부서		방재시설부 담당 이정국		요청일		2014년 11월 일
공 사 명	신림2 빗물펌프장 설치공사
공사개요	공사규모		토목:집수정 구조물 V=5,300M3 , 흡수정 W25.0 * L80.6 * H7.1 건축:연면적 700M2 , 철골조 2층(1층:펌프실,전기실 , 2층:관리실)
	공사기간		2013.01.04~2014.12.15
	감 리 사		도화엔지니어링 외 1개사
	설 계 사		(주) 삼안 외 1개사
	시 공 사		임원개발(주) 외 1개사
자문 안건명			도림천 산책로 확보 등을 위한 옹벽설치				요청금액		203,400천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 도림천 이용주민 보행공간 확보 및 준설토 적치장 부지확보를 위한 옹벽설치 1. 도림천과 봉천천의 합류부에 고가도로 및 지하철 교각 등 유수장애물이 많은 곳으로 기존제방을 옹벽으로 변경하여 도림천 통수단면 및 이용주민의 산책로(보행공간) 확보, 준설토 적치장 부지확보를 위하여 옹벽설치를 실정 보고함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 옹벽설치 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 옹벽설치 L=71.0m , H=5.0m 신설산책로 L=65.0m , B=2.0m 임시자전거 우회도로 L=98.0m , B=3.0m - 증 감 : 증) 옹벽설치 L=71.0m , H=5.0m 증) 신설산책로 L=65.0m , B=2.0m 증) 임시자전거 우회도로 L=98.0m , B=3.0m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 203,400천원 - 증 감 : 증 203,400천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 구조물공 - 부대공
별첨서류						▪ 공사시기:2014. 10. ▪ 소요관급자재 : 철근,콘크리트

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	신림2 빗물펌프장 설치공사
계약금액	6,626,400천원	계약일	2012.12.28	시공사	임원개발(주) 외 1사
공사기간	2013.01.04~2014.12.15	낙찰율	84.976%	설계자	㈜삼안 외 1사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	도화엔지니어링 외 1사
공사규모	토목 - 집수정 구조물 V=5,300M3 , 흡수정 W25.0 * L80.6 * H7.1 토출조 1식 , 유입, 방류수문 1식 건축 - 연면적 : 700M2 철골조 2층(1층 : 펌프실, 전기실 , 2층 : 관리실)			※ 작성자 : 업무담당 이정국 (☎ 3708-8764)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		옹벽설치 L=71.0m , H=5.0m 산책로 신설 L=65.0m, B=2.0m 임시자전거 우회도로 L=98.0m , B=3.0m	증) 옹벽설치 L=71.0m , H=5.0m 증) 산책로 신설 L=65.0m, B=2.0m 증) 임시자전거 우회도로 L=98.0m , B=3.0m
공 사 비	- 천원		203,400 천원	증 203,400천원
적 용 요 율	낙찰율 84.976%		낙찰율 84.976%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당사항없음
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 (SMIH-14-24248 2014.04.251)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제4항
설계변경 유형	①설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 , ②지질, 용수 등 현장여건 상이
설계변경 내용	1. 도림천과 봉천천의 합류부에 고가도로 및 지하철 교각 등 유수장애물이 많은 곳으로 기존제방을 옹벽으로 변경하여 도림천 통수단면 및 이용주민의 산책로(보행공간) 확보, 준설토 적치장 부지확보를 위하여 옹벽설치를 실정 보고함.
효 과	③ 안정성 증진, ⑥ 시민편익증진 ,⑦ 민원해소

□ 관련문서

· 관악구청 옹벽설치 검토요청  (자전거도로 옹벽설치 , 치수과-8553호, 2014.06.13)

· 관악구청 옹벽설치 검토요청  (자전거도로 옹벽설치 , SMIH-14-29768호  2014.06.18)

· 관악구청 옹벽설치 검토요청  (자전거도로 옹벽설치 , 신림감 2014-167호, 2014.06.19)

· 적용단가협의  (자전거도로 옹벽설치 , 방재시설부-9714호, 2014.10.02)

· 적용단가협의 회신 (자전거도로 옹벽설치 , 신림 2014-155호, 2014.10.10)

· 실정보고  (자전거도로 옹벽설치 , 신림 2014-111호, 2014.07.23)

· 실정보고 승인 통보 (자전거도로 옹벽설치 , 신림감 2014-336호, 2014.10.15)

· 실정보고 승인 통보 (자전거도로 옹벽설치 , 업무연락전  2014.10.14)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 최진우	요청일		2014년 11 월 일
공 사 명	월드컵대교 건설공사
공사개요	공사규모		○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)
	공사기간		2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)
	감 리 사		㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사
	설 계 사		㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단
	시 공 사		삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)
자문 안건명			수방대비 계류시설 반영			요청금액		증)315,200천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 우기철 팔당댐 방류시 한강수위 급상승으로 인한 수상구간 공사용 선박 및 장비의 안전한 대피와 한강사업본부 요구시간내 피항이 불가한 선박이 다수 있어 자체통합 계류시설을 설치⦁운영하여 공사용 선박 및 장비의 안전관리에 만전을 기하고자 함. - 관련문서: 한강사업본부 수상관리과-1538호(2013.03.29.) - 승인공문: 실정보고 승인 [SMIH-13-12148(2013.12.11.), SMIH-14-38969(2014.10.02.)]
원설계자 의견(요약) ○ 해당없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당초: - - 변경: 수방대비 계류시설 설치(1식) ▪ 물량 증감내역 - 앵커설치 및 철거 : 12.7ton 1set - 앵커설치 및 철거 : 18.0ton 1set - 앵커설치 및 철거 : 22.0ton 2set					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 315,200천원 - 증 감 : 증)315,200천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 항만공사
별첨서류	1. 감리단 검토의견서 사본 1부. 2. 관련근거 및 경위 1부. 3. 설계변경도서 1부.				▪ 공사예정시기 2013. 12. ▪ 소요관급자재 “해당없음”

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		앵커 12.7ton : 1set 앵커 18.0ton : 1set 앵커 22.0ton : 2set	앵커 12.7ton : 1set 앵커 18.0ton : 1set 앵커 22.0ton : 2set
공 사 비	-		315,200천원	증)315,200천원
적 용 요 율	-		협의율 : 82%	협의율 : 82%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [SMIH-13-12148(2013.12.11.), SMIH-14-38969(2014.10.02.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 설계도서내용 누락
설계변경 내용	- 우기철 팔당댐 방류시 한강수위 급상승으로 인한 수상구간 공사용 선박 및 장비의 안전한 대피와 한강사업본부 요구시간내 피항이 불가한 선박이 다수 있어 자체통합 계류시설을 설치⦁운영하여 공사용 선박 및 장비의 안전관리에 만전을 기하고자 함.
효 과	- 시공성 개선 및 안전성 향상
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2013-375호(2013.12.11.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-325호(2014.10.07.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH-13-12148(2013.12.11.), SMIH-14-38969(2014.10.02.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

7

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

항로표지(등부표) 설치

요청금액

증)490,000천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 수상구간은 선박의 항행이 이용되는 수역으로 공사시행시 통행 선박의 충돌로 인한 안전        사고예방이 필요한 실정이므로 항로표지법 제8조, 동법 시행령 제8조 [선박의 항행에 이용되는             수역에서 이어지는 교량 공사는 항로 표지 설치]의거 공사용 등부표를 설치·운영코자 함.

- 관련문서: 실정보고 승인 통보[월드컵(감리) 2014-175호(2014.06.05.)]

- 승인공문: 실정보고 승인 [서울특별시도시기반시설본부 토목부-10703(2014.06.03.)]

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 해당 없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: -

- 변경: 등부표(4기) 제작/설치/철거, 법정예비품, 유지관리점검, 인양점검

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
항로표지 (등부표) 제작/설치/철거	-	291,398	증291,398
법정예비품	-	57,217	증 57,217
유지관리점검 12개월 (1회/1개월)	-	53,019	증 53,019
인양점검 1회 (1회/2년)	-	88,366	증 88,366
계	-	490,000	증490,000

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : -

- 변 경 : 490,000천원

- 증 감 : 증)490,000천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 주경간교

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 09.

▪ 소요관급자재

“해당없음”

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		항로표지법에 따른 항로표지(등부표) 설치 (4기)	항로표지법에 따른 항로표지(등부표) 설치 (증4기)
공 사 비	-		490,000천원	증)490,000천원
적 용 요 율	-		협의율 : 82%	협의율 : 82%
설계변경요구자	▢ 발주처 ▢ 계약상대자 ☑ 관련기관(인천해양항만청)
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [서울특별시도시기반시설본부 토목부-10703(2014.06.03.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항 항로표지법 제8조, 항로표지법시행령 제8조제2항
설계변경 유형	- 민원해결, 보수, 보강 / 설계도서내용 불투명, 누락
설계변경 내용	- 월드컵대교 수상구간은 선박의 항행이 이용되는 수역으로 공사시행시 통행 선박의 충돌로 인한 안전사고예방이 필요한 실정이므로 항로표지법 제8조, 동법 시행령 제8조 [선박의 항행에 이용되는 수역에서 이어지는 교량 공사는 항로 표지 설치]의거 공사용 등부표를 설치·운영코자 함.
효 과	- 통행선박 안전성 증대
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 해양항만청문서 : 해사안전시설과-3136(2013,10.30.)

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-177호(2014.05.07.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-175호(2014.06.05.)

· 발주처승인문서 : 서울특별시도시기반시설본부[토목부-10703(2014.06.03.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

8

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

전구간 육상 구조물 확인보링 변경 시행

요청금액

증)254,180천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 건설공사 공사시방서에 의거하여 공사 착공전 시공자가 지반조사(보링)을 실시하여(교대,        교각마다 1개소) 지반의 상태를 확인하고 분석하여 설계기준에 적합하며, 구조적으로 안전한 기초형        식을 결정하고자 함.

- 관련문서: 실정보고 승인 통보 [월드컵(감리) 2014-158호(2014.05.26.)]

- 승인공문: 실정보고 승인 [SMIH 14-27249(2014.05.23.)

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 원설계사 의견 요청 공문 [월드컵(감리)2014-84호(2014.03.27.)

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: 전구간 육상구조물 확인보링 (14개소)

- 변경: 전구간 육상구조물 확인보링 (55개소)

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
전구간 육상구조물 확인보링 시행 실정보고	86,820	341,000	254,180
계	-	341,000	증254,180

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 86,820천원

- 변 경 : 341,000천원

- 증 감 : 증)254,180천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 기초공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 07.

▪ 소요관급자재

“해당없음”

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	전구간 (남·북단)육상구조물 확인보링 (14개소)		전구간 (남·북단)육상구조물 확인보링 (55개소)	전구간 (남·북단)육상구조물 확인보링 (증41개소)
공 사 비	86,820천원		341,000천원	증)254,180천원
적 용 요 율	낙찰률 : 64%		낙찰률 : 64%	낙찰률 : 64%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [SMIH 14-27249(2014.05.23.)]
설계변경 근거	방 침	구조물 기초설계기준 해설
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 민원해결, 보수, 보강
설계변경 내용	- 월드컵대교 건설공사 공사시방서 및 구조물 기초설계기준 해설에 의거, 공사 착공 전 시공자가 교대, 교각마다 1개소 씩 지반조사(보링)을 실시하여 지반의 상태를 확인 하고 분석하여 설계기준에 적합하며, 구조적으로 안전한 기초형식을 결정하고자 함.
효 과	- 공사 착공 전, 기초형식 구조안전성 확보
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-200호(2014.05.19.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-158호(2014.05.26.)

· 설계사문서 : 구조-14-1239(2014.04.10.)

삼보 2014-456(2014.04.14.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH 14-27249(2014.05.23.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

9

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

D구간 지하 미확인 지장물 관련 변경

요청금액

증)64,900천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 북단IC 육상구간내 D구간 복합말뚝 시공중 지하 10m 정도에 미확인 지장물이 출현하여        14공 복합말뚝 항타가 불가한 상황이 발생됨. 한국시설안전공단에서 월드컵대교 접속교 개설공사          준공도면을 확인하였으나 준공도면 미표기로 지하지장물 추정이 불가,

- 미확인 지장물 확인을 위한 자연터파기 공법 적용시 우수맨홀과 13주의 소나무 수목이 간섭되어,           SBH조절식 가설흙막이 공법으로 안전하게 지장물의 규모, 크기, 재질 등을 확인하여 잔여말뚝 14공        에 대한 말뚝공사를 시행코자함.

- 관련문서: 실정보고 승인 통보 [월드컵(감리) 2014-254호(2014.08.04.),월드컵 (감리) 2014-366호(2014.11.13.)]

- 승인공문: 실정보고 승인 [SMIH-14-33748(2014.08.01.)] / [토목부-22098(2014.11.13.)]

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 해당 없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: -

- 변경: SBH 조절식 가설 흙막이를 이용한 지장물 확인 (하늘공원/강변북로 측)

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
D구간 지하 미확인 지장물 관련 변경 (하늘공원 측)	-	44,900	44,900
D구간 지하 미확인 지장물 관련 추가 (강변북로 측)	-	20,000	20,000
계	-	64,900	증 64,900

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : -

- 변 경 : 64,900천원

- 증 감 : 증)64,900천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 10.

▪ 소요관급자재

"해당없음"

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		북단IC 육상 D구간 SBH 조절식 가설 흙막이를 이용한 지장물 확인	북단IC 육상 D구간 SBH 조절식 가설 흙막이를 이용한 지장물 확인
공 사 비	-		64,900천원	증)64,900천원
적 용 요 율	-		협의율 : 82%	협의율 : 82%
설계변경요구자	☑ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [SMIH-14-33748(2014.08.01.)] / [토목부-22098(2014.11.13.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경 내용	- 월드컵대교 북단IC 육상구간내 D구간 복합말뚝 시공중 지하 10m 정도에 미확인 지장 물이 출현하여 14공 복합말뚝 항타가 불가한 상황이 발생됨. 한국시설안전공단에서 월드컵대교 접속교 개설공사 준공도면을 확인하였으나 준공도면 미표기로 지하지장물 추정이 불가, - 미확인 지장물 확인을 위한 자연터파기 공법 적용시 우수맨홀과 13주의 소나무 수목이 간섭되어, SBH조절식 가설흙막이 공법으로 안전하게 지장물의 규모, 크기, 재질 등을 확인하여 잔여말뚝 14공에 대한 말뚝공사를 시행코자함.
효 과	- 북단IC 분류하수관 보호공의 안전성과 품질확보
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-289호(2014.07.29.) / 삼건월드컵 2014-406호(2014.11.04.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-254호(2014.08.04.) / 월드컵(감리) 2014-366호(2014.11.13.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH-14-33748(2014.08.01.)] / [토목부-22098(2014.11.13.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

10

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

북단 상수도 이설공사 등 변경

요청금액

증)189,860천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

☑ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

☑ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 북단 지장물이설공사와 관련하여 유지관리기관인 서부수도사업소와의 협의내용 반영과

서부공원녹지사업소 입수도면과의 현장상태상이 등의 사유로 인해 관부설 심도변경(H=2.75m→1.2m        변경), 이탈방지압륜 설치(207EA), 단수 불가로 인한 상수관로 부단수시공(4개소) 등을 반영하고,

- 토공사 중 유관기관인 서부녹지사업소와의 수목이식 협의지연의 사유로 관로선형변경(904m/1,394m)과         현장여건 및 작업환경이 악화된 상황(수목 미이식, 관로선형변경등)에서 작업을 수행하여 협소구간에서는          장비규격(0.7m3→0.2m3)을 변경하여 실제 작업여건 반영으로 안전성 및 시공성 확보 후 시공코자 함.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 해당 없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: 북단 상수도 이설공사

- 변경: 북단 상수도 이설공사 선형변경, 이탈방지압륜 설치, 부단수천공

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
북단 상수도 이설공사 변경 실정보고	528,600	718,460	189,860
계	528,600	718,460	증189,860

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 528,600천원

- 변 경 : 718,460천원

- 증 감 : 증)189,860천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 토공, 배수공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 01.

▪ 소요관급자재

레미콘:217M3,철근:24TON

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	북단 상수관로 이설		북단 상수관로 이설 상수관로 부단수 시공(4개소) 이찰방지압륜 시공(207개소)	북단 상수관로 이설 상수관로 부단수 시공(증4개소) 이찰방지압륜 시공(증207개소)
공 사 비	528,600천원		718,460천원	증)189,860천원
적 용 요 율	낙찰률 : 64%		협의율(낙찰률) : 82%(64%)	협의율(낙찰률) : 82%(64%)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인[SMIH-14-35729(2014.08.28.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 현장여건 상이(지질, 용수 등), 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 월드컵대교 북단 지장물이설공사와 관련하여 유지관리기관인 서부수도사업소와의 협의 내용 반영과 서부공원녹지사업소 입수도면과의 현장상태상이 등의 사유로 인해 관부설 심도변경(H=2.75m→1.2m 변경), 이탈방지압륜 설치(207EA), 단수 불가로 인한 상수관 로 부단수시공(4개소) 등을 반영하고, - 토공사 중 유관기관인 서부녹지사업소와의 수목이식 협의지연의 사유로 관로선형변경 (904m/1,394m)과 현장여건 및 작업환경이 악화된 상황(수목 미이식, 관로선형변경등)에서 작 업을 수행하여 협소구간에서는 장비규격(0.7m3→0.2m3)을 변경하여 실제 작업여건 반영으로 안전성 및 시공성 확보 후 시공코자 함.
효 과	- 실제 작업여건에 맞춘 안전시공
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 서부수도사업소 문서 : 급수운영과-11570(2013.06.03.)

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-318호(2014.08.25.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-287호(2014.08.28.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH-14-35729(2014.08.28.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

11

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치

요청금액

증)48,100천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 월드컵대교 북단IC 진출입로 공사로 인하여 난지물재생센터 유입펌프장과 서대문구청 홍제펌프장

주변에 지장물 이설 및 도로신설 등으로 인한 수목이식 및 제거 등으로 외부환경여건의 변화가 발생함.

- 외부인의 출입 등 보안문제와 유입펌프장 소음 및 분진 등의 환경문제 발생을 방지하기 위하여, 펌프장

내부가 보이지 않도록 휀스 높이 H=2.5m 이상, 휀스길이 315m, 풍하중에 견딜 수 있는 영구형 EGI휀스 설치.

- 관련문서: 실정보고 승인 통보[월드컵(감리) 2014-312호(2014.09.18.)]

- 승인공문: 실정보고 승인 [SMIH-14-37711(2014.09.18.)]

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 해당 없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: -

- 변경: EGI휀스 설치 (L=315m)

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치 실정보고	-	48,100	48,100
계	-	48,100	증 48,100

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : -

- 변 경 : 48,100천원

- 증 감 : 증)48,100천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 기타공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 11.

▪ 소요관급자재

“해당없음”

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치 (L=315m)	북단IC 난지물재생센터 주변 EGI휀스 설치 (L=315m)
공 사 비	-		48,100천원	증)48,100천원
적 용 요 율	-		협의율 : 82%	협의율 : 82%
설계변경요구자	▢ 발주처 ▢ 계약상대자 ☑ 관련기관(서울시 난지물재생센터)
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [SMIH-14-37711(2014.09.18.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 민원해결, 보수, 보강
설계변경 내용	- 외부인의 출입 등 보안문제와 유입펌프장 소음 및 분진 등의 환경문제 발생을 방지하기 위하여, 펌프장 내부가 보이지 않도록 휀스 높이 H=2.5m 이상, 휀스길이 315m, 풍하중에 견딜 수 있는 영구형 EGI휀스 설치.
효 과	- 외부인 출입, 소음, 분진 등 안전환경 관련 민원 방지 및 안정성 확보
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-330호(2014.09.02.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-312호(2014.09.18.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [SMIH-14-37711(2014.09.18.)]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

12

요청부서

토목부   담당 최진우

요청일

2014년 11 월   일

공 사 명

월드컵대교 건설공사

공사개요

공사규모

○ 총공사구간 연장 L = 1,980m

- 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로)

- 주경간교 : 855m

(비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교 : 1,125m

(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

공사기간

2010.03.22. ~ 2015.08.22.(66개월)

감 리 사

㈜포스코엔지니어링, ㈜동일기술공사

설 계 사

㈜유신코퍼레이션, ㈜삼보기술단

시 공 사

삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

자문 안건명

북단IC C․D램프 재설계에 대한 공사 반영

요청금액

감)267,490천원

자문요청사유

☑ 3,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 북단IC 기보강 33m 구간 변경 : 강관파일 인발시 강변북로 지반침하가 예상되고 인발 후 재시공시            기존 분류하수관과 장비저촉으로 시공이 불가하여 원설계사 변경 설계도서 내용을 근거로 강관파일 인발        을 하지 않고 분류하수관 상부 보호구조물을 시공하여 구조적 안정성을 확보함.

- 북단IC R-D(P2) 교각 기초 형식 변경 : 북단IC Ramp-A 구간 분류하수관 보호공 복합말뚝과 P2 교각기초        및 현장타설말뚝 2본이 상호 간섭되어 시공이 불가능하여, 원설계사에서 변경한 설계도서 내용(R-D (P2)        기초형식을 작업반경을 축소하는 단일현타말뚝(D1200:4공→D3000:1공)으로 변경)을 근거로 시공하여            시공성 및 안전성을 확보코자 하였음.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 원설계사 회신 공문 [월드컵(감리)2014-275호(2014.08.20.)]

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 당초: 북단IC 기보강 33m구간 강관 파일 인발 및 분류하수관 상단             접촉된 보강구조물 시공, 북단IC R-D(P2) 현타말뚝(D1200:4공)

- 변경: 북단IC 기보강 33m구간 강관 파일 인발 없이 분류하수관 상단             이격된 보강구조물 시공, 북단IC R-D(P2) 단일현타말뚝(D3000:1공)

▪ 물량 증감내역

(단위:천원)

구 분	당초	변경	증감
북단IC 기보강 33m 구간 변경 재설계	879,612	300,363	감 579,249
북단IC R-D(P2) 교각 기초 및 교각 변경	142,579	454,338	증 311,759
계	1,022,191	754,701	감 267,490

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 : 1,022,191천원

- 변 경 : 754,701천원

- 증 감 : 감)267,490천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 구조물공, 기초공

별첨서류

1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련근거 및 경위 1부.

3. 설계변경도서 1부.

▪ 공사예정시기

2014. 08.

▪ 소요관급자재

레미콘:496M3,철근:284TON

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	월드컵대교 건설공사
계약금액	176,063,000,000	계약일	2010.03.18	시공사	삼성물산(주)외 2개사
공사기간	2010.03.22.~2015.08.22.(66개월)	낙찰율	64%	설계자	㈜유신코퍼레이션 ㈜삼보기술단
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜포스코엔지니어링 ㈜동일기술공사
공사규모	○ 총공사구간 연장 L = 1,980m - 교 량 폭 : B=31.4m(왕복 6차로) - 주경간교 : 855m (비대칭 복합사장교 540m, 강박스거더교 315m) - 접속교 : 1,125m (남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)			※ 작성자 : 최진우 (☎3708-2542)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	북단IC 기보강 33m 구간 강관파일 인발 및 보호구조물시공 북단IC R-D(P2) 구간 현타말뚝(4공)		북단IC 기보강 33m 구간 강관파일 인발 없이 보호구조물시공 북단IC R-D(P2) 구간 단일현타말뚝	북단IC 기보강 33m 구간 강관파일 인발 없이 보호구조물시공 북단IC R-D(P2) 구간 단일현타말뚝
공 사 비	1,022,191천원		754,701천원	감)267,490천원
적 용 요 율	낙찰률 : 64%		협의율(낙찰률) : 82%(64%)	협의율(낙찰률) : 82%(64%)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	실정보고 승인 [토목부-21776(2014.11.13.)]
설계변경 근거	방 침	-
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경 내용	- 북단IC 기보강 33m 구간 변경 : 북단IC 분류하수관 기보강구간의 기존 강관파일과 강변 북로 인접거리가 2m 내외로 너무 근접되어있어 강관파일 인발시 강변북로 지반침하가 예상되고 인발 후 재시공시 기존 분류하수관과 장비저촉으로 시공이 불가하여 원설계사 변경 설계도서 내용을 근거로 구조적 안정성을 확보하여 시공코자 하였음. - 북단IC R-D(P2) 교각 기초 형식 변경 : 북단IC Ramp-A 구간 분류하수관 보호공 복합말뚝과 P2 교각기초 및 현장타설말뚝 2본이 상호 간섭되어 시공이 불가능하여 기시공한 복합말뚝 과 최소 이격거리 이상을 유지할 수 있는 교각기초의 변경설계가 불가피, 원설계사에서 작업반경을 축소하는 단일현타말뚝으로 변경하여 원설계사 변경 설계도서 내용을 근거로 R-D (P2) 기초형식을 단일현타말뚝(D1200:4공→D3000:1공)으로 변경하여 시공성 및 안전성 을 확보코자 하였음.
효 과	- 시공성 및 안전성 확보
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 설계사문서 : 월드컵(감리)2014-275호(2014.08.20.)

· 시공사문서 : 삼건월드컵 2014-387호(2014.10.17.)

· 감리단문서 : 월드컵(감리) 2014-366호(2014.11.13.)

· 발주처승인문서 : 실정보고 승인 [토목부-21776(2014.11.13.)]