설 계 변 경 사 유 서

□ 공 사 명 : 2018년 보안등 유지보수공사(연간단가 2구역)

□ 공사기간 : 2018. 2. 26 ~ 2018. 12. 31

□ 공사개요

○ 램프교체 800개, 안정기교체 350개

○ LED보안등기구 교체 및 신설 620개

○ 기타 보안등 시설보수 1식

□ 도 급 자 : ㈜정도기전  대표 이재번

□ 설계변경사유

○  2018년 주택가 빛환경 개선사업 집행잔액(시비) 설계반영(40,030원 증액)

○ 이전비 10,000천원중 6,700천원을 도급비로 사용

○  현장여건에 따른 시공물량 조정

□ 주요공종 물량변경내역

공 종	규 격	단위	변경내역			비고
			당초	변경	증·감
램프 교체	한전주,전용주,건축물	개소	800	965	증)165
케이블 교체	CV2.5㎟×2C	M	2,600	3,100	증) 500
LED보안등 교체설치	한전주	개소	340	320	감) 20

2018. 11.

도 로 과 장