설계변경 사유서

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2013년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사개요 : 소규모 포장복구 101a, 절삭 덧씌우기 201a

다. 도 급 비 : 1,086,700,000원

라. 용역기간 : 2013. 03. 05 ~ 2014. 2. 28

마. 도 급 자 : ㈜이선건설 대표 장 순 일

2. 설계변경(정산) 사유

가. 동절기 도로순찰 및 포트홀 복구계획에 의한 대기, 출동시간 정산

┌당 초 : 452시간(응급보수 주간 256, 야간 80시간 / 상시대기 주간 116시간)

└변 경 : 194시간(응급보수 주간 112시간 / 상시대기 주간 52, 야간 30시간)

나. 포장도로 유지보수 계획구간 코아채취비용 반영

※ 도로보수과-1251(2014.2.18.) : 12개노선 200개 / 긴급복구공사업체 시행

다. 산재보험료 등 제경비 정산

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,590,358,220	1,556,458,220	감)33,900,000
도급비	공급가액	987,909,091	957,090,910	감)30,818,181
	부 가 세	98,790,909	95,709,090	감)3,081,819
	계	1,086,700,000	1,052,800,000	감)33,900,000
관 급 비		503,658,220	503,658,220	-

4. 조치계획

○ 상기와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.