설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식	요청일		2016년 3 월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량: 820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			기아천교~기아대교 배수계(PC암거)획 변경			요청금액		증 362,300천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 서부간선민자도로 접속계획 변경에 따른 노선 변경으로 당초 현장콘크리트 타설 암거 및 개거를 품질관리가 용이하고 공기단축이 가능한 PC 암거 및 개거로 변경하여 설계에 반영하고자 함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 현장타설 암거 - 변 경: PC 암거 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 토공 38,214m3, 현장타설 암거 : 242m, 보강토옹벽 : 702㎡ - 변 경 : 토공 34,523m3, PC 암거 : 228m, 보강토옹벽 : 310㎡ - 증 감 : 토공 감 3,691m3, 현장타설 암거 > PC 암거 보강토옹벽 감 392m2					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 594,700 천원 - 변 경 : 957,000 천원 - 증 감 : 362,300 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 및 배수공
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련도면 1부. 5. 관련공문 1부.				▪ 공사예정시기 - 2016. 02 ~ 2016. 03 ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	172,349,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의률	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎3708-8662)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 현장타설 암거 : 242m		○ PC암거 : 228m	증
공 사 비	594,700 천원		957,000 천원	362,300 천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	협의율 82.25%
설계변경요구자	□ 발주처 ☑ 계약상대자
낙찰률 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부 16-1091 (2016.02.20)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 현장타설 암거 : 242m > PC암거 : 228m
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(기아천교~기아대교 배수계획 변경) 검토보고[서영강남 16-28호(2016.02.03.)

· 실정보고 승인 통보-도시기반시설본부-16-1091(2016.02.20.): 도기본→책임감리원]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식	요청일		2016년 3 월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			시흥UD 암 절토공법 변경			요청금액		증 485,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 옹벽구간 시공지역은 주택가(아파트, 연립 등) 밀집 및 공장지역으로 다수의 민원 및 피해보상 공사방해, 공사중단을 요구하고 있음 따라서, 현재 설계 된 터파기시공이 불가함에 따라 민원최소화 및 발파공해 (소음,지반진동,비산석)등을 저감하기 위한 미진동 공법(Type-1,기계적파쇄[일부구간 기 변경])으로 변경 하여 시공코져 함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: 터파기 / 발파암 - 변 경: 터파기 / 미진동굴착(TYPE-1) ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 터파기/발파암 : 775m3, H-PILE(300*300*10*15) : 40본 - 변 경 : 터파기/미진동굴착(TYPE-1) : 555m3, H-PILE(300*300*10*15) : - 본 - 증 감 : 터파기/발파암 : 775m3 > 터파기/미진동굴착(TYPE-1) : 555m3 H-PILE(300*300*10*15) : 40본 > H-PILE(300*300*10*15) : -본 녹생토공법 : - m2 > 녹생토공법 : 1,334m2					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 77,000 천원 - 변 경 : 562,000 천원 - 증 감 : 485,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 등
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련도면 1부. 5. 관련공문 1부.				▪ 공사예정시기 - 2016. 02월 ~ 2016년 3월 ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	172,349,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의률	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎3708-8662)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ 터파기/발파암 : 775m3		○ 터파기/미진동굴착(TYPE-1) : 555m3	증
공 사 비	77,000 천원		562,000 천원	485,000 천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	협의율 82.25%
설계변경요구자	□ 발주처 ☑ 계약상대자
낙찰률 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부 15-5958 2015.10.26)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 터파기/발파암 : 775m3 > 터파기/미진동굴착(TYPE-1) : 555m3
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(시흥UD UP-RAMP 암절토공법 변경 외) 검토보고 [서영강남 16-54호(2016.02.19)

· 실정보고 승인통보 [(도시기반시설본부-16-1225(2016.02.24.) : 도기본→책임감리원

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 시희식	요청일		2016년 3 월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2016.05.19
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			시흥대교~기아천교 배수계획 변경			요청금액		증 359,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 광명시(재해방재과) 업무협의 결과 기존 배수로의 용량 부족 이유로 연결반대 - 서부간선 지하화 추진계획(부시장 방침,13.6)에 따라 서부간선민자도로 접속계획이 변경
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: - - 변 경: SK판넬 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 터파기 7,791m3, 배수관 2,103m - 변 경 : 터파기 11,379m3, 배수관 2,317m, SK판넬 265m - 증 감 : 증 터파기 3,588m3, 배수관 214m, SK판넬 265m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 249,000 천원 - 변 경 : 608,000 천원 - 증 감 : 359,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공 및 배수공
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 관련도면 1부. 5. 관련공문 1부.				▪ 공사예정시기 - 2016. 02 ~ 2016. 03 ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	172,349,000천원	계약일	2001.12.28	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2001.12.29 ~ 2016.05.19	협의률	82.25%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 시희식 (☎3708-8662)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○ -		○ SK판넬 : 265m	증
공 사 비	249,000 천원		608,000 천원	359,000 천원
적 용 요 율	협의율 82.25%		협의율 82.25%	협의율 82.25%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
낙찰률 적용 근거	본부장 방침 제599호
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부 16-1568 (2016.03.08)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조 제1항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	신설 SK판넬 : 265m
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(시흥대교~기아천교 배수계획 변경) 검토보고 - 서영강남 16-70호(2016.02.24)

· 실정보고 승인통보 [도시기반시설본부-16-1568(2016.03.08.) : 도기본→책임감리원]