건설공사 시공평가보고서 작성 안내

	보고서 작성시 준수사항
◦ A3 크기의 현황도(종평면도)를 횡으로 작성하여 보고서에 삽입 ◦ 객관적인 증빙자료를 근거로 평가할 계획이니, 아래 각 평가 분야별 작성 요령에 따라 작성 바람 ◦ 각 평가분야별로 유색간지(색상 무관) 삽입 바람 ◦ 모든 보고서는 □글(버전 무관)로 작성바랍니다.(단, 복사본은 제외) ◦ 공사개요, 공사비, 공사위치도, 주요 구조물현황 등 공사일반현황을 목차 앞에 삽입하여 주시기 바랍니다. ◦ 항목별 관련자료 미제출 및 허위 자료를 제출 시 각 평가 항목에 대하여 최하 점수를 부과할 예정, 자료 작성에 신중 요망 ◦ 현장대리인의 작성에 대하여 책임건설사업관리자가 수정할 필요가 있는 경우 빨간색 두줄을 그어 삭제하고 그 위에 수정 기록한 후 책임건설사업관리자 서명 또는 도장날인(수정항목 옆에 “00자 삭제 00자 삽입” 명시)하여 주시기 바람 ◦ 시공사에서 “각 분야별 작성요령”에 따라 당해 현장에 대한 평가보고서를 해당공종에 맞게 작성 ◦ 바인더형태로 작성하며 반드시 갑지 뒤에 근거서류를 첨부 (근거서류 미첨부할 경우 평가 시 제출되지 아니한 항목에 대하여는 지침 제18조제7항에 따라 최하점 부여되므로 “주의” 바람)

〇〇～〇〇건설공사 시공평가 자료

2018. 00

㈜ 000건설

목    차

□ 제 출 문

□ 공사개요

1. 개요

2. 위치도

3. 조직도 및 연락처

- 책임감리업체

- 시공사

□ 평가항목별 세부기준 및 보고서 작성내용

1. 품질관리

1.1 ㅇㅇㅇ

1.2 ㅇㅇㅇ

1.3

- - - -

□ 증빙자료

1. 자료 목록

2. 증빙자료

제 출 문

20○○년  ○월  ○일   귀 기관과 계약 체결하여 추진한 「〇〇건설공사」 와 관련하여 건설기술진흥법 제50조 규정에 따른 건설공사 시공평가를 위한 보고서를 제출합니다.

2018. 00 . 00

작성자 : 소속  ○○건설   직위 현장대리인  ○○○(인)

000 귀하

확 인 서

건설기술진흥법 제50조 규정에 따라 시공업체에서 제출한 ‘OOOOO 공사’보고서를 제출함에 있어 사실과 다름없이 작성되었음을 확인합니다.

2018. 00. 00.

확인자 : 소속  ○○엔지니어링   직위 책임건설사업관리기술자  ○○○ (인)

〇〇～〇〇건설공사 시공평가 자료

Ⅰ		공사 개요

1. 개요

- 공사명 :

- 현장주소 :

- 공사종류 : 아래 구분 중 택1

· 토목 : 교통시설 / 수자원시설 / 기타토목

· 건축 : 주거 / 비주거

- 세부공사종류 : 다음 페이지 분류 중 택1

- 총공사비(발주 당시 예정금액+관급자재비) :

※전기공사, 소방시설공사, 정보통신공사 제외한 금액을 기재.

- 공정율 :    %

- 준공금액 :         (준공실적증명서 첨부요망, 없을 경우 총괄내역서 갑지)

- 공사기간 : 0000.00.00~0000.00.00.

2. 계약내용

도급방법	계약방법	계약일자	입찰방법	계약성질
단독/공동/분담/분담(공동이행 포함)/주계약자관리 중 택	일반/제한/지명/수의/기타 중 택		적격심사/최저가/턴키/대안/기술제안입찰/종합평가 중 택	장기계속/계속비/일반 중 택
수급업체정보

대표사 : 업체명 000건설 (분담분야 - 토목/건축/기계/조경 중 택)

대표자	사업자등록번호	법인등록번호	회사주소	지분율(%)	도급금액 (원단위까지)	관급자재비 (원단위까지)

구성사 : 업체명 000건설 (분담분야 - 토목/건축/기계/조경 중 택)

대표자	사업자등록번호	법인등록번호	회사주소	지분율(%)	도급금액 (원단위까지)	관급자재비 (원단위까지)

※ 구성사 수만큼 추가하여 작성

3. 담당자 연락처

소 속	역 할	성 명	연 락 처	이 메 일
000건설	현장대리인
000건축사사무소	책임감리
000엔지니어링	설계사

※ 세부공사종류 분류표

대분류	세부공사분류
건축공사	단독주택 및 연립주택 / 저층아파트(5층이하) / 고층아파트(6~15층이하) / 초고층아파트(16층이상) / 주거․사무실겸용건물 / 오피스텔 / 사무실빌딩 / 관공서건물(12층이상) / 관공서건물(11층이하) / 공장, 작업장용건물 / 경기장․운동장 / 전시(展示)시설 / 기타 문화재, 유적건물 / 교회․사찰등 종교용건물 / 상가․백화점․쇼핑센터 / 병원 / 호텔․숙박시설 / 창고, 차고, 터미널건물 / 학교 / 위험물저장소 / 전통양식건축 / 기타
토목공사	고속도로 / 고속화도로 / 일반도로 / 도로교량 / 도로터널 / 고속철도 / 일반철도 / 지하철 / 철도교량 / 철도터널 / 공업용지조성 / 택지조성 / 관개수로 및 농지정리 / 간척 / 공항 / 댐 / 항만 / 치산․치수 및 사방하천 / 정수장 / 상수도 1천mm이상 / 상수도 1천mm미만 / 하수도 / 기타토목시설
조경공사	공원조성 / 수목원 / 기타조경시설
산업설비공사	화력발전소 / 열병합발전소 / 원자력발전소 / 제철소 및 석유화학공장 등 산업생산시설 / 집단에너지공급시설 / 폐수종말처리장 / 하수종말처리장 / 쓰레기소각장 설치 / 기타 산업설비

4. 위치도 및 공사전경

- 공사위치 :    (시 점)   (종 점)

위 치 도

공 사 전 경

Ⅱ		공사 현황

1. 공사 현황

- 공사연장 :

- 폭 원 : 000 km

- 공사추진 현황

공 종	단 위	공 사 량	계 획	실 적	대 비
토 공 포장 및 부대공 터널공 공통공	m[eqn: {} ^{2}] 식 개소 식	쌓기:00000외 콘크리트 포장외 00터널 외 가설건물 외
전 체

※ 위 표는 예시를 기재한 것으로 해당 공사에 맞게 작성 후 제출요망

시공평가표(자체)

※ 자체 시공평가표에 해당란에 체크 후 합계점수 산정.

평가항목			배점	평가등급				점수
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류		우수 (×1.0)	보통 (×0.8)	미흡 (×0.6)	불량 (×0.4)
Ⅰ. 공사관리 (65)	1.품질관리 (12)	1.1 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정성 및 적기제출	3	적기제출 및 매우 적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차 보완	미제출 또는 2차이상 보완
		1.2 품질관리자 및 품질시험시설의 적정 여부	3	매우 적정	적정	부적정	매우 부적정
		1.3 품질관리의 적정성	6	문서에 의한 지적건수 1건 미만 (연평균)	문서에 의한 개선지적 1건 이상 (연평균)	시정명령	과태료, 과징금, 벌점 부과 등
	2.공정관리 (6)	2.1 공정관리계획 적정성 및 적기제출	2	적기제출 및 매우 적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차 보완	미제출 또는 2차이상 보완
		2.2 계약공기 준수여부	4	공기 단축	예정공기 준수	1%이하 지연	1%초과 지연
	3.시공관리 (20)	3.1 현장인력 배치의 적정 여부	3	매우 적정	적정	부적정	매우 부적정
		3.2 시공계획서의 적정성 및 적기제출	3	적기제출 및 매우 적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차 보완	미제출 또는 2차이상 보완
		3.3 세부공종별 시공계획서의 이행 여부	6	없음	문서에 의한 개선지적	시정명령	과태료, 과징금, 벌점 부과 등
		3.4 민원발생 건수	2	없음	1건 이하 (연평균)	2건 이하 (연평균)	2건 초과 (연평균)
		3.5 시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부	4	100% 작성	95%이상 작성	90%이상 작성	90% 미만 작성 또는 이와 관련 행정처분을 받은 경우
		3.6 설계도서 사전 검토의 적정성	2	매우 적정	적정	미흡	미실시
	4.하도급 관리 (6)	4.1 하도급 계약의 적정성	3	없음	1건	2건	3건 이상
		4.2 하도급 관리의 적정성	3	없음	1건	2건	3건 이상
	5.안전관리 (15)	5.1 안전관리계획의 적정성 및 적기제출	3	적기제출 및 매우 적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차 보완	미제출 또는 2차이상 보완
		5.2 안전관리조직 구성의 적정 여부	2	매우 적정	적정	부적정	매우 부적정
		5.3 안전관리의 적정성	4	없음	문서에 의한 개선지적	시정명령, 과태료,	과징금, 벌점 부과 등
		5.4 당해 현장의 재해율(%)	6	0.5배 이하	0.8배 이하	1.0배 이하	1.0배 초과
	6.환경관리 (6)	6.1 환경관리계획 이행의 적정성	3	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행	80%미만 이행
		6.2 환경관리의 적정성	3	없음	문서에 의한 개선지적	시정명령, 과태료,	과징금, 벌점 부과 등
Ⅱ. 목적물의 품질 및 성능 (35)	7.시공품질 (18)	7.1 공사 완성도	5	95% 이상 만족	90% 이상 만족	80% 이상 만족	80% 미만 만족
		7.2 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수비율	9	없음	1점 이하 (연평균)	2점 이하 (연평균)	2점 초과 (연평균)
		7.3 공사중지 및 재시공 여부	4	없음	1건 이하 (연평균)	2건 이하 (연평균)	2건 초과 (연평균)
	8.구조안전성 (13)	8.1 목적물 손상 및 결함,구조안전 조치 여부	5	주요부재에 전반적으로 문제점이 거의 없는 상태	주요부재에 경미한 손상, 결함이 발생한 상태	구조안전을 고려한 정밀안전점검을 실시	구조안전 확보를 위한 보강 등을 실시
		8.2 중대건설현장 사고 등의 발생 여부	8	미발생	중대결함 등 발생하였으나, 적절히 보수·보강	중대결함 등 발생후 적절한 보수·보강 미흡	시설물붕괴나 전도 등 발생
	9.창의성 (4)	9.1 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상여부	4	10건 이상	3건 이상	2건 이하	없음
(가점) (3.5)		공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정	1.5
		시공자 제안으로 인한 공사비 절감비율	1.0	1/1000 초과	0.3/1000~ 1/1000 이하	0.3/1000 미만	실적없음 (0점처리)
		품질관리자의 정규직 채용 비율	0.5	정규직 비율이 60% 이상인 경우	정규직 비율이 40% 이상인 경우	정규직 비율이 20% 이상인 경우	정규직 비율이 20% 미만인 경우 0점처리(가점없음)
		안전·보건관리자의 정규직 채용 비율	0.5	정규직 비율이 60% 이상인 경우	정규직 비율이 40% 이상인 경우	정규직 비율이 20% 이상인 경우	정규직 비율이 20% 미만인 경우 0점처리(가점없음)
(감점) (-10)		평가위원에게 금품·향응 제공	-10
합 계

평가항목별 세부기준 및 보고서 작성내용

Ⅰ		공사관리

1.1 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정성 및 적기제출

ㅇ 발주청의 요구 또는 「건설기술진흥법 시행령」제90조 의한 적기 제출 및  승인 여부 확인

적기제출 및 매우적정	적기제출 및 적정	지연제출 및 1차보완	미제출 또는 2차이상 보완

-제출지연 및 사유(해당할 경우 기재)

※ 해당란에 ○ 표기

※ 품질관리(시험)계획서 최초분이며, 적기수립이란 건설공사 착공전을 말한다.

ㅇ 평가자료

- 수립대상 확인

품질관리계획서		품질시험계획서
기 준	해당여부	기 준	해당여부
1) 총공사비가 500억 원 이상인 건설공사	○	1) 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사
2) 다중 이용 건축물로서 연면적이 30,000㎡ 이상인 건축물의 건설공사		2) 연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사
3) 당해 건설공사의 계약문서 등에 품질관리계획의 수립이 명시되어 있는 건설공사		3) 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사
4) 추정가격이 300억 원 이상인 최저가낙찰대상 건설공사로서 예정가격의 70% 미만으로 낙찰된 건설공사		5) 발주청 또는 감리자 요구사항	○
5) 발주청 또는 감리자 요구사항		-	-

- 제출시기

제목	제출일	1차보완	2차보완	최종제출일(A)	착공일(B)	지연일 (B)-(A)
품질관리계획
품질시험계획

- 승인여부

구 분	승인여부	확 인 근 거	비 고
건설사업관리자 경유(검토)
발주청 승인

ㅇ 첨부서류

- 제출공문

- 품질관리계획 또는 품질시험계획 사본

- 기술검토의견서(건설사업관리단 또는 발주청) 사본

- 도급계약서 사본(착공일을 입증할 수 있는 서류)

- 건설사업관리단 또는 발주청의 승인을 득한 실착공일 입증 자료 사본

(ex. 공문, 실공정표 등, 직인 또는 서명이 날인된 서류)

1.2. 품질관리자 및 품질시험시설의 적정 여부

ㅇ “건설공사 품질관리를 위한 건설기술자 배치기준” 부합여부

(건설기술진흥법 시행령 제50조 제4항 시행규칙 별표5)

매우 적정	적정	부적정	매우 부적정

※ “기준”란에는 건설기술진흥법의 품질관리자 배치기준, 발주청 요구 또는 공사시방서에서 정하는 기술자격을 기재하며 기준에의 적정ㆍ부적정 여부를 확인 필요

ㅇ 평가자료

00공사 품질관리자 현황

대상공사구분	등 급	성 명	당해현장 근무기간	기술자격 (등록번호)	적격 여부	변경사유
특급품질관리 고급품질관리 중급품질관리 초급품질관리	(특,고,중,초) 품질관리자		‘00.00.00~’00.00.00
	(특,고,중,초) 품질관리자

※ 공사기간 전체에 대하여 작성, 변경된 경우 사유 기재

00공사 품질관리 시설 현황

구 분	시험실 규모([eqn: m ^{2}])		비 고
	기 준	설 치
			-법정 기준이외에 품질관리를 위해 자구적으로 시설설치가 있거나 기준이상으로 설치한 경우 사유 기재

ㅇ 첨부서류

- 품질관리자 선임계, 경력증명서(착공부터 준공까지, 변경계 포함)

- 품질시험실 배치평면도(품질계획서 상 기재된 내용)

- 품질시험실 사진대지(1장)

- 품질관리자 최근경력증명서

(경력증명서 상 해당현장 근로경력 확인이 안되는 자에 한해 반드시 제출)

- 발주청 승인을 득하여 규모 및 기준 축소를 한 경우 반드시 승인공문 또는증빙문서 제출(정식 문서가 아닐 경우 불인정)

1.3. 품질관리의 적정성

ㅇ 품질관리의 부적합 관련하여 시정명령, 과태료, 벌점 부과건수

ㅇ 현지시정 이상의 지적건수(동일건 재발송은 제외)

ㅇ 외부점검기관(발주청 포함) 점검시 지적사항

-품질시험, 품질관리계획, 품질시험계획 등 품질관리의 부적합 관련

문서에 의한 지적건수 1건미만(연평균)	문서에 의한 개선지적 1건이상(연평균)	시정명령	과태료,과징금, 벌점 부과 등

※ 건수는 연평균 건수[(총 지적건수)÷(공사기간(년수))]의 반올림 값, 해당란 ○표기

ㅇ 평가자료

년도	외부점검기관명	일자	지적건수	완료여부	비고
2009년					벌점
“			0		과태료
소계			00		개선지적
20--년					시정명령
“			0		문서지적
소계			00		해당없음
총계			000

※ 비고 란에는 지적내용을 대표적인 것으로 간략히 기재

ㅇ 첨부서류

- 문서지적 공문 또는 의견서 사본

- 건설산업종합정보망(kiscon) 해당기간 행정처분내역서 사본(캡쳐 또는 인쇄)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

2. 공정관리

2.1. 공정관리계획 적정성 및 적기제출

ㅇ 계약에 따라 공정관리계획 적기 승인 여부

* 적기 미승인시 평가자가 사유 확인 후 평가

적기제출 및 매우적정	적기제출 및 적정	지연제출 및 1차보완	미제출 또는 2차이상 보완

※ 평균 지연일(총지연일 / 공사 총차수)을 산정하여 해당란에 ○ 표기

ㅇ 평가자료

문서번호	제출일	1차보완	2차보완	최종제출일(A)	착공일(B)	소요일 (A)-(B)	비 고
						(+) (-)

※ 공사 착공일로부터 30일 안에 시공자는 감리업무를 수행하는 건설사업관리자에게 제출, 건설사업관리자는 14일 이내에 검토 후 공사감독자 보고하며 공사감독관은 확인 후 승인

※ 비고란에는 제출 지연 사유 기재

구 분	검토·승인 여부	검토·승인 날짜	확 인 근 거	비 고
건설사업관리자 경유(검토)
발주청 승인

※ 별도승인 없이 제출로 행정절차를 종결한 경우 비고란에 사유 기재.

ㅇ 첨부서류

- 착공신고서 목록 및 제출공문

- 제출된 공정관리계획서 또는 예정공정표, 실공정표 사본

- 기술검토의견서(건설사업관리자 또는 발주청)

2.2. 계약공기 준수여부

ㅇ 계약공기를 기준으로 하며, 변경된 경우 변경된 계약공기를 기준

ㅇ 작성 양식

- 평가표

공기 단축	예정공기 준수	1%이하 지연	1%초과 지연

※ 평균지연율(지연율 합계 / 공사 총차수)로 산정 후 해당 란에 ○ 표기

ㅇ 평가자료

공사차수	착공일	준공(예정)일	준공일	계약일수	지연일수	지연율 ( % )	비고
1차공사
2차공사
:
계

※ 장기계속공사의 경우 차수별로 기재, 일반공사 또는 계속비공사 등의 경우 총공사기준으로 기재

※ 차수별 지연율은 (지연일수/계약일수)로 산정, 계약서 및 건설공사대장 첨부

ㅇ 첨부서류

- 도급계약서 사본(실제 체결된 표준계약서, 변경도급계약서 포함)

- 건설산업종합정보망(kiscon)에 제출한 건설공사대장 사본

- 준공검사원(준공일 기재, 건설사업관리자 직인, 발주청 제출된 사본) 사본

3. 시공관리

3.1. 현장인력 배치의 적정 여부

ㅇ 현장대리인 및 배치기술자 기준 만족 여부

- 건설산업기본법시행령 제35조 별표5. 건설기술자 현장배치기준 준수여부

- 건설기술진흥법 제55조에 따른 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준 준수여부

- 건설기술진흥법 제64조에 규정된 안전관리조직 준수여부

- 계약사항 또는 발주청 별도요구사항에 따른 건설기술자 배치 여부

- 전체 공사기간에 대하여 작성

ㅇ 작성 양식

- 평가표

매우 적정	적 정	부 적 정	매우 부적정

※ 해당 란에 ○ 표기

- 평가자료

구 분	성 명	당해현장 근무기간	등록 및 기술자격 (등록번호)	적격 여부	변경사유	비고
현장대리인
품질관리자
안전총괄책임자
분야별 안전관리자
공종별 공사책임자
공무책임자

※ 비고 란에는 발주청 요구사항이 있는 경우 관련 내용 기재

ㅇ 첨부서류

- 안전관리조직도 첨부(승인된 안전관리계획서 상)

- 배치기술자 선임계 및 경력증명서 첨부(,건설기술인협회 발급분)

- 발주청 별도요구사항이 있는 경우 비고란에 해당 사유 기재

※ 해당기간 근로 확인가능하도록 최근경력증명서

3.2. 시공계획서의 적정성 및 적기제출

ㅇ 계약문서와 관련규정에 따른 시공계획서 적기수립 여부 및 시방서와 관련규정과의 적정성 여부

- 건설사업관리자 또는 감독자의 적기 미확인 시 평가자가 사유확인 후
시공자의 귀책여부를 판단하여 평가

ㅇ 작성 양식

- 평가표

적기제출 및 매우적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차보완	미제출 또는 2차보완

ㅇ 평가자료

00공사 시공계획서 목록

공 종	제 목	제 출 일	1차 보 완	2차 보 완	최종제출일(A)	착 공 일(B)	소 요 기 간 (A)-(B)
							(+) (-)
계

구 분	공 종	검토·승인 여부	검토·승인 날짜	확 인 근 거
건설사업관리자 경유(검토)
발주청 승인

※ 시공자는 공사 착공일로부터 30일 전에 제출, 감리원은 7일(변경시 5일) 안에 검토․승인

※ 공사기간중 제출한 시공계획서(총괄ㆍ공종별) 모두 기재

ㅇ 첨부서류

- 시공계획서 제출공문 사본

- 시공계획서 검토·승인 공문 사본

- 총괄 및 세부공종 시공계획서 사본

- 공정별 실제착공 날짜를 입증할 수 있는 공사일지 또는 실공정표 사본

3.3. 세부공종별 시공계획서의 이행 여부

ㅇ 수립된 시공계획서(총괄 계획서/공종별 계획서) 이행 여부

없 음	문서에 의한 개선지적	시정명령	과태료,과징금,벌점 부과 등

ㅇ 평가자료

년도	외부점검기관명	일자	지적건수	완료여부	비고
2009년					벌점
“			0		과태료
소계			00		개선지적
20--년					시정명령
“			0		문서지적
소계			00
총계			000

※ 비고 란에는 지적내용을 대표적인 것으로 간략히 기재

ㅇ 첨부서류

- 문서지적 공문 또는 의견서 사본

- 건설산업종합정보망(kiscon) 해당기간 행정처분내역서 사본(캡쳐 또는 인쇄)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

3.4. 민원발생 건수

ㅇ 시공자 귀책에 의한 민원건수로 평가

해당없음	1건 이하(연평균)	2건 이하(연평균)	2건 초과(연평균)

※ 건수는 연평균 건수임(전체건수/공사기간, 반올림)

ㅇ 평가자료

00공사 민원처리 현황

연번	년도	민원인	제출일	종료일	민원내용	처리결과	귀책사유
1	2010년
2	“
	2011년
	“

※ 귀책사유 란에는 시공자 귀책 여부 명기

※ 처리결과 란에는 해결, 미해결로 표기

ㅇ 첨부서류 : 민원대장 등 확인하여 작성(보상관련 민원 제외), 민원대장 사본

3.5. 시공상세도 작성의 충실도 및 이행 여부

ㅇ 작성 양식

- 평가표

100% 작성	95%이상 작성	90%이상 작성	90% 미만 작성 또는 이와 관련 행정처분을 받은 경우

ㅇ 평가자료

00공사 시공상세도 목록

연번	해당 공종	착공일자	작성일자	확인일자	시공상세도 작성 이행 여부	건설사업관리자 검토·확인 여부	공사감독자 검토·확인 여부
1
10
계

※ 시공상세도 목록은 공사시방서, 발주청요구, 감리단 지시, 현장여건상 필요 등으로 작성된 모든 시공상세도의 목록 작성

※ 작성사유에는 시방서명기, 발주청요구, 감리단지시, 현장필요 등 기재

※ 시공상세도 작성 이행 여부는 ○, X 표기

ㅇ 첨부서류

- 시공상세도 목록 첨부(제출된 준공도면상 목록 등 스캔 또는 사진)

- 공사별 주요 시설물에 대한 시공 상세도면 사본 첨부

- 시공상세도 승인요청서 사본(전체)

3.6. 설계도서 사전검토의 적정성

매우 적정	적정	미흡	미실시

ㅇ 설계도서의 내용이 현장조건과 일치여부

ㅇ 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부

ㅇ 그 밖에 시공과 관련된 사항

위 세항과 관련하여 시공자가 발주자에게 서면 요청한 사항에 대해 기재.

번호	공종	부위	검토내용	착수일자	보고일자	발주청 검토·확인여부
1
2

※해당 공종의 시공 착수 전에 발견한 사항에 대하여 평가(관련문서 첨부)

ㅇ 첨부서류

- 설계도서 사전검토 보고내역서 및 제출공문(없을 경우 실정보고내역서 및 공문)

- 설계변경 검토조서 또는 회신 의견서, 공문

- 실 착공일을 입증할 수 있는 실공정표 (없을 경우 해당공종 최초 공사일지)

4.하도급관리

4.1. 하도급계약의 적정성

ㅇ 하도급계약의 부적정에 의한 발주청의 재발주 요청건수 및 타절 발생건수

- 모든 하도급 계약에 대하여 작성

- 건수는 연평균 건수임(전체건수/공사기간, 반올림)

ㅇ 작성 양식

- 평가표

해당없음	1건	2건	3건 이상

※해당란에 ○ 표기

ㅇ 평가자료

00공사 하도급 재발주 현황

공 종	업체명 (대표자)	하 도 급 부분금액 (천원)	계약금액 (천원)	낙찰률 (%)	공사기간	계약일	통보일	변경요구 사유	타절준공 여부
철근콘크리트공	(주)OO건설 (홍길동)	000,000	000,000	00.00	‘00.00.00 ~ ‘00.00.00	‘00.00.00	‘00.00.00
소 계

※ 하도급자의 부도 등 하도급자의 귀책사유는 변경요구사유에 기재

※ 하도급계약 부적정에 의한 발주청의 변경요구 포함(자체시정 포함)

ㅇ 첨부서류

- 하도급계약서(공종별 또는 업체별 순서대로 정리)

- 변경된 하도급계약서(변경계약시)

- 건설사업관리자 검토의견서(하도급계약관련)

- 준공처리한 내역서(준공일자 확인가능한 갑지)

4.2 하도급 관리의 적정성

ㅇ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」위반(공사비 지불, 재하도급 등) 건수

- 공사비 지불기간 : 「건설산업기본법」제34조 및 「하도급거래공정화에 관한 법률」 제13조 참조

없 음	1건	2건	3건 이상

※건수 해당란에 ○ 표기

ㅇ 평가자료

하도급 대금 지불 현황

하도급 대금 지불 시기 관련(단위 : 백만원				비고
업체명	계약명	하도급액	지불지연
...			건
...			건
계			건

※ 지불지연 건수는 하도급거래공정화에 관한 법률 위반(공사비 지불, 재하도급 등)으로 관련 기관에서 시정지시 등 통보된 건수 기재

재하도급 현황

하도급 업체명	재하도급 업체명	비 고
계	건	재하도급 현황 기입
...	건

※ 지불지연 건수는 하도급거래공정화에 관한 법률 위반(공사비 지불, 재하도급 등)으로 관련 기관에서 시정지시 등 통보된 건수 기재

ㅇ 첨부서류

- 공정거래위원회 또는 점검기관 등으로부터 행정지적 또는 처분 받은

경우 공문 또는 의결서 등 지적내역서 사본(위반 시)

- 직불내역서 사본 또는 하도급지킴이 실적증명서 또는 지급내역서 사본 첨부

5. 안전관리

5.1. 안전관리계획의 적정성 및 적기수립

ㅇ 발주청의 요구 또는「건설기술진흥법 시행령」제98조에 의한 안전관리계획서 (대상시설물별 세부안전관리계획서 포함)의 적기 제출 및 승인.

적기제출 및 매우 적정	적기제출 및 적정	지연제출 또는 1차 보완	미제출 또는 2차이상 보완

ㅇ 평가자료

00공사 안전관리계획서 제출 현황

제출건수	착공(예정)일 ①	착공일 ②	제출일자(일)				지연기간 ②-①	수립대상 사 유
			최초제출	1차보완	2차보완	최종제출
안전관리계획서								1종시설물 2종시설물 지하10M굴착공
공종별 세부안전관리계획

※ 비고란에는 제출 지연 사유 기재

건설사업관리자 및 발주청 검토·승인여부

구 분	건설사업관리자		발주청(공사감독자)
공종	검토·승인여부	검토의견	승인여부	승인일자	검토의견
총괄	○	적정
00공		부적정
		조건부적정

안전관리계획 작성내용	작 성 여 부
① 공사의 개요
② 안전관리 조직
③ 공정별 안전점검계획
④ 공사장 주변 안전관리 대책
⑤ 통행안전시설 설치 및 교통소통 계획
⑥ 안전관리비 집행 계획
⑦ 안전교육계획
⑧ 비상 시 긴급 조치 계획
대상 시설물별 세부 안전관리계획 작성내용	작 성 여 부
① 가설공사
② 굴착공사 및 발파공사
③ 콘크리트공사
④ 성토 및 절토공사
⑤ 해체공사
⑥ 강구조물 공사
⑦ 건축설비 공사
⑧ 공사업무수행자(감독자/감리원)가 안전관리계획의 수립이 필요하다고 인정하는 공종

※ 허위기재를 금함.

ㅇ 첨부서류

- 착공신고서 목록 및 제출공문

- 제출된 안전관리계획서 사본

- 기술검토의견서(건설사업관리자 또는 발주청)

- 대상 시설물별 세부 안전관리계획서 제출공문 및 사본

5.2. 안전관리조직구성의 적정 여부

ㅇ 발주청의 요구사항 또는 아래 요구조건 만족여부

① 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자

② 토목, 건축, 전기, 기계, 설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전 총괄책임자

③ 건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자

매우 적정	적정	부적정	매우 부적정

※ 해당란에 ○ 표기

- 평가자료

담 당	직 위	성 명	당해현장 근무기간	변경사유
(ex)총괄	안전총괄책임자
(ex)건축	안전관리책임자
(ex)건축	안전관리담당자
(ex)토목	안전관리책임자
(ex)토목	안전관리담당자
(ex)기계설비	안전관리책임자
(ex)기계설비	안전관리담당자

※ 건설기술진흥법 제64조에 따라 구성된 조직에 대해 기재.

ㅇ 첨부서류

- 발주청 승인을 득한 안전관리조직도 첨부(승인문서 등)

5.3. 안전관리의 적정성

ㅇ 안전관리대책, 안전시설 설치, 안전관리 관련 시정명령 등 행정조치 결과 기재

ㅇ 작성 양식

- 평가표

없 음	문서에 의한 개선지적	시정명령, 과태료	과징금, 벌점 부과 등

ㅇ 평가자료

년도	외부점검기관명	일자	지적건수	완료여부	비고
2009년					벌점
“			0		과태료
소계			00		개선지적
20--년					시정명령
“			0		문서지적
소계			00
총계			000

※ 비고 란에는 지적내용을 대표적인 것으로 간략히 기재

ㅇ 첨부서류

- 문서지적 공문 또는 의견서 사본

- 건설산업종합정보망(kiscon) 해당기간 행정처분내역서 사본(캡쳐 또는 인쇄)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

5.4. 당해 현장의 재해율

ㅇ 현장단위의 환산재해율을 계산하여 평균환산재해율 대비 비율로 평가

(소수 3자리 반올림)

* 평가 시점에서 가장 최근에 발표한 한국산업안전공단 평균환산재해율을 기준으로 평가

당해 현장 환산재해율

0.5배 이하	0.8배 이하	1.0배 이하	1.0배 초과

※ 환산재해율[당해현장 재해율 / 평균환산재해율] 해당란에 ○ 표기

ㅇ 평가자료

00공사 환산재해율 산출 근거

전체 공사기간	재해자 수				상시 근로자수	환산 재해율	비고
	부상	사망		계 (부상자수 + 가중치적용 사망자수)
		명	가중치 (10배)

ㅇ 첨부서류

- 관련기관 증빙 서류 첨부(산안공단에서 관리하는 시스템을 통한 해당기간 사고내역과 관련한 사본)

- 관련내역서 사본(사고경위 및 처리내용을 확인 할 수 있는 문서 등)

6. 환경관리

6.1. 환경관리계획 이행의 적정성

ㅇ 환경영향평가를 통한 변경된 사업내용의 이행여부, 협의대상공사가 아닌 경우 승인된 환경관리계획을 토대로 이행여부 확인.

ㅇ 작성 양식

- 평가표

100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행	80%미만 이행

ㅇ 평가자료

협의내용 이행 여부

번호	협의내용	이행내역	미이행사항 및 사후대책	비 고

※ 환경영향평가 협의내용의 이행내역을 모두 기재(환경영향평가 대상 시 기재)

00공사 환경관리계획서 이행 현황

항목	이행내용	이행결과	이행여부	비 고

※ 환경관리계획서에 나와 있는 이행 항목을 모두 기입하고 이행내용 및 결과를 간략히 기재하고, 이행여부를 ○ 표기

ㅇ 첨부서류

- 환경영향평가보고서(사전영향평가보고서, 사후영향평가보고서 등) 사본

- 환경관리계획서 사본

- 환경보전비 사용내역서(동일내용일 경우 1개 문서 첨부)

- 환경관련 사진대지(비산먼지설치사진, 살수차량, 차량덮개, 침사지 등)

6.2 환경관리의 적정성

ㅇ 환경관리대책, 소음진동, 분진, 폐기물 처리, 재활용 등과 관련하여 시정명령 등 행정조치를 받은 결과 기재

없음	문서에 의한 개선지적	시정명령, 과태료,	과징금, 벌점 부과 등

ㅇ 평가자료

년도	외부점검기관명	일자	지적건수	완료여부	비고
2009년					벌점
“			0		과태료
소계			00		개선지적
20--년					시정명령
“			0		문서지적
소계			00
총계			000

ㅇ 첨부서류

- 문서지적 공문 또는 의견서 사본

- 건설산업종합정보망(kiscon) 해당기간 행정처분내역서 사본(캡쳐 또는 인쇄)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

Ⅱ		목적물의 품질 및 성능

7.시공품질

7.1. 공사 완성도

ㅇ 작성 양식

- 평가표

95% 이상 만족	90% 이상 만족	80% 이상 만족	80% 미만 만족

ㅇ 총공사금액:

공 종	공사금액
00공	30억

※해당공사의 주요 공종을 구분하고, 각 공종별 공사비 가중치 적용 평가항목으로 공사금액을 반드시 기재.

ㅇ 첨부서류

- 준공금액이 기재된 총괄표 갑지 사본

- 준공검사내역서 사본(지적내용이 있을 경우)

※ 평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

7.2. 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 준수비율

ㅇ 국토교통부 벌점측정기준 1.1 내지 1.7 , 1.15내지 1.18에 해당하는 벌점을 대상으로 함. (전체 벌점부과점수 / 공사기간, 반올림)

배점	없음	1점 이하(연평균)	2점 이하(연평균)	2점 초과(연평균)
9

년도	외부점검 기관명	일자	벌점 사유 (해당규정)	벌점
2009년
“
소계
20--년
“
소계
총계

※ 벌점 사유란에 벌점 내용 및 해당 규정을 간략히 기재.

ㅇ 첨부서류

- 건설산업종합정보망(kiscon)에서 관리중인 벌점내역 캡쳐 또는 사본

*해당기간 벌점이 없어도 해당기간 동안 없음을 증명할 수 있도록 제출요망)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

7.3. 공사중지 및 재시공 여부

ㅇ 작성양식

- 평가표

없 음	1건 이하 (연평균)	2건 이하 (연평균)	2건 초과 (연평균)

ㅇ 평가자료

구 분	발생일자	내 용	사 유	근 거
	‘00.00.00			공문 및 기타증빙서류
연평균건수 : 건(반올림) [연평균건수=전체건수/공사기간(0년0월)]

ㅇ 첨부서류

- 지적내용 공문 또는 의견서(부실시공으로 인한 재시공, 공사중지 시)

8.구조안전성

8.1. 목적물 손상 및 결함, 구조안전조치 여부

ㅇ 작성양식

- 평가표

주요부재에 전반적으로 문제점이 거의 없는 상태	주요부재에 경미한 손상, 결함이 발생한 상태	구조안전을 고려한 정밀안전점검을 실시	구조안전 확보를 위한 보강 등을 실시

ㅇ 평가자료 (해당 시 기재)

구분	실시일자	해당목적물	조치내용	비 고
정밀안전점검				공문 및 기타 증빙서류
보강 실시
기타

ㅇ 첨부서류

- 점검보고서 사본(초기점검, 정기점검, 정밀점검, 정밀안전점검, 진단 등)

- 준공검사내역서 사본(지적내용이 있을 경우)

※평가기관에서 확인할 예정이오니 허위기재 금함

8.2. 중대건설현장 사고 등의 발생여부

- 평가표

미발생	중대결함 등 발생하였으나, 적절히 보수·보강	중대결함 등 발생후 적절한 보수·보강 미흡	시설물붕괴나 전도 등 발생

- 평가자료 (해당 시 기재)

구분	사고발생일	조치내용	해당규정	비 고
				공문 및 기타 증빙서류

9. 창의성

9.1. 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상 여부

- 평가표

10건 이상	3건 이상	2건 이하	없음

- 평가자료 (해당 시 기재)

공종	적용내용		사유	관련근거 (문서)
	당 초	변 경
			설계개선
			신기술 신공법 적용
			내구성 향상
			사용성 및 유지보수성 향상
총 반영건수 : 건

※ 공사비 증감없이 수급인이 검토하여 현장에 적용한 내용(관련근거 문서 및 사진 등 첨부)

ㅇ 첨부서류

- 증빙이 가능한 조서, 내역서 등

- 명시적인 증빙이 불가능할 경우 설계도면(기존)과 실제 시공사진대지 비교표

*이 경우 현장평가 시 반드시 그에 따른 사유를 구체적으로 설명바람

가점		공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정

Ⅰ		공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정(가점]

ㅇ 각각 0.5점 가점하여 합계점수는 1.5점을 초과하지 않음.대 1.5점]

ㅇ 건설공사 시공 및 종합평가지침의 (첨부) 평가표 2.의 항목에 해당하는 경우 기재

구 분	항 목	사 유	비 고
1)구조물의 특수성에 대응	나.철도교량	연장 500m 이상의 교량	(가칭)첨부문서 1.
1)구조물의 특수성에 대응	다.철도터널	아치교인 교량	(가칭)첨부문서 2.
2)도시 등의 작업환경, 사회 조건 등에 대한 대응	가.~~~	~~~	(가칭)첨부문서 3.

ㅇ 첨부서류

- 시설물정보관리종합시스템(fms) 1종시설물 신고한 내용 캡쳐 또는 사본

- 준공처리 중이라 신고가 아직 이뤄지지 않은 경우 증빙할 수 있는 문서

*도면을 통한 설명서 등 작성제출요망

- 토지이용규제정보시스템을 통해 해당지역 규제사항내역서 사본

Ⅱ		시공사 제안에 의한 개선 사항 중 발주청이 채택하여 공사비 절감된 비율[가점]

※절감비율 = 공사기간 중 절감 총액 (B) / 최종 설계변경된 공사금액(준공금액총액) (A)

번호	설계변경항목	설계변경사유	금 액(천원)			관련근거 (문서)
			당초	변경	증감
1
2
합 계			(A)		(B)	-

ㅇ 첨부서류

- 실정보고내역서 및 제출공문

- 설계변경내역서 및 검토의견서, 공문 등

시공평가보고서 증빙 첨부문서

1. 자료 목록

연 번	목 록