건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	광역횡단보도 접속부 PC기초 절단 실정보고
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사	검 토 자	책임건설사업관리기술자 강 종 빈
검토기간	2018. 02. 23.
근거공문	천마산(종로)18-038호

□ 개   요

「종로 중앙버스중앙차로 설치공사」중 #8∼#9번 이동식승강장 기초 터파기 공사 중

세운상가 앞 지중 지장물(광역횡단보도 돌PC 패널 접속슬라브) 노출에 따른 제거방안

검토

□ 추진경위

▪12/3 : 세운상가 앞 이동식 승강장 터파기중 PC패널 노출

▪12/4 : 승강장기초 현장타설가능유무 JC데코 협의

⇒근입심도 부족에 따른 PC패널 제거 요구

※광역횡단보도 설치업체의견 : PC패널 제거시 진동/충격에 따라 기설치된

PC패널 손상 우려 ⇒ 백호 깨기작업 금지요청

▪12/7 : 교통운영과->도기본 건축부(광역횡단보도 관리부서) 협의 후 토목부에

커팅 및 터파기 토목 시공사가 작업시행 요청

▪12/12 : 발주처 공정회의

⇒ 광폭횡단보도 PC패널 기초 커팅 토목시행(견적처리 반영)

▪12/15 : PC패널 기초 커팅 및 추가터파기 완료

▪12/31 : 중앙버스전용차로 임시 개통

□ 현황

▪ 현장 도로절단기 최대 절단 깊이 : 18cm (※별첨 : 도로절단기제원)

▪ PC패널 최대 절단요구 깊이 : 30cm [ PC패널20cm + ASP포장10cm ] 로

현장 내 콘크리트절단 장비로 작업이 불가하여 최소절단깊이 30cm이상의 대구경

콘크리트절단 장비 반입이 시급히 요구됨

□ 위치도

위치도

종로3가

종로4가

□ 단면도

PC패널 단면도

□현황사진

PC패널(지장물) 노출 전경	PC패널(지장물) 커팅완료 전경

□작업사진

PC패널 절단작업중(이동식#8승강장)	PC패널 절단작업중(이동식#9승강장)

□ 검토내용

○ 단가 적정여부 검토

구 분	주 요 내 용	비 고
1) 협의일시	- 일 시 : 2018년02월 일 10:00
	- 참석자 : 담당주무관, 책임감리원, 현장대리인
2) 신규비목	- 콘크리트 절단(T=400MM) (93.37%) 적용	견적가

※ 협의률 : (100+86.746%)/2= 93.373%

○ 단가적용 검토

구 분	공 종	규 격	단 위	견 적 단 가(vat별도)				비고
				견적1	견적2	견적3	적용단가
신 규	콘크리트절단	T=400mm	원	3,400,000	3,500,000	3,700,000	3,174,682
				◎			협의율 적용 (93.37%)

○ 공사비 증▪감 현황 검토

( 금액단위 : 원 )

공 종	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
1)직접공사비	-	-	3,174,682	3,174,682
2)제경비 (직공비*42.437%)	-	-	734,409	734,409
공급가액	-	-	3,909,091	3,909,091
부가세	-	-	390,909	390,909
도급공사비		-	4,300,000	4,300,000

□ 결    론

- 위 와같이 검토한 결과 이동식승강장(#8,#9) 터파기 중 PC패널 접속슬라브가 간섭

되었고, 설계주관부서인 교통운영과의 요청 및 광역횡단보도 설계·구조 검토자인

㈜동일기술공사(구조기술사:안승주)의 요구에 의해 작업방법이 컷팅으로 결정됨.

-  2017년 말 종로중앙버스전용차로 임시개통을 위해 대형컷팅기로 작업함은 적정한

것으로 판단됨. 끝.

밤고개로 확장공사외1 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자  강    종   빈