심 의 의 결 서

일 시	2015. 8. 4.(화) 09:00
장 소	노원소방서 예방과장실
의 안	소방시설 작동기능점검 보완기간 연장 건
의결내용	◯ 중계경남롯데상아아파트 시정보완명령 기간연장 신청 건 - 연기기간 : 11월30일 - 연기사유 1. 보완물량이 많고 입찰예상금액이 약 7,000만원이 예상되어 업체 선정기간이 1개월 이상 소요됨 2. 공사기간이 3개월 이상 소요됨(부재중세대가 다수감안)
심의위원 및 간사
연번	구 분		성 명			서 명		비고
1	위 원 장		김 진 웅
2	위 원		최 범 영
3	위 원		임 채 엽
4	위 원		유 용 석
5	위 원		유 인 식
6	간 사		정 재 환
7	서 기		김 덕 영