암사초록길 조성공사 추진경위

○ '09. 8 ～ ‘11. 2				: 기본 및 실시설계 용역 시행
○ '11. 2 ～ 3.				: 공사 계약 및 착공 (총차 : 9,625백만원, 1차 : 811백만원)
○ '12. 8. 29				: 디자인심의 완료 (지상형터널 → 지하BOX)
○ '12. 11 ～				: 디자인심의 결과에 따른 보완설계
○ ´13. 3. 8				: 진행사업 중지 요청 (예산담당관 ⇒ 한강사업본부)
		- 지하차도 형식으로 사업시행 시 과도한 예산의 추가 소요가 예상되어 효율적인 추진방안 강구를 위해 사업계획 재검토 필요.
○ ´13. 3. 28				: 암사초록길 예산절감 합동회의 (예산담당관)
	- 참 석		: 예산담당관, 시설부장, 강동 치수과장, 관련전문가 등 7명
	- 예산담당관 의견				: 폭 축소(50m→30m), 형식변경(지하차도→지상형터널,교량 등)
○ '13. 5. 27				: 행정1,2부시장 주재 추진방향 검토 회의
○ '13. 6. 12				: 강동구 현장 시장실
	- 외부전문가 자문 등을 통해 사업규모 및 시기 등을 재 검토한 후 추진
○ '13. 7. 5				: 전문가 자문회의 개최 (한강사업본부)
	- 지하차도 형식이 적정, 망원초록길 사후평가 결과에 따라 시행여부 결정
○ '13. 7. 15				: 자문회의 결과 알림 (한강사업본부 ⇒ 예산담당관)
○ '13. 9. 16				: 암사초록길 사업추진방향 조속 결정 요청 (한강사업본부 ⇒ 예산담당관)
○ '13. 10. 2				: 제249회 임시회 예산결산특별위원회
	- ‘13년예산 28억원 감추경(30억원→2억원)
○ '14. 3. 20				: 강동 현장시장실 거버넌스회의 (강동구청)
	- ‘14.10월 완공되는 망원초록길의 효과분석 후 공사시행 여부 결정
○ '14. 12. 15				: 망원초록길 사후평가 시행
	- 용역기간 :‘14. 12. 22 ~‘15. 8. 20 (8개월)
	- 용역기관 : 서울연구원 (공공투자관리쎈터)
○ '15. 8. 11				: 강동구청장 시장님 면담
	- 암사초록길(선사마루) 조성사업의 조속한 착공 요청
○ '15. 9. 3				: 암사초록길 조성사업 추진 협조 요청 (한강사업본부 ⇒ 예산담당관)
	- 효율적인 사업추진방안 통보 및 소요예산 확보 요청
○ '15. 9. 3				: 암사초록길 조성사업 추진 협조 요청 (한강사업본부 ⇒ 예산담당관)
	- 효율적인 사업추진방안 통보 및 소요예산 확보 요청