<예산배정요청>

용허리공원 빗물저류조 설치공사

▫ 사업부서:도시기반시설본부 방재시설부   담당자:한종수(☎3708-8772)

□ 사업개요

- 공 사 명 : 용허리공원 빗물저류조 설치공사

- 위    치 : 서초구 서초동 1324-1번지 일원(용허리공원내)

- 규    모 : 저류조설치: V=15,000㎥, 유입관로 설치 : L=237m

- 사업기간 : 2012.12.21 ~ 2014. 5.30

- 총사업비 : 11,000백만원('14년 : 1,500백만원)

▫ 추진현황 및 향후 계획

- '12.10.31 : 기본 및 실시설계

- '12.12.18 : 공사발주 및 계약

- '13. 1.17 : 사업설명회 개최(서초구 관계자, 주민대표)

- '13. 1.31 : 도로점용허가 및 공사중 교통소통대책 심의

- '13. 5.30 : 저류조 터파기 완료

- '13.12.26 : 저류조 구조물 완료

- '14. 3월 현재 : 유입부 구조개선 설계 및 복토 준비 중

▫ 예산배정계획

- 시설비                                                                                                                                                             (단위 : 백만원)

예산 과목	계	재배정부 서	기 배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역
계	1,500		-	1,500	0
시설비		방재시설부	-	1,500	0	- 노면수 유입수로 및 조경 공사

▫ 배정사유(자세히 작성)

- 노면수 유입수로 및 조경 공사

※ 2014년 공사 준공에 따른 배정 요청

▫ 검토의견(예산과 작성)