성암로 병목구간 개선공사

▫ 사업부서 : 도로계획과    도로시설계획팀     팀  장 : 한정수(행정8081)

담당자 : 이석희(행정8084)

▫ 사업개요

◦위    치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3(성산자동차학원 앞)

◦규    모 : 도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 450m

(확장 : 폭 2→4차로 연장 200m)

◦공사기간 : 2014. 2 ~ 2015. 4.

◦총사업비 : 7,250백만원

▫ 추진현황 및 향후계획

◦'11.02.11 : 성암로 병목구간 개선계획 수립(도로계획과)

◦'11.06.21 : 투자심사(도로계획과)

◦'12.04.16 : 타당성심사

◦'12.05.16~'13.2.28 : 기본 및 실시설계용역 시행

◦ '13.12.05 : 도시계획시설사업 실시계획 고시

◦ '14.02.24 : 공사 착수

▫ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		예산현액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계		3,500,000		2,538,386	961,614
시설비	공사비	3,500,000	2,538,386	23,270	938,344	공사용 가도 철도부지 점용 사용료
	보상비	0	0	0	0

※ 예산과목 : (도시개발특별회계) 도로건설(도시개발특별회계), 간선도로망확충, 성암로 병목구간 개선,

시설비 및 부대비, 시설비

※ 배정처 : 도시기반시설본부 토목부

▫ 배정사유(자세히 작성)

◦ 성암로 병목구간 개선공사를 위한 철도부지 공사용 가도 점용에 따른 사용료