- 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사 -

오류IC교(김포방향) 교통처리 계획

2020. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사 -

오류IC교(김포방향) 교통처리 계획

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사

ㅇ 위    치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC간

ㅇ 규    모 : 구조개선 폭 30m(6차로), 연장 1,100m

(개봉1동사거리 교차로 개선 및 오류 IC교 교량신설)

ㅇ 공사기간 : ‘16.03.25 ~ ‘23.12.31

ㅇ 공 사 비 : 43,800백만원

ㅇ 시 공 사 : ㈜삼일기업공사외 1개사

ㅇ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 3개사

Ⅱ		오류IC교(김포방향) 교통우회 위치도

Ⅲ		오류IC교(김포방향) 교통처리(우회) 계획

1) 교통우회 대상 : 남부순환로(김포방향)

2) 세부작업 및 시간계획

날 짜	시 간	작업내용	작업구간	비 고
12월10일 (주 간)	09:00~10:30	ㆍ신설오류IC교(사당) 내부 차선도색 ㆍ신설오류IC교(사당) 내부 김포방향 및 부천방향 교통안전시설물 설치	신설 오류IC (사당) 상부슬라브
	10:30	ㆍ김포방면 교통 사당방면으로 변경	오류IC (김포) 남부순환로	교통전환 (우 회)
	10:30~13:00	ㆍ김포방면 임시차선 도색 및 기존차선 제거	“	1차로씩 제거
	13:00~15:00	ㆍ김포방면 교통안전시설물 설치 및 작업종료	“

Ⅳ		교통방송 홍보요청계획

1) 교통방송 홍보

- 교통통제 시행 5일 전부터 1일 3회 이상 공사내용 및 공사구간 정보 방송

관련기관	홍보일정	자료제공 주관부서	비 고
교통방송	교통통제 5일 전부터 교통통제기간 완료시까지	도시기반시설본부	교통방송본부

교통방송 안내문(예시)
남부순환로 김포방향 오류IC교 철거공사로 인한 우회도로 교통전환을 위해 차선도색 공사가 2020.12.10. 09:00~15:00까지 진행됨에 따라 교통정체가 발생될 예정이오니 남부순환로 오류IC교를 이용하는 운전자께서는 참고하시기 바랍니다.