설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 전병철

요청일

2017년 2월   일

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

공사개요

공사규모

램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함)

램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)

공사기간

2016. 04. 01 ~ 2020. 03. 05

감 리 사

㈜이산, ㈜천일, ㈜한맥

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 2개사

자문 안건명

교통시설물 원인자 부담공사

요청금액

증) 420백만원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

☑ 제도, 기준변경

☑ 유관기관 협의 미흡

0설계변경사항(요약)

○ 내용 : 교통시설물 실시설계시 서울시 시방서 품질기준이 미적용된바, 변경된 서울시 시방서 기준적용 및 경찰청규제심의 결과를 적용하여 원인자 부담공사로 설계변경.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 재설계 필요

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

구 분		단위	당 초	변 경	비고
시설비	본선도색	식	기계식 융착성형	수동식 P3(R5)(야간)
	임시도색	식	수동식 페인트	수동식 P3(R5)(야간)
	차선제거	식	가스이용 제거	건식흡입형,수동식
용역비	설계용역	식	미반영	반영
	감리용역	식	미반영	반영

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :  274백만원

- 변 경 :  694백만원

- 증 액 :  420백만원

▪ 설계변경 주요 공종

- 본선차선도색변경

- 임시차선도색변경

- 교통시설물 설계용역

- 교통시설물 공사감리비

별첨서류

본부 방침서 1부.

2. 감리단 검토보고서 사본  1부.

3. 변경 설계내역서 1부.

▪ 공사예정시기

: 2017. 5 ~ 2020. 03

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
계약금액	26,452,343 천원	계약일	2016. 03. 18	시공사	대보건설(주)외 2개사
공사기간	2016.04.01 ~ 2020.03.05	낙찰율	71.98%	설계자	대한콘설탄트(주)
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	(주)이산 (주)천일 (주)한맥
공사규모	램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함) 램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)			※ 작성자 : 전병철 (☎ 3708-2568)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증)/감)
변 경 개 요	- 본선도색 : 4,059㎡ - 본선 도로표지병 : 564개소 - 임시도색 : 5,784㎡ - 임시차선제거 : 5,784㎡ - 임시 도로표지병 : -개소		- 본선도색 : 24,269m - 본선 도로표지병 : 617개소 - 임시도색 : 40,046m - 임시차선제거 : 32,669m - 임시 도로표지병 : 351개소 - 교통시설물 설계용역 1식 - 교통시설물 감리용역 1식	- 본선도색 : 감) 415㎡ - 본선 도로표지병 : 증) 53개소 - 임시도색 : 증) 229㎡ - 임시차선제거 : 감) 879㎡ - 임시 도로표지병 : 증 351개소 - 교통시설물 설계용역 증) 1식 - 교통시설물 감리용역 증) 1식
공 사 비	274백만원		694백만원	증) 420백만원
적 용 요 율	전체 낙찰율 71.98%		협의율(85.98%) 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방자치단체를당사자로하는계약에관한시행령제74조4조3항
설계변경 근거	방 침	올림픽대교 남단IC 교통처리계획통보(하달)-(교통관리과-11562. 2016.04.29)
	관련규정	노면표시 공사설계 설명서(2016.01)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⓺공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	교통시설물 실시설계시 서울시 시방서 품질기준이 미적용된바, 변경된 서울시 시방서 기준적용 및 경찰청규제심의 결과를 적용하여 원인자 부담공사로 설계변경.
효 과	① 공기단축( 월), ⓶ 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⓹ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율검증 이행여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

- 실정보고(교통안전시설 원인자 부담공사)(올대감 16-055(2016.10.11.))

교통시설물 원인자 부담공사 실정보고 승인(도시기반시설본부-16-9378(2016.11.01.))