용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : 오금배수지 등 4개소 정밀안전점검 용역

2. 용역위치

○ 오금배수지 등 4개소(서울특별시 송파구, 하남시 관내)

3. 용역목적

○ 본 용역은 강동수도사업소 관내 오금배수지 등 4개소 배수지․가압장   시설물에 대한 현장조사 및 각종 시험에 의해 시설물의 물리적, 기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고, 이에 대한 신속하고 적절한 조치 및 보수․보강방법을 제시하여 시설물의 안전을 확보함에 있음.

4. 용역개요 : 배수지 2개소, 가압장 2개소

시설물명	용 량	시 설 개 요	준공연도	비 고
오금배수지	8,000㎥	철근콘크리트 : 2지 (매입형)	1987년	정밀안전점검
오금 아리수올림터	15,050㎥/일 (75HP×4)	철근콘크리트 : (지상1/지하1)	1987년	정밀안전점검
거마배수지	3,000㎥	철근콘크리트 : 2지 (매입형)	1982년	정밀안전점검
거마 아리수올림터	12,000~16,000㎥/일 (150HP×4)	철근콘크리트 : (지상1/지하1)	1982년	정밀안전점검

5. 용역 기간 : 착수일로부터 210일간

6. 예정공정표

추진일정 과업내용	30일							60일							100일							150일							210일							비고
1. 현황조사 및 과업 수행계획서 작성
2. 외관조사 및 시험
3. 조사자료검토 및 분석
4. 종합적인 상태평가
5. 보고서 작성