보 고 서
			담당	팀장
				전결 08/29
문서번호	공사감독2처-10648
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.08.29.
공개여부	공개
제 목	작업구 가시설 추가 설치 검토 보고

1. 공사 현황

가. 공 사 명：공덕로타리~한겨레신문앞간 송배수관 정비공사

나. 공사기간：2016. 7. 25∼2017. 1. 20(180일 간).

다. 공사금액：926,6030,00원(도급액 876,523,000＋관급 50,080,000)

라. 공사개요：배급수관 정비 600㎜×725m(비굴착),600㎜×12m(굴착)

마. 발 주 청：서부수도사업소(급수운영과)

바. 계약상대자：보일씨앤씨 주식회사 강향주

2. 보고 내용

○ 계약상대자인 보일씨앤씨(주) 강향주가 작업구의 추가 설치와 비굴착 갱생 연장이 불가피하다는 공문을 제출(2016. 8. 27)함

가. 발주청 업무담당자와 현장 확인 결과 #1 작업구(공사 시점)의 위치를 공덕로타리 쪽으로 약 20m를 이동시켜 설치.

나. #1 작업구와 #2 작업구 사이의 연장이 175m로 콜탈 제거와 반전 작업 시 산소농도의 부족으로 인한 안전사고, 공사 시간 증가 등의 소지가 있어 작업구(구조안정성 검토 도면을 축소하여 3.0m×2.0m로 설치) 1개소를 추가로 설치.

3. 검토 내용

가. #1 작업구의 위치를 이동시켜 갱생공 연장이 20m 증가：

약 9,000,000원 증액

나. #1 작업구와 #2 작업구 사이에 작업구(3.0m×2.0m)를 추가：

약 6,000,000원 증액

4. 행정 사항

○ 위 내용을 발주청에 제출하여 회신결과에 따라 시행하고자 하오며 실제 시공한 수량에 대하여 설계변경(정산)에 반영하고자 합니다.

붙임  관련 공문 각 1부.  끝.