준공기한 연기의뢰서

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 공항입구지하차도 보수공사

나. 공사기간 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 8. 16

다. 도 급 비 : 131,793,160원

라. 계 약 자 : ㈜피플웍스커뮤니케이션 대표  박 상 현

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

○ 당  초 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 8. 16

○ 변  경 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 9. 6

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 강서도로사업소(시설보수과)

다. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 벽체 신축이음부 재설치를 위한 단면손상부 보강방안 검토 및 시공에 따른 절대공기 부족

2019.  8.

작성자 : 시설6급         강 연 홍 (인)

확인자 : 시설보수과장     박 병 연 (인)

서울특별시 경리관 귀하