준공기한 연기의뢰서

1. 용역 현황

가. 용 역 명 : 목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외1개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 11. 19

다. 도 급 비 : 208,190,000원

라. 계 약 자 : ㈜세안안전진단 외1   대표  박 기 열 외1

2. 상기 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

○ 당  초 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 11. 19

○ 변  경 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 12. 27

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 강서도로사업소(시설보수과)

다. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 용역수행 추가과업지시 및 시설물 계측에 따른 절대공기 부족

2019.  10.

작성자 : 시설6급         강 연 홍 (인)

확인자 : 시설보수과장     박 병 연 (인)

서울특별시 경리관 귀하