준공기한 연기의뢰서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 잠원2빗물펌프장 신설공사

나. 도 급 자 : 에스트건설(주)

다. 공사현황

구 분	도 급 액(천원)	준 공 기 한	비고
총 차	10,597,976	2013. 01. 03 ~ 2017. 07. 31
3차분(2회)	5,063,856	2016. 04. 06 ~ 2017. 07. 31

2. 상기 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다

가. 준공기한 연기현황

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013. 01. 03. ~ 2017. 07. 31.	2013. 01. 03. ~ 2018. 02. 28.	증7개월
3차분(2회)	2016. 04. 06. ~ 2017. 07. 31.	2016. 04. 06. ~ 2017. 09. 30	증2개월

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

다. 지연배상금부과여부   : 미부과

라. 준공기한 연기사유

○ `17년 수방대비를 위한 하수암거(1@2.0×3.0) 우선시공으로 하부 구조물설치 시공순서 변경과 Fast Track방식으로 설계완료 전 예상 했던 `17.7.31.까지 사업완료는 절대공기 및 `17년 사업예산이 부족하며 계약 행정절차 이행에 따른 소요일수를 감안하여 공기연장이 필요함.

2017.  07.   .

작성자 : 지방시설주사보    송영배

확인자 : 방재시설부장      남궁용

서울특별시(분임)재무관 귀하