공사기간 연기 조치 의뢰서

1. 공사내용

가. 공 사 명 : 서울숲공원 제비서식처 조성공사

나. 도 급 액 : 금33,680,000원(금삼천삼백육십팔만원)

다. 도 급 자 : (주)청신종합조경 대표 손 신 자

라. 계 약 일 : 2016. 10. 27

마. 착 공 일 : 2016. 10. 28

바. 준공기한 : 2016. 11. 16

2. 위 공사의 공사기간을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 연기

ㅇ 당 초 : 2016. 10. 28 ~ 2016. 11. 16

ㅇ 변 경 : 2016. 10. 08 ~ 2016. 11. 30

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소 (서울숲공원)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

- 우천으로 인한 공사기간 연장

2016.   11.    .

동부공원녹지사업소 서울숲공원관리소장   윤 학 수 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하