보 고 서
			담당	팀장	공사감독1처장
					08/12
문서번호	공사감독1처-4782
보존기간	5년		협 조	대리
결재일자	2019.08.12.
공개여부	공개
제목	준공기한 연기 검토보고(공항입구지하차도)

1		공사현황

가. 공 사 명: 공항입구 지하차도 보수공사-강서

나. 공사기간: 2019. 04. 19 ~ 08. 16

다. 도 급 비: 131,793,160원

라. 공사개요: 표면보수 414m2, 단면보수 57m2, 균열보수 57m

마. 도 급 자: (주)피플웍스커뮤니케이션 대표 박상현

바. 발 주 청: 강서도로사업소 시설보수과

2		보고내용

상기 공사의 시공사가 제출한 (PW-2019-0803, 2019.08.12.) 준공기한 연기요청에 대한　검토보고 임.

가. 준공기한 연기 요청 내용

1) 연기요청 사유

- 신축이음부 보강: 신축이음 재설치를 위해 손상단면 보강을 위한 시공방법검토기간 및 보강작업 기간 소요

2) 준공기한 연기 요청일

당 초	변 경	비 고
2019.04.19 ~ 2019.08.16	2019.04.19 ~ 2019.09.06	21일 연장

나. 검토의견

1) 준공기한 연기일수 산정

- 보강방안 검토 및 보강작업 소요일수: 40일(검토 35일 + 시공 5일)

- 잔여 공정을 감안한 연기 요청 일수: 21일

2) 준공기한 연기 검토

- 시공사가 요청한 준공기한 연기는 신축이음부 보강방안 검토기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 잔여 공정을 고려하여 21일 연기함이 타당함.

3) 준공기한 연기

당초: 2019. 04. 19 ~ 2019. 08. 16

변경: 2019. 04. 19 ~ 2019. 09. 06 (21일 연기)

4) 연기사유 귀책소재: 발주청

5) 지체상금 부과여부: 미부과

3		조치사항

상기사항을 발주청에 제출하여 준공기한 연기를 요청하고자 함.

붙임: 1. 도급자 공문 1부.

2. 준공기한 연기원 1부.  끝.