준공기한 연기 검토보고

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 응봉근린공원 환경개선공사

나. 도 급 액 : 금333,091,700원

다. 공사기간 : 2019. 10. 22 ~ 2020. 1. 19

라. 발 주 처 : 서울시 동부공원녹지사업소 시설과

마. 도 급 자 : 주계약자 : 민안종합건설㈜ 대표 이미란

부계약자 : ㈜나람조경개발 대표 이기자

2. 준공기한 연기 검토

가. 관련근거

- 도급사 준공기한 요청 건[민안-제2019-12-10(2019.12.10.)]

- 공사품질 저하 방지를 위한 공사일정 조정

․ 동절기 도래에 따른 공사품질 저하 방지를 위한 준공기한 연기

나. 연기요청 사유

- 동절기 도래에 따른 후속공정 공사일정 조정

․ 동절기 작업(식재작업, 목재도색마감 등) 시 폭설․강풍․결빙 등으로             공사품질저하, 하자발생율증가, 건설현장 근로자 안전사고 우려

다. 준공기한 연기 요청일

당 초	변 경	연기 요청일
2019.10.22 ~ 2020.01.19	2019.10.22 ~ 2020.4.15	87일

라. 검토의견

- 도급사에서 요청한 준공기한 연기는 동절기 도래에 따른 후속공정 (식재작업, 목재도색마감 등) 공사품질확보 및 근로자 안전사고방지를 위해 잔여공정을 고려하여 준공연기(87일)함이 타당하다고 판단 됨

마. 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

3. 조치계획

○ 상기 사항을 발주처에 제출하여 준공기한 연기를 요청하고자 함.

붙임  1. 준공기한 연기원 1부.

2. 변경(예정)공정표 포함 1부.  끝.