준공 도급계약금액 조정사유

□ 조정사유

○ 준공검사시 추진기지 및 도달기지 설치공의 잔토운반 및 추진공의

잔토운반이 미 반출되어 준공검사에서 조정.

○ 건설하도급 대금지급보증서 발급수수료 미납부에 따른 조정.

□ 조정수량

○ 추진기지 및 도달기지 설치공 잔토운반 : 538㎥

○ 추진공 잔토운반 : 71㎥

○ 건설하도급 대금지급보증서 발급수수료 : 1식

□ 조정금액

○ 추진기지 및 도달기지 설치공 : 4,680,062원

○ 추진공 : 617,629원

○ 건설하도급 대금지급보증서 발급수수료 : 535,782원

○ 재잡비 조정 : 1,866,527원

○ 합  계 : 7,700,000원

□ 조정내용

○ 상기와 같은 조정사유에 따라 준공금액을 조정함.

2018.  07.

신마포 나들목 신설 외 1건

책 임 기 술 자   김 원 두