6-1		정릉공영차고지 지하화 및 커뮤니티 공간조성

(주차계획과)

시내버스 차고지가 주민 기피시설(혐오시설)로 인식되어 제기된 성북구 정릉동 차고지 이전요구 민원 해소 및 현장시장실 운영시 건의된 친환경 공영차고지 건설(복합커뮤니터 건립) 추진

□ 사업 개요

○ 위    치 : 성북구 보문국로 145(정릉동 771-7)

○ 부지면적 : 3,600㎡

○ 주차대수 : 40~50대

○ 건축연면적(총 4,681㎡)

- 지하 1층 : 차고지(3,305 ㎡), 건물 296㎡

- 지상 1층 : 사무실 및  근린생활시설 등 (540㎡)

- 지상 2~3층 : 문화복합시설(각 540㎡)

※ 현 건물현황 : 지하1층, 지상2층, 연면적 1,570㎡, 1968년 준공

학술용역 : 정릉차고지 활용방안 수립을 위한 학술용역

용역기간 : 2014. 7. 8. ∼ 2014. 12. 1.(용역비 : 40,470천원)

주요내용 : 차고지 기능을 유지하면서 지형적 여건 및 지역적 특성을 감안하여 적합한 복합개발 허용방안 마련

‣ 연차별 집행(투자)계획(문화복합시설건립사업예산 별도)       (단위 : 백만원)

구분	총사업비	단기		중기			장기	비고
		기 투자액	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년 이후
총계	12,500	-	40	360	6,150	5,950	-
시비	12,500	-	40	360	6,150	5,950	-

□ 추진 사항

○ ‘13.10. : 정릉차고지 활용방안을 위한 학술용역 시행 결정

- 연구용역비 50백만원 (‘14년도 예산)

○ ‘14. 3.28.: 정릉차고지 활용방안을 위한 연구용역 추진계획

○ ‘14. 7. 8. ~ 11. 1.: 정릉차고지 활용방안을 위한 연구용역 시행

○ ‘14. 8. 7.:  정릉동 친환경 공영차고지 건립 계획 방침

○ ‘14.10.31.:  투자심사(조건부 추진)

- 문화시설 컨텐츠에 대한 면밀한 계획 수립 및 차고지 시설과 문화시설의 복합화에 따른 효율적인 운영방안 강구하여 추진

○ ‘14.12.30.: 학술용역 결과 보고

○ ‘14.12.  : 기본 및 실시설계 용역비 360백만원(‘15년도 예산)

○ ‘15. 3. 3.: 설계 의뢰전 사전 검토 의뢰(주차계획과⇒도시기반시설본부)

○ ‘15. 5.10.: 서울총괄건축가 및 도시공간개선단 운영 (시장 방침)

- 총괄건축가 도시공간환경 자문 사업 및 건축 문화ㆍ기획 사업(국제공모운영 : 해외 교류사업 검토)에 포함됨

○ ‘15. 6. 8.: 문화복합시설(2~3층) 건립 예산 및 용도 협의 (문화정책과, 성북구청)

○ ‘15. 6.10.: 해외교류 공모 추진 (도시공간개선단)

□ 향후 계획

○ 2016. 1. ~ 2016. 5.: 기본 및 설계용역 시행

○ 2016. 6. ~ 2016.12.: 투자심사 재심사 (필요시)

○ 2017. 1. ~ 2017.12.: 공사 시행

작 성 자	주차계획과장 : 윤보영☎2133-2350 / 차고지관리팀장 : 이경재☎2371 / 담당 : 김은진☎2372

□ 위 치 도

□ 현황사진