- 하남선(상일~검단산) 복선전철 건설공사 -

국토교통부 2차관 현장방문계획

□ 방문개요

❍ 일    시 : 2016. 12. 28.(수) 14:00~15:30

❍ 장    소 : 하남선(상일~검단산) 복선전철 3공구 건설공사 현장

❍ 방 문 자 : 국토교통부 2차관 등  9명

국토교통부(3)	경기도(2)	서울시(2)	하남시(2)
2차관 광역도시철도과장 김진수 주무관	철도국장 철도건설과장	도시철도국장 도시철도토목부장	부시장 행복도시사업단장

❍ 목    적 : 동절기 대비 안전실태 및 추진사항 확인

□ 시간계획

진 행 시 간		주 요 내 용
시 간	소요(분)
14:00 ~ 14:30	30	• 합동 공정보고(1․2․3․4․5공구)
14:30 ~ 15:00	30	• 건의 및 쟁점사항 논의
15:00 ~ 15:30	30	• 현장방문 - 하남선 3공구 : 본선, 정거장 ․ 공 종 : 본선(구조물공), 정거장(토공 및 구조물공)
		〈시점부〉	〈정거장〉

〈 사 업 개 요 〉

❍ 사업량 : L=7.7㎞, 정거장 5〔공정률 : 29.8%(서울시 21.3%. 경기도 31.7%)〕

(2016.11.30.일 기준)

구 분	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구
발 주 청	서울시	경기도
공사규모	L=1.099km	L=1.562km	L=2.100km	L=1.303km	L=1.625km
도 급 액	1,072억원	909억원	1,701억원	1,161억원	980억원
공사기간	2015.3.30. ~2019.3.28	2015.8.3. ~2019.1.13	2014.6.5. ~2018.12.10	2015.7.31. ~2020.2.4	2016.1.8. ~2020.3.16
추진실적	21.3%	35.2%	49.1%	22.3%	9.4%

보충자료		하남선(상일~검단산) 복선전철 건설공사 추진상황

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 강동구 상일동(5호선) ∼ 경기도 하남시 창우동

○ 사 업 량 : 연장 7.7km, 정거장 5개소

○ 사 업 비 : 9,868억 원 (경기도 6,290억원)

구 간		시행 주체	연장 (km)	정거장 (개소)	사업비(억원)
					계	국 비	서울시	경기도	하남시	LH
계			7.7	5	9,868	3,999	944	814	814	3,297
서울시	상일동~시도경계	서울시	1.1	1	3,578	1,251	944	158	157	1,068
경기도	시도경계~창우동	경기도	6.6	4	6,290	2,748	-	656	657	2,229

※ 공정별 예산액 : 노반(6,909), 궤도(229), 시스템(1,135), 차량구입비(431), 보상 및 부대경비(1,164)

○ 사업기간 : 2011∼2020년

- 1단계(1~3공구) : 2018년 개통 / 2단계(4~5공구) : 2020년 개통

□ 추진상황 : 노반〔29.8%/서울시(21.3%)․경기도(31.7%)〕, 시스템(설계 중)

구 분	노 반					시스템
	1단계			2단계
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구
발 주 청	서울시	경기도				서울시
공사규모	L=1.099km	L=1.562km	L=2.100km	L=1.303km	L=1.625km	-
도 급 액 (억원)	1,072	909	1,701	1,161	980	-
공사기간	2015.3.30. ~2019.3.28	2015.8.3. ~2019.1.13	2014.6.5. ~2018.12.10	2015.7.31. ~2020.2.4	2016.1.8. ~2020.3.16	-
추진실적	21.3%	35.2%	49.1%	22.3%	9.4%	설계중

□ 문제점 및 대책

○ 서울시 구간〔1공구(정거장 등)〕및 후속공정(시스템) 행정절차 추진지연으로 1단계 사업 개통(2018.12월) 차질 우려

☞ 1공구 정거장 무정차 통과, 역공정 계획수립 등 대안마련 적기개통 추진

□ 노 선 도