노후시설 개량투자 공정회의 자료 (20. 9월)

□ 국고보조금 대상사업 현황

ㅇ 2020년 노후시설 개량 대상사업 추진현황

(‘20. 9월 30일 기준, 백만원)
연번	사업개요		사업	발주 및 계약			집행실적 및 전망
	사업명	물량		예산	발주	계약(예정) (~연말)	계	실적 (9월말)	전망 (12월말)
	합 계		변경	188,450	138,954	123,551	87,217 (46%)	47,532 (25%)	39,706 (21%)
1	노후레일 교체공사	31.5Km	기존	10,600	8,444	7,395	4,689	3,700	989
2	노후분기기 교체공사	25틀	기존	4,965	4,300	3,885	2,734	2,237	497
3	교량궤도 개량공사	(설계)	기존	600	-	200	170	-	170
4	자갈도상 개량공사	2Km	기존	7,000	6,675	5,634	4,596	2,798	1,798
5	고가부 자갈도상 개량	1.5Km	기존	2,540	2,390	2,043	1,630	1,262	368
6	전력설비 개량공사	1개소(이촌)	기존	6,300	5,819	4,749	4,280	2,994	1,286
7	전기실 개량공사	4개소	기존	6,000	5,940	5,035	5,035	3,006	2,073
8	송배전 개량공사	64Km	기존	6,400	6,191	5,233	5,187	4,364	823
9	전차선로 개량공사	10.4Km	기존	5,126	5,093	4,290	4,252	3,732	520
10	비상전원설비 개량공사	17개소	기존	967	959	802	802	641	161
11	전선로 교체공사	196Km	기존	13,000	12,518	10,198	3,454	2,594	860
12	무정전전원장치 개량공사	33개소	기존	3,100	3,057	2,543	2,549	2,066	460
13	선로전환기 교체공사	13대	기존	308	306	264	263	171	92
14	열차무선(LTE-R)개량	38.2Km	기존	15,392	14,995	-	8,800	-	8,800
15	지능형모니터링	36역(4기지)	기존	18,731	18,291	-	10,233	-	10,233
16	무정전전원장치개량	114개소	기존	11,328	11,097	9,138	3,725	2,574	1,151
17	턴스타일개집표기개량	72대	기존	2,000	1,987	973	1,423	2	1,421
18	환기실 개량사업	21역	기존	1,355	1,220	1,038	982	982	-
19	화재수신기 교체사업	25역	기존	750	670	574	574	294	280
20	소방펌프 및 배관 보완	78대	기존	4,050	3,593	3,041	3,041	1,272	1,769
21	터널 연결송수관 설치	34.2Km	기존	9,713	9,135	7,678	7,685	6,453	1,232
22	제연설비 개량	12역	기존	8,085	4,042	3,911	3,873	1,666	2,207
23	승강설비 교체	11대	기존	5,500	4,881	2,741	3,254	1,689	1,565
24	승강설비 조작반 교체	35대	기존	1,300	1,134	957	957	590	367
25	자동제어개량사업	1호선(10역)	삭제	-	-	-	-	-	-
26	노후 급배수 설비개량	20역	변경	850	898	760	760	476	284
27	역사 바닥유도등 개량	(설계)	변경	100	79	79	79	79	-
28	관제설비개량	1식	변경	5,240	5,240	5,240	1,890	1,890	-
29	방송설비 개량		신규	11,700	-	11,700	-	-	-
30	지능형 모니터링	3호선	신규	15,600	-	13,600	-	-	-
31	원격단말장치(RTU) 개량		신규	6,200	-	6,200	-	-	-
32	2호선 궤도회로 감시장치	7대	신규	300	-	300	300	-	300
33	DTS 통신망 개량	1~4호선	신규	2,250	-	2,250	-	-	-
34	PSD 통신망 개량	1~4호선	신규	1,100	-	1,100	-	-	-

- (집행예상 실적) 연말-87,217백만원 (전체예산액대비 46%)

ㅇ 2019년 노후시설 개량 현황 (1~4호선)

(‘20. 9월 30일 기준, 백만원)
구 분		물량	사업비 (국비)	발주액	계약액	집행실적
						계	누계실적 (9월말)	전망 (12월말)
합 계			102,667 (30,800)	97,743	83,577	83,942	72,828	11,116
전기분야	송배전설비	31Km	2,800	2,723	2,302	2,206	2,206	(준공)
	전기실	5개소	7,130	7,610	6,435	6,435	5,638	797
	전차선로	2Km	3,000	3,325	2,794	2,627	2,329	298
	전력설비	4개소	23,500	20,919	17,600	18,160	13,842	4,318
궤도분야	레일교체	22Km	4,800	4,787	4,185	4,056	4,056	(준공)
	분기기개량	32틀	4,750	4,732	3,896	4,129	4,129	(준공)
통신분야	열차무선	31.5Km	14,050	13,474	11,196	11,196	6,102	5,096
	노후 CCTV	50역	17,350	14,908	13,983	13,598	13,598	(준공)
신호분야	선로전환기	13틀	497	489	454	441	441	(준공)
	전선로	306Km	16,420	18,053	15,022	15,425	15,025	400
기계분야	제연설비	6역	3,000	2,992	2,537	2,496	2,496	(준공)
	승강설비	10대	5,500	3,731	3,173	3,173	2,966	207

- (집행예상 실적) 연말-83,942백만원 (전체예산액대비 82%) ※발주차액 49억

ㅇ 2018년 노후시설 개량 현황 (1~4호선)

(‘20. 9월 30일 기준, 백만원)
구 분		물량	사업비 (국비)	발주액	계약액	집행실적
						계	누계실적 (9월말)	전망 (12월말)
합 계			127,700 (38,300)	130,547	111,666	112,724	110,871	1,853
전기분야	변전설비	5개소	27,558	30,527	25,748	25,338	25,338	(완료)
	전차선설비	27Km	21,547	24,959	21,054	20,302	20,302	(완료)
	송배전설비	80Km	5,000	5,271	4,420	4,356	4,356	(완료)
	전기실	10개소	12,387	11,641	10,464	10,310	10,310	(완료)
궤도분야	자갈도상	1.0Km	3,034	2,789	2,340	2,284	2,284	(완료)
	분기기	40틀	5,800	5,231	4,767	4,648	4,648	(완료)
통신분야	광전송	1식	5,116	4,999	4,299	4,279	4,279	(완료)
	열차무선	60.2Km	22,632	21,934	19,084	22,632	20,779	1,853
신호분야	전선로개량	453Km	24,626	23,196	19,490	18,575	18,575	(완료)

- (집행예상 실적) 연말-112,724백만원 (전체예산액대비 88%)

□ 5~8호선 재투자 사업 현황

ㅇ 2020년 노후시설 개량 현황 (5~8호선)

(‘20. 9월 30일 기준, 백만원)
구 분		물량	사업비 (국비)	발주액	계약(예정) (~연말)	집행실적
						계	누계실적 (9월말)	전망 (12월말)
합 계			70,614	59,325	34,858	34,287	18,628	15,659
궤도분야	분기기개량	3틀	705	98	360	348	98	250
	중장비개량	11대	11,300	10,919	10,138	3,491	3,491	-
기계분야 (승강기)	배수펌프	2개소	436	375	324	313	313	-
	환기설비	43개소	2,594	2,430	2,148	2148	2,148	-
	승강설비	2대	1,500	1,304	1,116	1,116	656	460
	승강조작반	15대	525	500	423	423	270	153
	E/S분해정비	25대	1,000	885	742	742	500	242
전기분야	노후변전설비	1개소	6,000	5,586	4,667	3,449	2,798	651
	송배전설비	73Km	4,300	4,197	3,510	2,059	1,707	352
	전차선로	12Km	4,492	4,467	3,748	1,602	1,289	313
	전기시설물	3개소	7,575	4,287	1,423	3,671	2,756	915
신호분야	신호시스템	1개소	3,330	-	2,334	300	-	300
	선로전환기	131틀	2,308	2,282	1,970	1,970	1,230	740
	전원장치	33대 (21대/12대)	1,739	1,504	1,229	1,229	936	293
통신분야	열차무선	7호선	18,910	16,653	-	7,588	-	7,588
	전원설비	44대	3,900	3,838	726	3,838	436	3,402

- (집행예상 실적) 연말-34,287백만원 (전체예산액대비 49%)

ㅇ 2019년 노후시설 개량 현황 (5~8호선)

(‘20. 9월 30일 기준, 백만원)
구 분		물량	사업비 (국비)	발주액	계약액	집행실적
						계	누계실적 (9월말)	전망 (12월말)
합 계			34,778	32,052	28,565	28,307	27,762	540
기계분야	승강설비	17대	7,154	5,226	4,442	4,442	4,442	(준공)
전기분야	변전설비	1개소	5,900	5,484	4,548	4,607	4,567	35
	전차선설비	15Km	4,030	3,726	3,188	3,040	3,040	(준공)
	송배전설비	70Km	3,900	3,889	3,186	3,186	2,681	505
	전기시설물	10개소	100	71	60	60	60	(준공)
통신분야	열차무선	5호선	13,694	13,656	13,141	12,972	12,972	(준공)

- (집행예상 실적) 연말-28,307백만원 (전체예산액대비 82%)

□ 노후시설 개량 검증용역 추진현황 및 향후일정

ㅇ 용역 추진현황

- ’20.03.12 착수계 제출

- ’20.05.28 부산‧서울교통공사 실무자회의

- ’20.05.12 유지관리 전략수립 세미나 실시(유니콘스-조중연 대표)

- ’20.07.28 미국 연방대중교통국(FTA) 자산관리체계 및 내용연수 관련 세미나 실시(영남대-윤성민 교수)

- ’20.08.05 도시철도시설 유지관리 현황조사를 위한 설명 및 실무자회의

- ’20.08.10~09.18 유지관리 현황조사 실시

* 유지관리 현황조사 웹 구축

- ’20.06.08~09.18 성능평가 실시

* 성능평가 조사용 웹 구축

ㅇ 세부 연구내용별 추진현황

세부 연구내용	추진현황
1. 기초조사 관련 법령 및 규정 조사 철도시설 유지관리 관련 국내외 동향, 투자현황 및 정책분석	철도의 건설 및 유지관리에 관한 법 등 관련 법, 규정 조사/분석 미국, 일본 사례 조사
2. 노후 철도시설 학술적 정의 및 근거 마련 발주처 유지관리 현수준 평가 발주처 철도시설물 상태 분석 노후 철도시설 학술적 정의 및 근거 마련	유지관리 현황조사 기반 노후화율 분석(추진중) 성능평가 결과 기반 성능분석(추진중) 관련자료 수집 및 분석
3. 시설물 노후도 및 개량투자계획 효과 분석 현행 시설물별 노후화율 분석 개량투자계획 추진현황 및 성과 분석	유지관리 현황조사 기반 노후화율 분석(추진중) 성능평가 결과 기반 투자효과분석(추진중)
4. 투자규모 및 적정 개량시점 산정 노후시설 투자규모 및 적정 개량시점 산정 개량투자계획 재수립 및 중장기 계획수립	(추진예정) (추진예정)
5. 시설물 노후화율 개선방안 마련 시설물별 노후화율 개선방안 마련 및 목표 설정	(추진예정)

ㅇ 향후 추진계획

- 유지관리 현황조사 및 성능평가 결과 관련 연구진 회의(’20.10.19)

- 중간보고서(개량투자 효과분석 완료 후 제출(11월 예정))

ㅇ 세부 연구내용별 추진계획

세부 연구내용	추진계획
1. 기초조사 관련 법령 및 규정 조사 철도시설 유지관리 관련 국내외 동향, 투자현황 및 정책분석	(기완료) (기완료)
2. 노후 철도시설 학술적 정의 및 근거 마련 발주처 유지관리 현수준 평가 발주처 철도시설물 상태 분석 노후 철도시설 학술적 정의 및 근거 마련	유지관리 현황조사 기반 노후화율 분석(10월말) 성능평가 결과 기반 성능분석(10월말) 관련자료 수집 및 분석
3. 시설물 노후도 및 개량투자계획 효과 분석 현행 시설물별 노후화율 분석 개량투자계획 추진현황 및 성과 분석	유지관리 현황조사 기반 노후화율 분석(10월말) 성능평가 결과 기반 투자효과분석(11월초)
4. 투자규모 및 적정 개량시점 산정 노후시설 투자규모 및 적정 개량시점 산정 개량투자계획 재수립 및 중장기 계획수립	유지관리 현황조사 기반 노후화모델 수립 및 투자규모 예측, 적정개량시점 산정(11월말) 성능평가 결과 기반 개량투자계획 재수립 및 중장기 계획수립(11월말)
5. 시설물 노후화율 개선방안 마련 시설물별 노후화율 개선방안 마련 및 목표 설정	계획의 목표 및 전략설정(철도시설 유지관리 기본계획 수립과의 연계)(12월중)