행위허가 연장 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로~봉오대로 삼거리간 도로개설공사

○ 공사위치 : 강서구 외발산동 메이필드앞 교차로

~ 부천시 오정구 고강동 봉오대로 삼거리

○ 공사기간 : 2010. 9.29 ~ 2015.12.30

○ 공사규모 : 도로개설 폭8차로, 연장1.23km (부천시구간 270m)

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주)

○ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

□ 허가번호

- 도시계획과-5516호(2013. 4. 8.)

□ 행위허가 연장 사유 및 기간

상기와 같이 행위 허가된 도시계획시설(도로)사업에 대하여 아래와 같은 사유로 공사기간이 연장되어 행위허가의 연장을 신청합니다.

○ 연장 사유 : 광명~서울 민자고속도로 노선 변경에 따른 보상 지연으로 인한 시설공사 절대공기 부족으로 행위허가 연장

○ 행위허가 기간

- 당초 : 행위허가일로부터 ~ 2014.12.31.

- 변경 : 행위허가일로부터 ~ 2015.12.31.