하수관로 사업 사전검토 결과 총괄(보수․보강)

심의번호	사 업 명	검토결과(원안, 수정, 사업보류)	비고
1	통일로 12가길 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 5개 구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간, 혼용 1개구간 •검토결과 : 비굴착 3개구간, 굴착1개구간, 혼용 1개구간
2	평창동 20길 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 29구간) •구청신청 : 비굴착 25개구간, 굴착 4개구간 •검토결과 : 비굴착 16개구간, 굴착 13개구간 ※CCTV 미제출 구간 확인 필요(1-4~2-16구간)
3	평창동 34길 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 17개구간) •구청신청 : 비굴착 16개구간, 굴착 1개구간 •검토결과 : 비굴착 5개구간, 굴착12개구간
4	충무로 일대 노후 하수관로 보수	원안통과(신청 : 1개구간) •비굴착 1개구간
5	충무초등학교 주변 하수관로 보수	수정통과(신청 : 1개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간(연장추가는 제외)
6	장원중학교 일대 원형관로 보수	원안통과(신청 : 2개구간) •비굴착 2개구간
7	행당동 138번지 주변 원형관로 보수	원안통과(신청 : 3개구간) •비굴착 3개구간
8	옥수동 한림말길 33-49 주변 원형관로 보수	원안통과(신청 : 2개구간) •비굴착 2개구간
9	행당동 12-8 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 8개구간) •구청신청 : 비굴착 5개구간, 혼용 3개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간. 굴착 5개구간, 혼용 1개구간
10	마장로35길 66 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 2개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간(연장추가는 제외)
11	뚝섬로 413 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 2개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간 •검토결과 : 혼용1개구간, 굴착1개구간
12	구의동 201-2 ~ 광장사거리 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간, 굴착1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착3개구간
13	중곡동 147-74~58-27간 원형관로 보수	원안통과(신청 : 2 구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간, 굴착1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착1개구간
14	중곡동 국립정신센터 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간, 혼용1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착1개구간, 제외1구간
15	중곡동 587-2~148-21 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간, 혼용1개구간 •검토결과 : 굴착3개(일부 정비완료구간 제외)
16	이문동 209-3 주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 5개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간, 굴착 1개 구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 굴착 3개 구간
17	신설동 396-12주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 7개구간) •구청신청 : 비굴착 6개구간, 굴착 1개 구간 •검토결과 : 비굴착 1, 굴착3개, 혼용1개구간, 제외2개구간
18	신내동 396-21~410-9주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 8개구간) •구청신청 : 비굴착 7개구간, 혼용1개 구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간(일부양호 구간제외), 굴착6개 구간, 혼용1개구간
19	북악산로 935 ~ 902 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 2개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간(일부양호 구간제외)
20	정릉로6가길 44 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 9개구간) •구청신청 : 비굴착 9개구간 •검토결과 : 비굴착 4개구간(1개구간 일부 정비). 굴착 3개구간, 제외 2개구간
21	길음동 1280 주변 원형관로 보수	원안통과(신청 : 2개구간) •비굴착 2개구간
22	지봉로 20길 17 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간 •검토결과 : 굴착 4개구간
23	미아역주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 2개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간 •검토결과 : 비국착 1개구간, 굴착 1개구간
24	미아동 124-2 주변 원형관로 보수	원안통과(신청 : 2개구간) •비굴착 2개구간
25	번동초등학교 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 제외 1개구간
26	방학동 719-2~716-2 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 1개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 •검토결과 : 굴착1개구간
27	도봉동 562-41~563-18 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착2개구간
28	불광동 476-4~447-1 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간, 혼용 1개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 혼용 1개구간, 제외1개구간
29	연희로11길 주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 9개구간) •구청신청 : 비굴착 7개구간, 굴착 2개구간 •검토결과 : 굴착 9개구간
30	공덕동 467-2 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간, 혼용 2개구간 •검토결과 : 굴착 3개구간
31	서교동466-20주변원형관로보수	원안통과(신청 : 8개구간) •비굴착 7개구간, 혼용 1개구간
32	방화대로 21길 95 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간 •검토결과 : 굴착 3개구간, 비굴착1개구간
33	양천로 24길 13일대 원형관로 보수보강	원안통과(신청 : 4개구간) •비굴착 4개구간
34	중앙로 58 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 2개구간, 혼용2개구간 •검토결과 : 굴착 2개구간, 제외 2개구간
35	개봉동 63-35 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간, 혼용1개구간, 굴착1개구간 •검토결과 : 굴착 2개구간, 비굴착1개구간
36	독산동 금천세무서 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 굴착 2개구간
37	독산동 문성아파트 일대 외 3개소 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간, 혼용 2개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착 2개구간
38	신길동 362-22~276-77 주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착1개구간, 굴착1개구간, 혼용1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 굴착 2개구간
39	당산동4가 38-1~80 주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 7개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간, 굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 굴착 3개구간, 제외2개구간
40	동작동 93-7~97-1 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 10개구간) •구청신청 : 비굴착 10개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 제외 9개구간
41	사당동 1009-1~1030-10 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 7개구간) •구청신청 : 비굴착 6개구간, 굴착 1개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 굴착 4개구간, 제외 1개구간
42	사당로 23길 190-13 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 4개구간 •검토결과 : 비굴착 3개구간, 제외 1개구간
43	방배동 1514 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 7개구간) •구청신청 : 비굴착 5개구간. 굴착 1개구간, 혼용 1개구간 •검토결과 : 비굴착 3개구간. 굴착 3개구간, 제외 1개구간
44	서초중앙로 215 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 4개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 혼용 3개구간 •검토결과 : 굴착 2개구간, 혼용1개구간, 제외 1개구간
45	내곡동 1번지 일대 원형관로 보수	수정통과(신청 : 12개구간) •구청신청 : 비굴착 10개구간 굴착 2개구간 •검토결과 : 굴착 8개구간, 제외 4개구간
46	석촌동 234-224간 하수관로 개량	조건부원안통과(신청 : 1개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간(통수능 검토 부족시 굴착)
47	삼전동 132-2~133-17간 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 제외 1개구간
48	오금동 95번지 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 혼용 2개구간
49	마천동 15-9~13-6 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 2개구간, 제외 1구간
50	방이동 180-6~180 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 1개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 •검토결과 : 굴착 1개구간
51	석촌동 277-3~295-5 주변 원형관로 보수	수정통과(신청 : 1개구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 •검토결과 : 굴착 1개구간
52	가락동 175-14~176간 외 1개소 원형관로 보수	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 비굴착 3개구간 •검토결과 : 비굴착 1개구간, 제외 2개구간
53	삼양로 155길 41주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 1구간) •구청신청 : 비굴착 1개구간 • 검토결과 : 총251m중 종점부24m 굴착, 148m 비 굴착, 연장 추가된 79m 제외
54	삼양로123길 주변 하수관로 개량	수정통과(신청 : 3개구간) •구청신청 : 굴착 2구간 비굴착 1개구간 •검토결과 : 비굴착중 신청 158.5m중 일부15m 굴착시행 (01923구간 종방향균열)