녹색자금사업 이월 신청서

<2014. 12. 31 현재>

사업기관 : 서울시특별시

사 업 명 : 특수교육시설 내 녹색나눔숲 지원사업(한국육영학교)

항 목	’14계획(원) A	집행액(원) B	미 집행액 (C=A-B)
			계(원) C	연도내 집 행 가능액	연도내 집행불능액
					사고이월 요구액	여유자금 (불용액)
목)녹색자금
세목)설계용역비	5,000,000	4,570,000	430,000	0	0	430,000
세목)공사비	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0
합 계	79,000,000	4,570,000	74,430,000	0	74,000,000	430,000

※ 이월(불용액) 발생사유 :

-사업비 배정(11.13)이후 실시설계완료(12.11), 겨울철 공사여건 불량, 공기부족

-불용액 : 설계용역 낙찰차액

사고이월 요구액 내역

항 목	이월요구액(원)	이월사유
목) 녹색자금
세목)공사비	74,000,000	‘14.11월에 예산이 배정되어 설계용역과 공사발주 등이 늦어져 사고이월하여 공사를 시행하고자 함
합 계	74,000,000

※ 첨부서류 : 관련공문 및 붙임서류 첨부