계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 서울소방행정타운 건립 공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	서울시 은평구 진관동 110-26일대
개 요	용도 : 공공업무시설 규모 : 기존) 지하2층/지상15층, 6개동, 기존 연면적 25,174.81㎡ 증축) 지하2층 지상1층, 1개동 연면적 4,093.32㎡ - 철골철근 콘크리트조
기 간	2016.5.18.~2019.6.30.

□ 분야별 심사평가 결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	4,908,188	4,684,426	223,762	4.56%
건축	3,337,106	3,172,236	164,870	4.94%
토목	1,571,082	1,512,190	58,892	3.75%

□ 주요 심사내용(관급자재비 심사제외)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 타일시멘트외 6개 품목

◦ 일위대가 조정(※ 직접공사비 기준)

- 고무아스팔트 방수 : 견적  → 2018년도 품셈 적용(△ 50.401천원)

- 철근 가공 및 조립 : 가공 및 조립으로 구분 산출(△ 14,432천원)

- 침투성 방수 : 견적 → 서울형품셈 적용(△ 13,764천원)

- 화강석붙임(바닥습식) : 품셈적용 → 서울형품셈 적용(△ 22,314천원)

□ 사업부서 협의 결과

◦ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 소방행정타운 지하복합훈련장 신축공사 설계변경(토목)

□ 사업개요

위 치	- 서울특별시 은평구 진관동 110-26일대
공사개요	용도 : 공공업무시설 규모 : 기존) 지하2층/지상15층, 6개동, 기존 연면적 25,174.81㎡ 증축) 지하2층 지상1층, 1개동 연면적 4,093.32㎡ ․구조 : 철골철근콘크리트조
공사기간	- 2016.5.18.~2019.6.30.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,571,082	천원
◦	심사금액	:	1,512,190	천원
◦	절 감 액	:	58,892	천원
◦	절 감 률	:	3.75	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 인조잔디(t=55mm) 단가 조정

◦ 내역서 및 일위대가

- 잔토처리 운반은 일괄 경비로 적용 - 「건설공사 예정가격 산정기준」참고

【일위대가 산출】

- 원심력철근콘크리트관(D450mm) : 배관공 0.047 → 0.1인

보통인부 0.1→ 0.04인, 크레인 0.37→0.148hr

- 원형맨홀1호 : PE 원형거푸집 기초,슬라브, 벽체 단위수량 조정

- 몰탈(1:2) : 보통인부(0.912→0.66인),모래(0.894→ 0.98㎥),

시멘트(15.6→17포) 단위수량 조정

【중기단가산출】

- 하수관로CCTV조사비 : 일작업량 신설관 520m(표준품셈 16-4-3)

- 도로경계석 설치 : 특별인부 0.0024인 보통인부 0.008인 수량조정

- 말뚝박기용 천공 (토사) - 케이싱 오거 장비사용 (표준품셈 5-6-1)

· 케이싱 튜브 설치 철거 제외 (오거사용 2회 조정)

· 케이싱 사용시 손율조정 8% → 9%

- 띠장 및 버팀보설치(9~11m이하) : 크레인(트럭) 25톤 → 10톤

(서울형 품셈)

- 토류판 설치(T=8cm) : 형틀목공 0.73인 보통인부 0.38인 수량조정

- 메쉬휀스 설치 : 견적단가 1식 → 관급자재 구매 변경

⇒ 현장실거래가격보다 저렴한 조달청 나라장터 등재 금액 반영

□ 그 밖의 사항

◦ 발주부서 및 설계부서 의견

◦ 원가심사에 따른 설계도서, 물량 등 재확인

◦ 관급자재비, 이설비 및 기타 심사 제외