설계변경 사유서

1. 용 역 명 : 석촌지하차도외 4개소 정밀점검용역

2. 용역기간 : 2019. 4. 30. ~ 2019. 10. 26.

3. 용 역 비 : 112,776,000원

4. 도 급 자 : ㈜아워브레인  대표  김정호

5. 용역개요

○ 석촌지하차도, 삼성교, 장지지하차도, 강일육교, 상일2교 정밀점검

6. 변경사유

○ 정밀점검 용역 대상시설물(탄천우안도로지하차도) 신규 추가

7. 변경사항

○ 용역비 변경 현황

구 분	용 역 비(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비	112,776,000	129,982,000	증)17,206,000
공 급 가 액	101,678,182	117,320,000	증)15,641,818
부가가치세	10,167,818	11,732,000	증)1,564,182
자문비	930,000	930,000	-

○ 주요 대상시설물 증∙감 현황(5개소→6개소)

- 당 초 : 석촌지하차도, 삼성교, 장지지하차도, 강일육교, 상일2교

- 변 경 : 석촌지하차도, 삼성교, 장지지하차도, 강일육교, 상일2교, 탄천우안도로지하차도