설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 담당 이상근

요청일

2017년 06월   일

공 사 명

서울역 7017 프로젝트 건설공사

공사개요

공사규모

- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=1,235m

- 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m

공사기간

2016. 04. 18. ~ 2017. 06. 30.

감 리 사

㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)

설 계 사

(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안

시 공 사

홍익산업개발(주), (주)동원개발

자문 안건명

비산방지시설 설치비 반영

요청금액

증 137,830천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 서울역고가 강재 거더의 기존도막제거 및 재도장시 고가 상부에서 하부로 분진 및 페인트 날림을 방지하기 위하여 작업시 거더주위에 비산방지시설 설치비 반영

원설계자 의견(요약)

○ 해당없음

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

- 비산방지시설 설치,해체 (0㎡ → 9,149㎡)

▪ 물량 증감내역

구 분	단위	수 량		증·감
		당초	변경
비산방지시설 설치, 해체	㎡	-	9,149	(증)9,149

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :          0천원

- 변 경 :    137,830천원

- 증 감 : 증 137,830천원

▪ 설계변경 주요 공종

- 강관비계 설치, 해체

- 비산방지막 설치, 해체

별첨서류

1. 자문요약서 1부.

2. 감리단 검토의견서 사본 1부

3. 관련공문 사본 1부

4. 실정보고서 1부

▪ 공사예정시기

‘16.06 ~ ‘17.09 (완료)

▪ 소요관급자재

- 대상 사업아님

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서울역 7017 프로젝트 건설공사
계약금액	25,138,300천원	계약일	2016.04.15.	시공사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
공사기간	2016.04.18. ~ 2017.06.30.	낙찰율	80.027%	설계자	(주)종합건축사사무소 디자인캠프 문박디엠피외 2개사
계약형태	제한경쟁입찰(●),턴키( ),대안( ),총액계약( ),계속비공사(●)			감리자	㈜진우엔지니어링코리아외 3개사
공사규모	•고가도로 보수·보강, 그린웨이 조성 : B=10.3m, L=1,235m •바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m			※ 작성자 : 이 상 근 (☎ 02-3708-2544)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		• 비산방지시설 설치, 해체 (9,149㎡)	• 비산방지시설 설치, 해체 (증9,149㎡)
공 사 비	-		137,830천원	증137,830천원
적 용 요 율	-		협의율(90,014%)	협의율(90,014%)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	고가 상부에서 작업함으로 작업효율이 저하됨
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(토목부-6947, 2017.04.04)
	관련규정	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약일반조건 제7절 제1호의 나 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우" 해당
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	· 서울역고가 강재 거더의 기존도막제거 및 재도장시 고가 상부에서 하부로 분진 및 페인트 날림을 방지하기 위하여 작업시 거더주위에 비산방지시설 설치비 반영
효 과	① 공기단축 ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

- 시공사에서 건설사업관리단에 실정보고(홍익 17-81호, 2017.03.15)

- 건설사업관리단에서 발주처에 실정보고(서울역(건)17-208, 2017.03.17)

- 발주처에서 신규 공종 단가협의 결과 통보(토목부-5983, 2017.03.22)

- 시공사에서 건설사업관리단에 신규단가 협의결과 반영 실정보고(홍익 17-85호, 2017.03.23)

- 건설사업관리단에서 발주처에 실정보고(서울역(건)17-229, 2017.03.23)

- 발주처에서 실정보고 승인(토목부-6947, 2017.04.04)