주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 여의천 단면확장(보축) 및 자전거도로 정비공사

□ 사업개요

위 치	새원교(염곡동 243-1) ~ 여의교(양재동 237-1)
공사개요	∙ 제방호안 보축(식생환경블록) : L=450m ∙ 자전거도로 정비 : L=1,730m(보축구간 L=430m 포함) ∙ 구조물공 : 옹벽설치(H=1.0~1.5m) L=150m, 옹벽보강 L=124m
공사기간	착공일로부터 ~ 2019.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	700,000	천원
◦	심사금액	:	673,236	천원
◦	절 감 액	:	26,764	천원
◦	절 감 률	:	3.82	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 이형철근 : 759천원/톤 → 715천원/톤

- 철선(φ4mm) : 1,250원/kg → 1,075원/kg

- 결속선(φ0.9mm) : 1,560원/kg → 1,380원/kg

- 와이어메쉬(#8-150×150) : 1,920원/㎡ → 1,630원/㎡

- 보통시멘트 : 102원/kg → 87원/kg

- 신구콘크리트 접착제 : 13천원/kg → 11천원/kg

- 외송각재 : 400,109원/㎥ → 376,675원/㎥

- 비계파이프(48.6x2.3MM) : 2,833원/m → 2,700원/m

- 도로용페인트(융착식, 흰색) : 6,720원/ℓ → 2,750원/ℓ

- 도로용페인트(융착식, 황색) : 7,680원/ℓ → 3,150원/ℓ

- 컨테이너(사무실,3.0×9.0×2.6m) : 3,800천원/㎡ → 3,032천원/㎡

- 컨테이너(창고,3.0×9.0×2.6m) : 3,200천원/㎡ → 2,487천원/㎡

등 거래실례가격으로 조정

◦ 내역서 및 일위대가

【중기단가】

- 콘크리트타설 : 인력타설 → 장비이용 타설 적용

- 택코팅(기계식) : 일위대가 적용 요류

- 도로경계석설치(120x150x1000㎜(직선):노무품 조정(품셈토목1-10-3)

- 시공이음면정리 : 인력 → 기계

- 모르터 : 품셈 기준 조정(품셈토목1-9-6)

- 유로폼설치및해체 : 복잡 → 보통(옹벽, 품셈공통6-3-3)

- 차선도색(기계식,융착식) : 노무품 등 조정(1-9-9)

- 녹막이페인트칠 : 노무품 조정(품셈건축11-2-6)

- 토사운반, 잔토운반 등 : 비목별 → 경비로 반영

- 뒷채움 부설 및 다짐 : 인력포설 노무품 조정(품셈공통3-4-1)

【제경비율】
- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%

[대상액(재료비+직노) 5억 미만 적용]

- 하도급대급지급보증수수료 : 0.08% → 0.081%

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용등 조정금액에 대한 소관부서 의견 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 관급자재, 이설비 및 기타 심사 제외

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사설명서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주