「건 설 안 전」

2004 주요업무계획

	건 설 안 전 본 부

보 고 순 서

	정책의 방향과 목표	1
	연도별 정책지표	2
	시책의 체계	3
	세입․세출예산	6
	역 점 사 업	7
	일 반 사 업	32
	단위사업별 추진계획	62

정책의 방향과 목표

	추 진 목 표
24시간 안심하고 이용할 수 있는 시설물 유지관리 완벽한 품질관리로 세계일류의 도시시설물 건설

추진방향

□ 과학적이고 체계적인 도로시설 안전관리 실현

신공법과 첨단장비 적극 도입으로 한차원 높은 유지관리 기반조성

체계적인 점검․진단에 의한 예방보수로 시설물 수명 연장

직장전문교육, 산학협동 등을 통해 안전관리요원의 전문성 강화

□ 최적 설계, 효율적 사업관리로 정밀한 공공시설 건설

안전 최우선, 품질 우선 및 효율적 공정추진 원칙 시행

전문가 설계감리, 설계검토전담반 운영으로 설계 수준향상

건설사업관리 시스템 구축으로 공사의 수준과 효율성 제고

설계경제성 검토기법과 공사 사후평가제 도입으로 투자효율 증진

연도별 정책지표

	주 요 지 표		2002년		2003년		2004년		2005년		2006년
	도로시설물 관리
	▹ 점검매뉴얼 작성	(건)	67 (‘02이전)		117		157
	▹ 한강교량확장 성능개선	(교량)	10 (‘02이전)		12		14		15
	▹ 한강교량온라인점검시설	(교량)					3		4		5
	▹ 한강교량 수중구조물점검	(개소)	413 (‘02이전)		544		674		762 (1회 전수검검완료) 42(2회전수검검시작)		172
	▹ 한강교량 보수‧보강	(교량)	4 (‘02이전)	5	5		7		15
	▹ 한강교량 방호울타리보강	(교량)	12		14		17		19		20
	▹ 한강교량 야간조명설치	(개소)	7		14		19	1	23
	▹ 강구조물 안전점검	(개소)	30		60		90		99(1회전수검검완료) 21(2회전수검검시작)		51
	도 로 건 설
	▹ 도시고속도로 건설	(개소)	1		3				4
	▹ 한강교량 신설	(개소)	1		2						암사․제2성산대교 (2008)
	▹ 주요간선도로 신설	(개소)	5		10		16		19
	▹ 병목지점 입체시설 건립	(개소)			1		3				5
	공공시설물건립
	▹ 사회복지․청소년시설	(개소)	6		13		15		17		24
	▹ 문화․체육시설	(개소)	6		6		7
	▹ 공 공 건 축 물	(개소)	10		16		19		22		23
	▹ 환 경 시 설 물	(개소)	5						6		9

시책의 체계도

전 략 목 표			성 과 목 표			주 요 사 업
1. 도로시설물을 튼튼하고 환경친화적으로 건설			1-1 건설공사 공정도준수			1. 도시고속도로건설공사(2건)	25, 27
						2. 한강교량건설	45
						3. 주요간선도로 신설․확충 (단절구간 연결)	47
						4. 상시차량 정체지역 입체시설 건설 (병목구간 해소)	49
						5. 보행환경 개선 사업	29, 30, 31
						6. 기존도로 구조 개선사업	28
2. 도로시설물 안전유지 및 시민 편의 증대			2-1 한강교량 안전성 확보 및 구조개선			1. 첨단장비를 이용한 과학적인 교량 관리	20
						2. 한강교량 성능개선(2등교→1등교)	8
						3. 한강교량 보수․보강공사	10
						4. 한강교량 야간 경관조명 설치	14
			2-2. 도로시설물 안전성 제고 및 청결관리			1. 터널 방재시스템 개선	16
						2. 도로안전 응급 대응체제 강화	24
						3. 시설물 안전등급 수준 향상	33
						4. 도로 시설물 보수․보강	37

2. 도로시설물 안전유지 및 시민편의증대			2-2. 도로시설물 안전성 제고 및 청결관리			5. 쾌적하고 안전한 전용도로관리	39
						6. 제설작업 서비스 수준향상	40
						7. 유지보수 신공법 적극 도입	42
						8. 도로시설물 예방적 보수기법 개발	22
			2-3 도로시설물 정밀점검․진단			1. 시설물 안전점검 및 진단 내실화	34
						2. 경험이 많은 퇴직공무원 안전 점검 활용	43
			2-4 도로구조물 관리개선			1. 아스팔트 포장공사 품질향상	35
						2. 소규모 공사 관리 개선	60
						3. 중차량 단속 내실화로 도로수명 연장	23
3. 공사장 안전사고 예방 및 공사의 품질향상			3-1 공사장 무재해 달성			1. 건설현장 무사고 목표추진	55
						2. 공사중 시민불편 최소화	58
			3-2 공사의 품질향상			1. 수준높은 설계품질 확보	44
						2. 정교한 품질관리 (ISO 9001 품질경영시스템 사후관리)	56
						3. 건설공사 실명제 내실화	57
						4. 밀도있는 공정관리로 투자효율증대	57

4. 공공시설의 차질없는 건설			4-1 사회복지시설 확충			1. 사회복지․청소년 시설 건립	51
			4-2 공공시설확충			1. 공공 건물 건립	54
						2. 청소년․문화․체육시설 건립	54
						3. 치수․환경시설 건립	53
5. 안전관리 체계구축 및 건설행정의 효율성 향상			5-1 안전관리체계의 표준화 및 전산화			1. 도로관리 시스템 온라인 구축	18
						2. 점검매뉴얼 작성 및 활용 극대화	19
			5-2 건설공사 입찰 효율성 향상			1. 건설공사의 투명성 제고	59

세입․세출예산현황

세 입

(단위 : 억원)

구 분	2003 예산	2004 예산	증 감
합 계	55.48	66.33	10.85
청사주차장 주차요금	0.57	0.45	△0.12
공동구 관리비	50.54	61.56	11.02
도로손궤자 부담금	3.30	3.25	△0.05
건설기계 임대수입	1.07	1.07	-

세 출

(단위 : 억원)

구 분			2003 예산	2004 예산	증(△)감	비 고
총 계			7,164	6,771	△393
본부자체예산			606	805	199
		인건비	452	505	53	․편성인원 : 953명 (본부323,사업소 630)
		기본경비	99	66	△33	․청사관리, 일반운영비 등 (본부 21억, 사업소 45억)
		사업비	55	234	179	․본부청사신축140, 중차량단속 등
투자사업(재배정)			6,558	5,966	△592	시 본청 재배정 예산 ('04.1.27현재)
	안전관리분야		2,770	2,699	△71	․한강교량 보수․보강 ․도로시설물 유지관리 ․교량 경관조명 설치 등
	시 설 분 야		3,788	3,267	△521	․도로․교량 건설 ․터널․지하차도 건설 ․공공건축물 건립

역  점  사  업

◎ 24시간 안심하고 이용할 수 있는 시설물 유지관리

1. 한강교량의 안전성 강화 및 경관 제고	8

2. 터널방재시스템 최신수준으로 확충	15

3. 도로시설물 안전관리의 과학화	18

4. 중차량 단속 내실화로 도로 교량 수명연장	23

5. 도로안전 응급 대응체제 강화	24

◎ 세계 일류수준의 도시고속도로망 확충정비

1. 강남순환도시고속도로 건설	25

2. 강변북로 병목구간(청담대교～성수대교)확장	27

3. 기존도로 구조개선으로 소통용량 및 안전성 증대	28

◎ 보행환경 개선사업 추진

1. 친환경적인 시청앞 광장조성	29

2. 한강교량 보행(자전거) 동선 정비	30

3. 광화문 지하보도 리모델링	31

24시간 안심하고 이용할 수 있는 시설물 유지관리

□ 한강교량의 안전성 강화 및 경관 제고

한강교량 성능 개선

◦ 노후구조 전면보수와 병행, 고성능 한강교량 확충

◦ 중차량 통행제한 최소화로 물류이동의 경쟁성 제고

□ 사업개요

대    상 : 3개교( 성수․한남․마포대교)

기    간 : '96. 6 ～ '05. 11

총사업비 : 5,100억원 (‘04년:727억원)

사업내용 : 2등교를 1등교로 성능향상(DB:18→DB:24)

※ 기존 1등교 12개 교량 → 15개 교량 (2등교 : 천호, 잠실철도, 영동, 원효, 성산)

□ 추진실적 및 계획

성수대교 : (공정율 83%)→‘04년 11월 완공목표

▷ 본선 교각확장, 트러스, 상판 및 남단 연결로 설치 완료

▷ 접속교 상판 및 북단 연결로 노면포장 등 시공중

한남대교 : (공정율 89%) → ‘04년 11월 완공목표

▷ 하류측 신설교량 개통(‘01. 3. 8)

▷ 상류측 기존교량 보수․보강 및 접속연결로 신설공사후 개통

마포대교 : (공정율 71%) → ‘05년 11월 완공목표

▷ 하류측 신설교량 개통(‘00. 7. 3)

▷ 상류측 기존교량 철거후 상부구조 시공중

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 억원)

구 분		계	‘02년이전	’03년	‘04년	‘05년
추진내용	성수대교 확장공사 (1998.12.～‘04.12)	공 정	62%	82%	100%
		사업비 1,300	757	310	233
	한남대교 확장 및 성능개선공사 (1996.12.～‘04.12)	공 정	82%	89%	100%
		사업비 1,586	1,266	145	175
	마포대교 확장 및 성능개선공사 (1996.12.～‘05.12)	공 정	61%	71%	86%	100%
		사업비 2,214	1,291	300	319	304
총사업비 : 5,100억원		5,100	3,314	755	727	304

② ‘04년 계획

(단위 : 억원)

구 분		계	1/4	2/4	3/4	4/4
추진내용	성수대교 확장공사 - 포장공 665a - 스래브공 7스판 - 부대공(난간, 방호책, 신축이음 등)	공 정	85%	91%	95%	100%
		사업비 233	23	90	55	65
	한남대교 확장 및 성능개선공사 - 구교 교각 보수보강 13기 - 교면 방수 및 포장 280a - 램프 슬래브 595m	공 정	91%	95%	98%	100%
		사업비 175	20	70	50	35
	마포대교 확장 및 성능개선공사 - 교각 및 교대 설치 6개소 - 강교 제작 설치 9,180톤 - 상부 슬래브 설치 915m	공 정	74%	78%	82%	86%
		사업비 319	59	80	80	100
총사업비 : 727억원		727	102	240	185	200

지속적인 점검 보수로 24시간 교량 안전성 확보

체계적인 안전점검에 따른 적기 보수․보강으로 항시 안전성을 확보하면서 도로구조물 수명 연장

□ 사업개요

사업기간 : ‘00.12 ～ ‘05.12

사업대상 : 11개 교량

▷ 천호, 올림픽, 영동, 동호, 반포, 동작, 한강신교, 원효, 성산, 양화, 서강대교

총사업비 : 1,547억원 (‘04년 : 377억원)

보수․보강 내역

▷ 교량별 안전점검 결과에 따라 우물통 보수, 교면 방수포장,

▷ 콘크리트 균열보수, 강교도장 및 보수, 상판스라브 보수,

▷ 교량받침 및 신축이음 보수, 방호울타리 보강 점검통로설치 등

□ 추진 실적 및 계획

’03년 1개교(동작대교) 보수 완료

‘04년중 2개교(성산대교․서강대교) 보수 완료

‘05년까지 11개 전 교량 보수 완료 추진

▷‘05년 보수완료 대상 : 천호대교, 올림픽대교, 영동대교, 동호대교,반포대교,원효대교,한강대교,양화대교

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 억원)

구 분		계	‘02년	’03년	‘04년	‘05년
추진내용	동작대교 (‘00.6～’03.12)	공 정	64%	100%
		사업비 143	92	51
	성산대교 (2001.8～‘04.6)	공 정	40%	80%	100%
		사업비 216	108	60	48
	서강대교 (‘04.7～‘04.12)	공 정			100%
		사업비 13			13
	한강(신교)대교 (‘02.7～‘05.6)	공 정	12%	59%	87%	100%
		사업비 182	25	83	50	24
	천호대교 (‘00.12～‘05.12)	공 정	32%	47%	70%	100%
		사업비 261	82	40	62	77
	올림픽대교 (’03.8～‘05.12)	공 정		17%	53%	100%
		사업비 116		20	41	55
	영동대교 (‘00.12～‘05.12)	공 정	26%	37%	55%	100%
		사업비 279	73	30	50	126
	동호대교 (‘04.3～‘05.12)	공 정			17%	100%
		사업비 78			13	65
	반포대교 (’03.3～‘05.12)	공 정		15%	55%	100%
		사업비 125		19	50	56
	원효대교 (’03.4～‘05.12)	공 정	실시설계	37%	76%	100%
		사업비 99	1	37	37	24
	양화대교 (‘04.7～‘05.12)	공 정			37%	100%
		사업비 35			13	22
총사업비 : 1,547억원		1,547	381	340	377	449

② ‘04년 계획

(단위 : 억원)

구 분		계	1/4	2/4	3/4	4/4
추진내용	성산대교 - 우물통 보수 3기 - 쉬트파일공 134본	공 정	86%	100%
		사업비 48	14	34
	서강대교 - 우물통 균열보수 340m - 우물통 단면보수 200㎡	공 정	실시설계 (30%)	실시설계 (100%)	공사 (45%)	공사 (100%)
		사업비 13			6	7
	한강대교(신교) - 방호울타리 2,456㎡ - 강재도장 46,900㎡	공 정	65%	73%	81%	87%
		사업비 62	10	15	15	10
	천호대교 - 바닥판 교체 3,800㎡ - 교면포장 152a	공 정	50%	57%	63%	70%
		사업비 62	8	19	16	19
	올림픽대교 - 교면방수 및 포장 376a - 신축이음 보수 18개소 - 콘크리트 보수 1식	공 정	21%	30%	43%	53%
		사업비 41	5	10	15	11
	영동대교 - 미관보호공 6기 - 바닥판 교체 4,694㎡	공 정	39%	44%	49%	55%
		사업비 50	5	14	14	17
	동호대교 - 강교도장 8,000㎡ - 용접부 보강 및 상판보수 1식	공 정	실시설계 (30%)	실시설계 (100%)	공사 (9%)	공사 (17%)
		사업비 13	-	2	5	6
	반포대교 - 교면 포장 270a - 교각 감조부 보수 955m - 강교도장 28,854㎡ - 차량방호울타리 설치 2,135m	공 정	20%	32%	43%	55%
		사업비 50	6	15	14	15
	원효대교 - 차량방호울타리 설치 1,090m - 강교도장 7,311㎡ - 교면포장 117a	공 정	40%	52%	64%	76%
		사업비 37	3	11	11	12
	양화대교 - 우물통 미관제고공 신설 2개소	공 정	실시설계 (30%)	실시설계 (100%)	공사 (18%)	공사 (37%)
		사업비 15		2	6	5
사업비 : 377억원		377	51	122	102	102

차량방호 울타리 보강으로 추락방지

□ 사업개요

사업기간 : ‘02.1～‘06.12

사업대상 : 11개 교량

▷ 동호,동작,올림픽,성산,잠실,성수,원효,한강,천호,영동,서강

※ 8개 교량은 기 보강 완료

소요예산 : 161억원 (‘04년:48억원)

▷ 한강교량 보수․보강공사에 포함시행

사업내용 : ‘01.7월 건교부에서 강화한 기준으로 보강

	총 중량 14톤 차량이 시속 60Km, 각도15°충돌에 견딤	⇨	총 중량 25톤 차량이 시속 80Km, 각도 15°충돌에 견딤

□ 추진실적 및 계획

’03년까지 5개 교량 보강 완료하고  ‘06년까지 나머지 6개 교량 모두 연차별 보강 완료

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분		계	‘02년이전	’03년	‘04년	‘05년	‘06년
	추진계획(공정)		34%	46%	76%	91%	100%
	보 강 대 상	11개교량	4개교 (동호,동작, 올림픽,성산)	1개교 (잠실)	3개교 (성수,한강,원효)	2개교 (천호,영동)	1개교 (서강)
총사업비:16,122백만원		16,122	5,517	1,875	4,809	2,471	1,450

② ‘04년 계획

구 분		1/4	2/4	3/4
총 괄 공 정		47%	59%	76%
	성수대교	10%	50%	40%
	원효대교		40%	60%
	한강대교		40%	60%
총사업비 : 4,809백만원		98	2,022	2,689

한강교량 야간 경관조명 설치

한강상 교량에 주변환경과 조화된 야간 경관조명을 설치하여

다양한 볼거리 제공으로 서울 야경을 관광 자원화

□ 사업개요

설치대상 : 23개 교량(교량 20, 강변북로 3개소)

사업기간 : ’01 ~ ‘05.12

소요예산 : 190억원 (‘04년:40억원)

□ 추진실적 및 계획

’03년까지 14개소에 설치 완료, ‘05년까지 전교량 설치 완료

연차별	기설치	’03	‘04	‘05
23개소	7개소	7개소	5개소	4개소
설치대상	올림픽,청담,가양,동호,동작,원효, 성산대교	반포,양화,한강,잠실,광진,당산철교,강변북로(아차산대교)	한남,성수,행주대교, 강변북로(반포~동호간,당산~한강철교간)	천호,영동,마포잠실대교

기 설치된 경관 조명 설비를 최적의 상태로 유지 관리

□ 세부추진계획

① 연차별계획

구 분	‘01이전	‘02년	’03년	‘04년	‘05년
총괄공정	9%	34%	70%	91%	100%
설치대상	2개소	5개소	7개소	5개소	4개소
총사업비 : 19,062백만원	2,621	3,794	6,847	4,000	1,800

② ‘04년 계획

구 분	1/4	2/4	3/4	4/4
한남, 성수대교, 행주대교, 강변북로(반포~동호대교,한강~당산철교)	10%	40%	70%	100%
총 사 업 비 : 4,000백만원	400	1,200	1,200	1,200

□ 터널 방재 시스템 개선

평시 비상대응 능력 강화

터널 화재시 신속히 대처할 수 있도록 비상시 대응요령을

숙지토록하여 인명, 재산 등 2차 피해 확산방지

□ 대상터널 :  총 29 개소

1,000m이상(장대터널)	500～1,000m	500m미만
7개소	5개소	17개소

□ 평시 비상대응요령 숙지로 비상시 적정 대응

터널별 화재대응 훈련 정례화

▷ 각 터널별로 현장 대응시나리오 숙지훈련 월 1회이상 반복실시

- 배연설비, 소화기기, 비상조명 작동, 대피안내 훈련 등

▷ 장대터널 배연설비 작동요령 반복훈련 (수시 개인 단독훈련 실시)

▷ 방재매뉴얼 보완 : 매년초 정기 보완 및 필요시 수시 보완

유관기관과 긴밀한 협조체제 구축

▷ 관할 소방서, 경찰서 등 유관기관과 상호 연락체제 유지

▷ 비상시 대응 시나리오 배포 및 숙지 협조

□ 방재설비의 철저한 관리 ⇒ 상시 가동태세 유지

일일, 주간, 월간 등 일상점검 철저 - 최적의 상태 유지

분기별 안전점검 강화 - 시설 미비사항 적출, 적기 보완

외부전문기관 정밀점검 실시 - 전기, 소방설비 등

□ 사고 발생 요인의 원천 저감

터널내 운행차량의 과속 등 위반행위 단속 강화(경찰청 협조)

▷ 장대터널 과속방지 경보설비(경광등,안내판 등) 설치

터널안전 전광판 활용, 터널내 안전사고 예방 홍보실시

방재시설의 연차적 보수

터널 방재시설을 연차별로 현재 기준이상으로 개선․보완하여 보다 안전한 터널 환경 확보

□ 도로 터널 방재시설 종합 정비계획 추진

외부전문가 안전진단 등을 기초로 연차별 보수계획 수립

□ 소방법령 개정 등에 따른 시설 보완

화재경보설비(5개소) : 홍지문, 정릉, 구기, 호암2, 금화터널

비상콘센트설비(3개소) : 홍지문, 정릉, 구룡터널

무선통신보조(재방송)설비(3개소) : 상도, 금화, 호암2터널

비상전원설비(4개소)  : 삼청, 일원, 매봉, 작동터널 등

□ 방재능력 향상을 위한 시설 보강

자동화재탐지설비(5개소) : 남산1․3호, 홍지문, 정릉, 구룡터널

피난연결통로 방화문(4개소) : 남산3, 홍지문, 정릉, 구룡터널

비상방송설비(5개소)     : 남산1․3호, 홍지문, 정릉, 구룡터널

CCTV등 감시설비(5개소): 홍지문, 정릉, 화곡, 상도, 호암2터널 등

□ 노후설비 교체

소화전(4개소) : 상도, 구기, 북악, 자하문터널

전기설비 정비(5개소) : 남산3호, 북악, 구기, 자하문, 삼청터널

CCTV 등 제어감시(5개소) : 남산1․3호, 옥수, 구기, 자하문터널 등

□ 소요예산 :  198억원(‘04년:35억원)

□ 세부 추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	’03년	‘04년	‘05년이후
남산권 터널 (남산1․2․3호)	공 정	52.3%	77.5%	100%
	사업비 2,575	1,347	648	580
자동차전용도로 (홍지문․정릉․구룡)	공 정	10.7%	23.9%	100%
	사업비 11,537	1,237	1,527	8,773
기타 터널 (21개소)	공 정	34.5%	58.3%	100%
	사업비 5,775	1,991	1,373	2,411
총사업비	19,887	4,575	3,548	11,764

② ‘04년 계획

(단위: 백만원)

구 분	계	1/4	2/4	3/4	4/4
남산권 터널 (남산1․2․3호)	공 정	54.8%	64.9%	72.4%	77.5%
	사업비 648	64.8	259.2	194.4	129.6
자동차전용도로 (홍지문․정릉․구룡)	공 정	12.0%	17.3%	21.3%	23.9%
	사업비 1,527	152.7	610.8	458.1	305.4
기타 터널 (21개소)	공 정	36.9%	46.4%	53.5%	58.3%
	사업비 1,373	137.3	549.2	411.9	274.6
사 업 비 계	3,548	354.8	1,419.2	1,064.4	709.6

□ 시설물 안전관리의 과학화

도로관리 On-Line 시스템 구축

도로 시설물의 점검․보수 등 관리이력 정보를 전산화하여 유관부서간 On-Line으로 공유함으로써 보다 체계적이고

효율적인 도로시설물 안전관리 기반 구축

□ 사업개요

관리대상시설물 : 480개 시설물

시설물의 모든 자료를 상호(시․본부․사업소) 활용하기 위해 유지관리 부서간 On-Line 구축 보완

시설물 점검․진단, 보수․보강 등 최신의 유지관리 이력 유지

□ 세부추진계획

시설물별 담당자 ID 부여하여 정기점검 데이터 입력 및 수시 확인

시설공사 준공시 준공도면을 수정 가능한 파일로 작성하여 시설물 유지관리에 활용

□ 시스템체계

도로시설물 점검매뉴얼 작성 및 활용 극대화

시설물을 누구나 체계적이고 정밀하게 점검할 수 있도록 매뉴얼을  작성․활용하여 안전점검의 정확성과 효율성 제고

□ 사업개요

작성대상 : 157개 시설물(한강교량 19, 일반교량 58, 고가차도 46, 터널 14, 기타 20)

▷ 기 작성 완료 : 1종시설 67개 시설물

▷ 2종 및 법정외시설 382개 시설물은 구조형식이 같은 대표시설 90개로 통폐합 작성

작성기간 : '99. 3 ～ '04. 12

▷ '99～'01년 67개소, '03년 50개소, '04년 40개소

소요예산 : 10.89억원

▷ '99～'01년 9억원, '03년 1.04억원, '04년 0.85억원

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

추 진 내 용	계	'02~'03년	‘04년
총 괄 공 정		90%	100%
매뉴얼 작성(157개소)	157	117	40
총사업비 : 1,089백만원	1,089	1,004	85

② ‘04년 계획

추 진 내 용	1/4분기	2/4분기	4/4분기
공 정	90%	96%	100%
점검매뉴얼 작성(40개소)		26개소	14개소
사업비 : 85백만원		50	35

첨단장비를 이용한 과학적인 한강교량 관리

온라인 감시시스템, 특수 수중촬영장비 등 첨단장비를 이용한 정밀하고 과학적인 점검으로 한강 교량의 안전성 제고

□ 사업개요

수중구조물 점검장비 개발로 점검 정밀성과 효율성 증대

▷ 점검시기 : 주기적 순환점검(연중실시)

▷ 사업내용 : 특수 수중점검장비의 개발, 확충으로 한강교량 수중

구조물의 정밀한 점검 및 점검주기의 단축(5년주기)

▷ 사 업 비 : 15억원(‘04년:2.1억원)

특수교량 온라인 감시시스템 확충

▷ 사업기간 : ‘03. 3 ～ ’06. 12

▷ 사업내용 : 교량의 이상유무를 원격지에서 감시할 수 있는 통합시스템 구축

▷ 기존 시스템 보완 : 3개교량(올림픽, 원효, 행주대교)

▷ 추가  설치 : 2개교량

▷ 사 업 비 : 15.3억원(‘04년:4.5억원)

□ 추진실적 및 계획

수중점검 부양기 개발 완료 (‘03년 8월)

‘05년까지 전 한강교량 수중구조물(19교량 762기) 1차 점검완료 추진

연도 점검계획	‘02이전	’03년	‘04년	‘05년
연도별점검	413기	131기	130기	88기
실적누계	413기 (54.2%)	544기 (71.4%)	674기 (88.4%)	762기 (100%)

▷ 점검결과 : 구조적 안전과 관련이 없는 수면 경계부의 콘크리트 표면 열화 등 경미한 손상 발견, 보수시행

온라인 감시망 확립을 위한 실천방안 연구 학술용역     시행중 (‘03.3～’04.2,시정개발연구원)

⇒ 연구 용역결과에 따라 기존 시스템 보완 및 시설추가

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분		‘02년 이 전	’03년	‘04년	‘05년		‘06년
추진내용	온라인 점검시설		학술용역 시 행	3개 교량 보 완	1개 교량 추가설치		1개 교량 추가설치
	사업비 : 1,530		80	450	500		500
	수중 구조물 상시점검	1회 순환점검				2회 순환점검
		413기	544기	674기	762기	42기	172기
	사업비 : 1,500	605	200	208	240		247

② ‘04년 계획

(단위:백만원)

구 분		1/4	2/4	3/4	4/4
추진내용	온라인 점검시설 - 기존계측시설 보완 (3개교량)	사업계획 수 립	사업발주 (설계)	시설보완 40%	시설보완 100%
	사 업 비 : 450			180	270
	수중 구조물(우물통) 상시점검(674기)	574기 (30기)	605기 (31기)	639기 (34기)	674기 (35기)
	사 업 비 : 208		60	58	90

도로시설물 예방적 보수기법 개발

도로시설물 관리를 사후관리에서 예방적 유지관리로 전환 하여 시설물 내구수명을 선진국 수준으로 연장

□ 사업개요

계획․설계단계부터 유지관리에 대한 구체적 계획 수립

선진국 수준의 내구 수명 연장 요소를 분석하여 설계․시공에 반영  ▷ 평균 내구년수 비교 : 영국 60~70년, 일본 38.4년, 한국 25.5년

유지관리 비용, 수명 등 LCC를 고려하여  설계․시공 및 유지관리 계획 수립

▷ 100년이상 수명을 유지하는 총 비용 비교

정상시공	부실시공	시공양호	유지관리연계 시공
1	1.92	0.73	0.66

□ 추진계획

예방 보수기법 개발 연구반 구성 (본부내 1개팀)

건설기술 연구원, 대학교 등 전문연구기관과 공동 연구실시 : ‘04.하반기

□ 중차량 단속 내실화로 도로수명 연장

단속 지역 확대, 기동 단속 강화, 축중단속 시행 등 과적차량 단속 시스템을 개선하여 한강교량 등 도로시설물과 도로의 조기 파손을 예방하고 구조물 수명 최대한 연장

□ 현  황

단속초소 : 44개소(한강교량 39, 일반교량 3, 일반도로 2개소)

단 속 반 : 54개반(고정초소 44개소, 기동단속반 10개반)

단속인력 : 973명(기능직71, 청경95, 공익요원792, 운전원15명)

단속장비 : 204점(축중계 79, 카메라 65, 무전기 49, 휴대폰 11개)

단속방법 개선

	현 행		⇨				개 선
○ 단속대상 : 한강교량 등 62개 도로시설물 ○ 단속방법 : 총중량에 의한 단속 ․시설물별 제한중량 공고 ○ 고정초소 위주 단속				○ 단속대상 : 시 도로 전체 ○ 단속방법 : 총 중량 및 축하중 병행 ○ 기동단속반위주 단속
				※		고정초소 : 44개소 → 33개소(△11) 기동단속반 : 10개반 → 22개반(+12)

※ 중차량 통행 가능한 노선축 개발 용역시행과 병행 추진 (시 건설기획국, ’03. 11)

□ 추진실적

년 도 별	합 계		고 정 초 소		기동단속반
	검차실적	적발처리	검차실적	적발처리	검차실적	적발처리
‘02년	61,045	825	48,365	43	12,680	782
’03년	85,956	1,034	70,668	198	15,288	836

□ ‘04년 계획

시 도로 전체에 대한 단속 확대 공고 및  축하중에 의한 단속방법 도입

□ 도로안전 응급 대응체제 강화

도로파손, 낙하물, 고장차량 등 도로기능 장애 상태에 대한 정보를 조기에 수집하여 신속히 대응할 수 있는 체제를 구축, 안전하고 쾌적한 도로기능 유지

□ 사업개요

2원화된 도로순찰과 보수업무를 통합관리 시스템으로 전환

▷ 신속한 현장파악과 응급조치로 시민의 안전과 피해확산 방지

시민 서비스 제공

▷ 도로상의 고장차량 노견 이동 유도, 밧데리 충전, 연료제공 등

□ 추진계획

신속한 도로안전 정보 수집

▷ 119센터, 교통방송 통신원, 경찰과 유기적인 연락망 구축

- 시설관리공단, 교통방송, 119상황실, 시경찰청교통상황실 등과 협의

▷ 교통방송 교통통신원의 제보전화를 수신자부담 활용

- 교통방송통신원 : 1,164명

24시간 응급조치반 운영(6개소) :  산하 6개도로관리사업소에 설치

▷ 운영방법 : 도로보수차량을 순찰 및 보수업무 병행실시

- 보수반 24시간 대기 (6개 도로관리사업소 상황실)

▷ 인력편성 : 반별 각 4명(토목 1명, 운전원 1명, 시설관리원 2명)

▷ 임    무 : 주요간선도로 및 취약도로 순찰, 도로보수, 시민불편도우미

세계 일류수준의 도시고속도로망 확충정비

□ 강남순환도시고속도로 건설

○ 2개 순환형 고속도로망 구축으로 통과교통 우회 분산

○ 과학적인 공사 관리로 정교하고 환경 친화적인 도로 건설

□ 사업개요

공사구간 : 영등포구 양평동 ～ 강남구 일원동

공사기간 : ‘01. 12. ～ ’08. 12.

공사규모 : 폭 4～6차로,  연장 34.8㎞

총사업비 : 2조6백억원 (‘04년 : 220억원)

□ 추진실적 및 계획

남북구간 : 성산대교 ～ 안양천교(금천구 독산동) 11.9㎞

▷ ‘03년 : 지하 구조로 설계 중, 민자유치 등 건설방안 검토

▷ ‘04년 : 환경영향평가 협의 및 사업자 선정 추진

동서구간 : 안양천교 ～ 수서 I.C(강남구 일원동) 22.9㎞

▷ ‘01.12, ‘02.6. 공사계약(4,8공구), 민간사업자지정(5,6,7공구)후,

환경영향평가 협의지연으로 공사유보

▷ 빠른 시일내 환경영향평가 협의후 구간별 보상 및 공사 착공

- 서울대 등 시민여론을 적극 수렴하여 환경 친화적인 도로건설 도모

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	’03년이전	‘04년	‘05년	‘06년이후
추진계획	총괄공정	3.6%	4.7%	30.8%	100%
총사업비	2조6백억원	75,863	22,000 (보상비 11,876 포함)	515,000	1,447,137

②'04년 계획

(단위: 백만원)

추진내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
남북구간 (1~3공구)	∘실시설계 -상세설계 -관계기관 협의완료 ∘환경․교통영향평가 -기초조사 -초안서작성	∘실시설계완료 -건설기술심의 -검토완료 ∘환경․교통영향평가 -공람공고 -주민설명회, 공청회 개최	∘공사발주계획 수립 ∘도시계획 입안 ∘환경․교통영향평가 -환경부 협의 -교통영향평가	∘공사발주 ∘도시계획결정
동서구간 (4~8공구)	∘도시계획추진 -경기도구간 도시계획결정 ∘유관부서 협의 - 지장물 및 점용허가 등 ∘실시계획 인가 ∘공사착수 (4,8공구) -측량 및 지장물 이설	∘유관부서 협의 ∘공사진행 (4,8공구) -지장물 이설 -지하차도 설치 -교각설치	∘유관부서 협의 ∘실시계획승인(민자) ∘공사진행(4,8공구) -지장물 이설 -지하차도 설치 -교각설치	∘유관부서 협의 ∘공사착수(민자) -측량 및 지장물 이설 ∘공사진행(4,8공구) -지하차도 설치 - 교각 설치
사 업 비 10,124 (보상비제외)	1,012	2,025	3,240	3,847

□ 강변북로(청담대교~성수대교) 확장

○ 천호～토평간 연결 교통량 증가 등에 따른 병목현상 해소

○ 청계천 복원 등에 따른 증가교통 원활 처리

□ 사업개요

공사구간 : 성동구 성수대교북단 ～ 광진구 청담대교 북단

공사기간 : ‘02. 12. ～ ’05. 12.

공사내용

▷ 도로확장 : 왕복 8차로 → 10차로,  연장 3,000m

▷ 뚝섬유원지 진입로 신설 : (폭 4.0m, 연장 288m)

▷ 영동대교북단 I.C 개수 : 본선 1개소, 램프 4개소

총사업비 : 1,138억원 (‘04년:200억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	’03년 이전	‘04년	‘05년
공 정		20%	37%	100%
사 업 비	113,842	22,839	20,000	71,003

②'04년 계획                                         (단위: 백만원)

추진내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
도로확장	옹벽 600M 기초완료	옹벽 600M 벽체완료	옹벽 300M 기초완료	본선3단계 교통전환
영동대교북단 I/C 교량	U형옹벽 기초 180M완료	U형옹벽 벽체 180M완료	RAMP-A.B 하부공 완료	RAMP-A.B 상부공 완료
청구아파트앞 지하보차도	연결도로 150M 완료	-	-	-
뚝섬유원지 진입도로,기타	-	토공절취 및 사토완료	옹벽 288M 기초완료	옹벽벽체 및 포장완료
총사업비 20,000	1,678	1,917	2,996	13,409

□ 기존도로 구조개선으로 소통 용량 및 안전성 증대

○ 불합리한 도로구조 및 선형개선으로 간선도로 기능 제고

○ 진․출입로 정비로 소통용량 증대 및 이용편의 증진

□ 추진사업

강변북로~원효로진입 연결로 설치	: 폭 7m,	연장 420m

▷ 사업기간 : ‘02~‘05.12

▷ 총사업비 : 74억원(‘04년:20억원)

강변북로 하행선 선형개선(성산~한남)	: 선형개선	10개소

▷ 사업기간 : ’01~‘05.12

▷ 총사업비 : 105억원(‘04년:10억원)

내부순환로연결도로구조개선(홍은~정릉): 폭6.7m, 연장 696m

▷ 사업기간 : ’03~‘06.12

▷ 총사업비 : 359억원(‘04년:6억원)

중앙버스전용차로 설치: 6개 노선, 연장 74,000m

▷ 설치위치 : 도봉․미아로, 망우․왕산로, 강남대로, 시흥․한강로, 경인․마포로,수색․성산로

▷ 사업기간 : ’03,12~‘04.12

▷ 총사업비 : 594억원(‘04년:594억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위:백만원)

사 업 별	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06
강변북로～원효로진입 연결로 설치	공 정		5.3%	28%	100%
	사 업 비	7,443	393	2,000	5,050
강변북로 하행선 선형개선(성산~한남)	공 정		16%	25%	100%
	사 업 비	10,534	2,565	1,000	6,969
내부순환로연결도로구조개선(홍은~정릉)	공 정		1.2%	2.8%	51.4%	100%
	사 업 비	35,900	420	600	17,440	17,440
중앙버스전용차로설치 (도봉․미아로외5개노선)	공 정			100%
	사 업 비	59,400		59,400

보행환경 개선사업 추진

□ 친환경적인 시청앞 광장조성

○ 서울의 중심부인 시청앞 광장의 교통체계 개편

○ 시민들이 공유할 수 있는 휴식․문화공간으로 조성

□ 기본방향

교통체계 개편 - 도심 도로운영 개선, 여유공간 활용으로 도로이용 효율화

보행욕구 충족 - 주변 역사문화공간과 수평적 연계

문화공간 창출 - 시민의 휴식․교류공간, 축제 행사공간

□ 사업개요

규    모

▷ 도로구조개선 : B=8~38m, L=1,772m

▷ 광장조성 : 바닥부 조성 13,200㎡

사업기간 : '02.11. ~ '04. 4.

총사업비 : 59억원(‘04년:53억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획                                        (단위:백만원)

구 분	계	’03	‘04
추진내용		기본계획 및 실시설계	광장조성공사
사 업 비	5,900	600	5,300

②'04년 계획

▷ ‘04년 4월 공사완료

□ 한강교량 보행 접근로 정비

○ 한강교량 강․남북간 자전거(보행) 동선 정비로 접속도로와

연계망 구축

○ 교량과 시민공원의 연결로 확충정비로 공원 접근성 제고

□ 사업개요

사 업 명 : 한강교량 접근로 확충정비

사업기간 : ’03.7 ~ ‘05.12

▷ 진행중인 보수․보강공사와 성능개선공사에 포함 추진

소요예산 : 68억원(‘04:36억원) ※기존 한강교량 보수공사비에 포함

사업내용

▷ 계단경사로 보완 : 8개교량 33개소

▷ 경사로 및 계단 설치 : 4개교량(광진,잠실,한남,마포)

▷ 램프 횡단보도 신호기 설치 : 2개교량(한남,잠실)

▷ 보도협소․단절구간 보완 : 2개교량(천호,마포대교)

□  세부추진계획

① 연차별 계획

구 분		계	’03년	‘04년	‘05년	‘06년
추진내용	총 괄 공 정		30%	82%	100%
	계단경사로 설치 (8개교)	33개소	31개소		2개소
	한강공원 연결경사로 (4개교)	10개소	5개소	3개소	2개소
	램프 횡단보도 신호등 (2개교)	3개소	2개소	1개소
	보도단절 보완 (2개교)	2개소		1개소	1개소
총사업비 : 6,848백만원		6,848	2,071	3,577	1,200

② ‘04년 계획

구 분		1/4	2/4	3/4	4/4
추진내용	공 정	38%	58%	78%	82%
	한강공원 연결 경사로 설치 - 광진교(2개소) - 한남대교(1개소)
		20%	50%	30%
			10%	60%	30%
	램프횡단보도 신호등(한남)		30%	70%
	보도 단절구간 연결(1개소)		40%	60%
총사업비 : 3,577백만원		500	1,409	1,388	273

□ 광화문 지하보도 리모델링

○ 노후 지하보도를 개량하여 쾌적한 보행환경 조성

○ 청계천 복원 등과 연계, 대표적 도심 문화공간 조성

□ 사업개요

규    모 :  폭 8.3～17.2m, 연장 164.2m,  높이 2.8～3.7m

▷  출입구 :  폭 8.3～26.5m,  연장 40m(4개소)

사업내용

▷ 시설물 노후화에 따른 구조물 보수․보강, 설비교체

▷ 쾌적한 내부환경 개선 - 역사적․예술적 이미지 구현

사업기간 : ’03. 7 ～ ‘04. 11

총사업비 : 56억원(‘04년 50억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

구 분	’03년	‘04년
추 진 계 획	실시설계	공사완료
총 사업비 : 5,630백만원	630	5,000

② ‘04년 계획

추 진 내 용	1/4분기	2/4분기	3/4분기
건축공사	20%	80%	100%
보수․보강	40%	95%	100%
전력 인입․배관	10%	60%	100%
기계, 소화설비	10%	70%	100%
총사업비 : 5,000백만원	1,500	2,500	1,000

일  반  사  업

◎ 한차원 높은 시설물 유지관리

1. 시설물 안전등급 수준 향상	33

2. 시설물 안전점검 및 진단 내실화	34

3. 아스팔트포장공사 품질향상	35

4. 도로시설물 안전상태 지속 유지	37

5. 유지보수 신공법 적극 도입	42

6. 경험이 많은 퇴직 공무원 안전점검 활용	43

◎ 국제수준의 도시시설물 건설

1. 수준높은 설계품질 확보	44

2. 간선도로망 확충으로 도시경쟁력 강화	45

3. 복지․환경 등 공공기반시설 확충	51

◎ 안전 최우선의 정교한 현장관리

1. 건설현장 무사고 목표 추진	55

2. 공사의 정교한 품질관리	56

3. 밀도있는 공정관리로 투자효율 증대	57

4. 공사중 시민불편 최소화	58

5. 건설공사의 투명성 제고	59

한차원 높은 시설물 유지관리

□ 시설물 안전등급 수준 향상

관리 대상 시설물의 안전 등급을 B등급 이상으로 유지하여

안전성 제고 및 유지관리 비용 효율화 도모

□ 사업 개요

안전등급 수준 상향 : C등급 → B등급 이상

▷ 대상시설 : C등급인 5개시설(서울역고가, 남산3호터널, 도림교,

양평교, 광장지하차도)

▷ 사업내용 : 노후 부분의 보수․보강

▷ 사업기간 : '02. 3 ~ '07. 12

▷ 소요예산 :  383.5억원(‘04년 102.7억원)

□ 추진 실적 및 계획

1개소(고척2지하차도)공사완료, 2개소(남산3호터널,양평교)공사중,

5개소 모두 2007년까지 연차별 완료

※ 시설등급 현황(480개소) : A등급 120, B등급 355, C등급 5

□ 세부 추진 계획

① 연차별계획

(단위 : 억원)

구 분	추 진 개 요	계	기투자	’03	‘04	‘05이후
5개 도로시설물 안전등급상향	C→B등급이상	100%	0.6%	19.1%	45.9%	100%
		383.5	2.3	71	102.7	207.5

② ‘04년도 계획

(단위:억원)

구 분	추 진 개 요	계	1/4	2/4	3/4	4/4
4개 도로시설물 안전등급 상향	C→B등급이상	45.9%	21.2%	26.4%	34.8%	45.9%
		102.7	8.1	20	32.1	42.5

□ 시설물 안전점검 및 진단 내실화

C등급 시설물․한강상 특수교량․철도횡단 시설물 등 중점관리가 필요한 시설물은 전문가와 합동, 보다 내실있는 정기 안전점검

□ 추진계획

전문가에 의한 시설물 점검강화

▷ 정 기 점 검 : 담당공무원점검 → 전문가 또는 전문기관합동 점검

▷ 점검강화 대상 : 17개소

- C등급 시설물(6개소) : 공무원정기점검(년2회)	→ 전문가 활용(년4회)

- 한강상 특수교량(2개소) : 공무원정기점검(년2회)	→ 전문기관용역(년2회)

- 철도횡단 시설물(9개소) : 정밀점검용역(2년1회)	→ 매년 시행

시특법상 불합리한 부분 개선건의 : 건설교통부

	<현행제도상 문제점> <개선방안>
	∘1종 시설물 10년경과후 5년마다 정밀진단 → 예산낭비 ∘1종시설물중 지정시설물은 특정 공단에 수의계약 → 예산증가, 공단 파업시 대처곤란	⇨	∘정밀진단결과 양호구간은 일정기간 진단 제외 → 예산절감 ∘일정 자격을 갖춘 전문안전진단 업체를 대상으로 공개경쟁

강구조물 용접부분 안전점검 실시

▷ 대 상

- 강구조 시설물 : 99개소(154㎞)

- 강구조 용접관련 공사장 : 26개소

▷ 방 법

- 강구조 공사장에 대한 안전 및 품질점검(품질지도 및 결함 재시공)

- 강구조 도로시설물에 대한 안전점검 및 결함 신속 보수

- 용접사 기량시험 실시 등 현장교육 실시

□ 아스팔트 포장공사 품질향상

○ 소성변형, 균열발생, 평탄성 저하 방지로 도로 쾌적성 제고

○ 적기 예방보수 체제로 전환, 도로 수명연장 및 보수비용 절감

□ 사업개요

아스팔트포장 정비 : 42개구간 13,019a

▷ 정비기간 : '04. 3～'04.11

▷ 소요예산 : 220억원

개질/특수아스팔트 시험시공 실시(’03.11)

사업소 구분	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
혼 합 물	SBS	CRM	PBS	DAMA	에코팔트	SMA
시공면적	70	230	145	220	160	170

□ 추진계획

서울지방 기후에 적합한 아스콘 배합설계 개발

품질 및 시공확인 점검팀 운영(3개팀 교차점검)

아스팔트포장도로의 수준향상을 위한 연구활동 강화

관계자 직장 및 전문기관 교육 실시

아스팔트 포장 품질 및 시공 관리메뉴얼 작성

첨단 노면평가 방법을 도입하여 보수 우선 순위 결정

적정 구간에 개질재 아스팔트 포장의 점진적 확대 시행

▷ 소성변형, 균열저항에 우수하고 소음감소 효과가 있는 개질재 아스팔트인 에코팔트, SMA, CRM, SBS, PMA 등

※ 가격은 30% 높으나, 수명이 길어 오히려 경제적임.

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

추 진 내 용	계	'02~'03년	‘04년	‘05년	‘06년
총 괄 공 정		35%	54%	76%	100%
포장보수 (천a)	74	24.1	13.0	17.6	19.3
부속시설(개소)	200	65	40	45	50
총사업비 : 115,000백만원	115,000	40,000	22,000	25,000	28,000

② ‘04년 계획

추 진 내 용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
공 정	37%	44%	52%	54%
포장보수(13천a)	1.5	4.5	5.5	1.5
부속시설(40개소)		15	15	10
사업비 : 22,000백만원	2,000	9,000	9,000	2,000

□ 도로시설물 안전상태 지속 유지

일반 도로시설물 보수․보강

노후․손상․훼손된 도로시설물에 대한 신속하고 지속적인 보수․보강으로 시민 생활 안전성 제고

□ 대상시설	: 58개 도로시설물

터    널	:  4개소(남산3, 금화, 공릉, 문성터널 )

지하차도	: 12개소(잠수교남단, 가락 등)

일반교량	: 22개소(금천, 양평, 성내, 여의, 상계, 성동 등)

복개구조물	:  3개소(우이천, 정릉천, 성북천)

고가도로	: 17개소(서울역, 남산관광, 아현, 염천교 등)

□ 보수내용	: 교각보강, 신축이음장치교체, 단면보수․보강 등

□ 보수기간	: ‘02. 3 ~ ’07. 12

□ 소요예산	: 1,171억원(‘04년:522억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위:억원)

추 진 개 요	계	기투자	‘04	‘05이후
터 널(4개소)	69.62	21.14	33.66	15.12
	100%	30%	78%	100%
지하차도(12개소)	159.67	12.4	102.3	44.97
	100%	8%	72%	100%
일반교량(22개소)	405.88	70.17	215.45	120.26
	100%	17%	70%	100%
복개구조물(3개소)	23.5	3.0	11.5	9.0
	100%	13%	62%	100%
고가도로(17개소)	512.4	84.42	158.92	269.06
	100%	16%	47%	100%

② ‘04년 계획

(단위:억원)

추 진 내 용		계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
․터널 보수보강(4개소) 남산3호, 금화, 공릉, 문성	공 정		33%	40%	64%	78%
	사업비	33.66	1.68	5.05	16.83	10.10
․지하차도 보수보강(12개소) 국회앞, 잠수교남단, 경인1,2, 여의2 광화문, 가양, 가락, 의주로, 신내, 창동, 녹천	공 정		11%	21%	53%	72%
	사업비	102.3	5.11	15.35	51.15	30.69
․일반교량 보수보강(22개소) 성동교, 노량대교, 도림교(구교), 금천교, 청담1교, 삼성교, 탄천2교, 송정교, 영동6교, 성내교, 신응교, 이화교, 오목교, 여의교	공 정		20%	28%	54%	70%
	사업비	215.45	10.77	32.32	107.72	64.64
․복개구조물 보수보강(3개소) 우이천, 정릉천, 성북천	공 정		15%	23%	47%	62%
	사업비	11.5	0.58	1.72	5.75	3.45
․고가도로 보수보강(17개소) 가리봉철도, 서울역, 남산관광, 서소문, 현저, 한남1, 성산, 화랑, 홍제, 아현, 서대문, 염천교, 워커힐, 욱천, 노들, 탄천1,2, 구로공단IC	공 정		18%	23%	38%	47%
	사업비	158.92	7.95	23.84	79.46	47.67

쾌적하고 안전한 자동차 전용도로 관리

추락사고 우려가 높은 구간의 교량 난간시설을 보강 설치하여

안전을 확보하고, 청소 방법 개선으로 쾌적한 환경 조성

□ 교량 난간시설 보강

보강대상 : 올림픽대로 및 강변북로 교량 24개소(6,055m)

▷ ‘04년 : 노량대교 1,122m(’03년 기보강 948m)

▷ ‘05년이후 : 노량대교 잔여구간 등 3,985m보강

보강기간 : ’03.3 ~ ‘04.12

소요예산 : 62억원(‘04년 12억원)

□ 쾌적한 환경 조성

순 찰 강 화 : 8개조 → 14개조, 1일 4회 → 6회

▷ 순찰중 고장차량 응급조치 등 시민 서비스 역할 수행

- 밧데리 충전, 연료제공, 타이어 교체, 냉각수 보충 등

청소방법 개선 : 주간 50, 야간 50 → 주간 30, 야간 70

▷ 원활한 차량소통을 위해 야간 청소 비중 확대

□ 연차별추진계획

(단위:억원)

구 분		‘02년	’03년	‘04년	'05년이후
한강교량난간시설 보강 (24개소 6,055m)	설 계 (1억원)		24개소 (6,055m)
	공 사 (61억원)		노량대교 (3,190m중 948m시행)	노량대교 1,122m	노량대교 등 3,985m
도로 순찰강화 (13개 노선 180.6㎞)		176㎞ (2인1조 8개조)	180.6㎞ (2인1조 14개조)	지속시행	지속시행
도로 청소방법 개선 (청소물량180.6㎞)		․주간 : 50% ․야간 : 50%	․주간 : 30% ․야간 : 70%	지속시행	지속시행
총 사 업 비 : 62			11	12	39

제설작업 서비스 수준 향상

도로 유형에 따른 강설 단계별 제설완료 목표시간을 정하는 등  제설작업 서비스 수준을 설정하고, 효율적으로 제설작업을 추진하여 강설로 인한 시민불편 최소화

□ 제설작업 개요

총  연 장 : 302km(면적: 5,340k㎡, 차로연장: 1,567차선km)

▷ 자동차전용도로(13개노선) : 176km

▷ 한강상 교량(20개소)      : 24km

▷ 램프 및 IC                : 102km

제설 장비 : 유니목 22대, 살포기 71대, 액상살포기 6대

작업 인력 : 699명(작업원 252, 장비운전원 140, 직원 307명)

□ 제설작업 서비스 수준 향상

강설량에 따라 단계별 제설작업 서비스 수준 설정

노선․구간별 교통량, 도로구조 특성을 종합한 제설작업 우선순위 결정

단계별 제설수준에 맞는 작업체제 구축

▷ 단계별 제설작업 체제

단계별	예보단계 (보강근무)	적설량 3cm~5cm (1단계)	적설량 5cm~10cm (2단계)	적설량 10cm이상 (3단계)
제설작업 수준	30분전 사전살포 (교량 및 램프)	전차로 확보	주행차로우선확보	주행차로우선확보
소요시간	30분	60분	-주행차로:60분 (밀어내기) -전차로:120분 (살포)	-주행차로:60분 -전차로:1일 -실어내기:3일
동원장비	-유니목:21대 -액상살포기:6대	-유니목:21대 -살포기:54대	-유니목:21대 -살포기:54대 -삽날등 22대	-덤프 : 61대 -페이로다:50대 -※민간장비 용차 사용

□ 폭설대비 외부 제설장비 사전 확보

적설량 10cm 이상 강설시 민간장비 용차 사용

▷ 각 사업소별 관내 중기업체와 사전협약 체결

▷ 필요시 즉시 동원 가능토록 비상연락 체계 유지

군부대 제설장비 지원 사용

▷ 인근 군부대와 사전 협조하여 폭설시 군 제설장비를 지원받아 제설작업 실시

▷ 수방사 외 5개 사단(그레이다, 덤프트럭 등 91대 지원가능)

□ 초동 제설체계 유지

보다 정확한 강설 예보시스템 구축․운영

▷ 강화, 인천 및 문산지역 기상상태를 참고하는 등 서울기상 정밀 예측

▷ 폭설이 예상되는 경우 사전 제설재 살포

제설작업 거점 분산체계 유지

▷ 출동시간 단축 및 동시작업을 위해 거점기지(18개소)설치 운용

□ 민간위탁 제설용역 시행 확대

계절적 소요인력․장비의 효율적 운영을 위해 민간위탁 제설용역을 점진적으로 시행 확대

《 현 황 》		《 ‘04년 》
◦자동차전용도로 6개노선 65km - 강서사업소 18.1Km - 시설관리공단 46.9km	⇨	◦ 자동차전용도로 6개노선66.4Km, - 강서사업소 : 18.1km - 시설관리공단 : 48.3km

□ 친 환경적 제설제 지속 발굴

액상 염화칼슘 살포 : 램프 등 취약지점

환경친화적 비염화물계 제설재 살포 : 가양대교,행주대교

□ 유지보수 신공법 적극 도입

빠르게 개발되는 신공법․신자재 등을 적극 도입하여, 유지보수공사의 질을 높이고 투자 효율성 증진

□ 유지 보수공법 특성

보수․보강공법과 자재가 다양하고 특성이 상이

단기간내 품질, 수명, 유지비용 등 확인 곤란

공법이 우수하더라도 특정공법 채택시 특혜시비 우려

□ 대상 공법 : 균열보수, 단면보수, 중성화방지, 교면방수공법 등

□ 연구반 운영 : 경험이 풍부한 직원과 전문가 합동 편성

최근 시행한 보수공사 실적분석 : ‘04. 1 ～ 2

▷ 각사업소, 도로공사, 지방자치단체 등

신기술․신자재 국내외 적용 실태파악 : ‘04. 3～4

□ 보수 신공법 도입 확대방안 강구 : ‘04. 5～6

국내외 신보수공법 비교 분석

객관적이고 전문적인 평가를 거쳐 공법(자재)채택

▷ 신공법 채택시 공론화 과정을 거쳐 시행착오 최소화

▷ 가능한 경쟁요소가 포함되도록 계약방법 결정

구체적이고 현장 적용이 가능한 시방기준(안) 작성

□ 신기술․신공법 도입 확대 : ‘04. 7 (하반기)

□ 경험이 많은 퇴직 공무원 시설물 안전점검 활용

주요도로시설물 및 대형공사장에 대한 안전관리 내실화를 위해 건설분야에 경험이 많은 퇴직 공무원을 건설 안전자문단으로 활용

□ 점검분야 : 1종 시설물 및 대형 공사장의 안전점검

□ 점검대상 시설 : 26개소

주요 시설물(19개소) : 터널2, 한강교량13, 고가 3, 일반교량1

대형 공사장( 7개소) : 도로건설현장 7

□ 퇴직 공무원 건설안전 자문단 위촉

위촉인원 : 26명 (경험이 많은 기술직 퇴직 공무원)

위촉장 수여 : ‘03. 4. 4

수당지급 : 초급기술자 수준(72천원/1인)

□ ‘03년 시범실시결과

풍부한 경험과 시설물에 대한 애착으로 적극적인 점검활동

총 208회 점검, 185건 지적(조치완료 135, 조치중47, 지속관찰 3건)

□ ‘04년 운영계획

해빙기(4,5월)및 우기 이후(9,10월) 매월 4회 안전점검 실시

▷ 시설물 및 공사담당공무원과 합동으로 실시

우수인력 추가발굴(10명 내외)하여 효율성 증대

국제수준의 도시 시설물 건설

□ 수준높은 설계품질 확보

□ 단계별 설계 품질 향상

1단계 : 전문용역기관의 충실한 설계 시행

▷ 경험이 풍부한 기술자 참여로 튼튼하고 미려한 시설물 설계

▷ 선진국의 설계 및 시공사례 분석 및 시설물 견학

2단계 : 설계 감리제도 운영

▷ 1종시설, 신공법, 특수공법 건설공사의 기본 및 실시설계

3단계 : 건설기술자문위원회 운영

▷ 관련 전문가로 구성․운영하여 설계 시행중 설계 최적여부 확인

▷ 공사 발주심의 실시(국제입찰대상 약230억원 이상)

□ 설계 검토 전담팀 운영

자체 전문가로 팀 구성 ⇒ 공사․용역 발주전 설계심사

설계변경심의위원회 운영 ⇒ 공사발주 후 여건 변경에 따른 설계변경심의의 적정성을 객관적으로 검토

□ 설계 경제성 검토기법 도입과 공사 사후평가 실시

설계경제성 검토기법 적용

▷ 총공사비 500억원 이상(1종시설, 신공법, 특수공법) 건설공사

▷ 주요 기능별 설계내용에 건설공사의 생애주기비용(LCC)을 포함한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성 검토

▷ 강남순환도시고속도로건설에 사업관리기법(PMIS)을 도입하여

과학적이고 쳬계적인 공사관리 실시

공사 사후 평가 시행

▷ 내부순환로 및 북부간선도시고속도로 48㎞에 대한 사후평가

용역 시행

□ 간선도로망 확충으로 도시경쟁력 강화

한강교량 건설

○ 성산대교, 천호대교 등 주변교량 교통량 분산처리로 교통정체 해소

○ 강변북로․올림픽대로 등과 연계, 강남북 지역 균형개발

□ 월드컵대교 건설

사업개요 : 폭 6~8차로, 연장 2,991m

사업기간 : ‘00.8. ~ ’08. 12.

총사업비 : 2,629억원(‘04년:20억원)

□ 암사대교 및 연결도로 건설

사업개요 : 폭 4~6차로,	연장 2,742m

사업기간 : ‘98.12. ~ ’08. 12.

총사업비 : 3,000억원(‘04년:38억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06년 이후
월 드 컵 대 교	공 정		2.5%	3.2%	13.2%	100%
	사 업 비	262,920	6,520	2,000	26,292	228,108
암사대교 및 연결도로	공 정		2.1%	3.3%	30.3%	100%
	사 업 비	300,000	6,280	3,834	61,800	228,086

② ‘04년 계획

추 진 내 용		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
총 괄 공 정		2.6%	2.8%	3.1%	3.2%
월드컵대교	본선 사장교 상세설계	30%	30%	40%
	강북 내부순환도시고속도로 접속부분 상세설계(1식)	30%	30%	40%
	강남도시고속도로 접속부분 상세설계(1식)	10%	10%	40%	40%
	성과품 작성(1식)		10%	30%	60%
총사업비 : 2,000백만원		300	500	700	500

추 진 내 용		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
총 괄 공 정		2.3%	2.7%	3.0%	3.3%
암사대교및연결도로	측량및토질조사(1식)	40%	40%	20%
	교통및기본설계검토(0.7식)	20%	30%	30%	20%
	구조검토및상세설계(0.7식)	10%	30%	30%	30%
	성과품 작성(1식)		10%	30%	60%
총사업비 : 3,834백만원		690	1,074	1,074	996

단절구간 연결

○ 자동차 전용도로 등 주요도로간 연결성 증대로 우회교통량 감축

○ 지역간 연결도로 신설․정비로 균형발전 촉진

□ 주요사업

양 녕 로 확 장 : 폭 4차로,	연장 2,700m

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 905억원 (‘04 :152억원)

용비교～뚝섬길간 도로개설	: 폭 40m, 연장 920m

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 735억원 (‘04 :152억원)

응봉로～동부간선도로간 도로개설	: 폭 7.3m, 연장1,290m

▷ 사업기간 : ‘02~‘05

▷ 총사업비 : 211억원 (‘04 :43억원)

경인국도～구로가로공원간 도로개설	: 폭 33-50m, 연장 515m

▷ 사업기간 : ‘02~‘05.9

▷ 총사업비 : 397억원 (‘04 :133억원)

용마터널 건설(민간투자사업)	: 폭 4차로, 연장 3,500m

▷ 사업기간 : ’03~2009.5

▷ 총사업비 : 1,078억원 (‘04 :57억원)

삼일로 도로구조 개선	: 폭 6~8차로, 연장 1,028m

▷ 사업기간 : ’03.8~‘04.7

▷ 총사업비 : 106억원 (‘04 :34억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05
양 녕 로 확 장	공 정		68%	100%
	사 업 비	90,517	75,283	15,234
용비교～뚝섬길간 도로개설	공 정		54.0%	92.1%	100%
	사 업 비	73,570	49,869	15,200	3,935
응봉로～동부간선도로간 도로개설	공 정		15.0%	92.1%	100%
	사 업 비	21,100	2,730	4,350	11,320
경인국도～구로가로공원간 도로개설	공 정		66.4%	100%
	사 업 비	39,771	26,403	13,368
삼일로 도로 구조개선	공 정		67.7%	100%
	사 업 비	10,629	7,200	3,429

② ‘04년 계획

(단위:백만원)

사 업 구 분	구 분	1/4	2/4	3/4	4/4
양 녕 로 확 장	공 정	25%	60%	90%	100%
	사 업 비	3,800	5,300	4,610	1,524
용비교～뚝섬길간 도로개설	공 정	11%	38%	65%	100%
	사 업 비	400	3,800	5,400	5,600
응봉로～동부간선도로간 도로개설	공 정	14%	37%	65%	100%
	사 업 비	500	800	1,850	1,200
경인국도～구로가로공원간 도로개설	공 정	50%	65%	80%	100%
	사 업 비	2,900	3,000	3,500	3,968
삼일로 도로구조개선공사	공 정	66.8%	95.1%	100%
	사 업 비	2,280	978	171

병목구간 해소

○ 병목구간의 도로 정비로 기존 도로용량 극대화

○ 교통 혼잡구간 도로구조개선으로 정체시간 단축

□ 주요사업

서울교 및 남단지하차도 확장	: 폭 24m→55m,	연장  236m

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 492억원 (‘04 :111억원)

광진교 확장(북단교차로 개선)  : 폭 20m,	연장1,056m

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 1,018억원 (‘04 :32억원)

서남권농수산물앞 지하차도 건설  : 폭 4차로, 연장1,015m

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 384억원 (‘04 :199억원)

삼호가든앞 도로구조개선	: 폭 18m,	연장  650m

▷ 사업기간 : ‘02~‘06

▷ 총사업비 : 351억원 (‘04 :30억원)

성수대교북단 교차로 개선  : 폭 1차로, 연장2,288m

▷ 사업기간 : ‘04.3 ~‘04.12

▷ 총사업비 : 35억원 (‘04 :35억원)

동부간선도로 확장(월계1교~상계교)	: 폭 4→ 6차로, 연장 6,300m

▷ 사업기간 : ‘04~‘08

▷ 총사업비 : 2,057억원 (‘04 :25억원)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06
서울교 및 남단지하차도 확장	공 정		98.5%	100%
	사 업 비	49,158	38,041	11,117
광진교 확장 (북단교차로 개선)	공 정		90.9%	100%
	사 업 비	101,878	98,645	3,233
서남권농수산물앞지하차도 건설	공 정		48.3%	100%
	사 업 비	38,400	.18,411	19,989
삼호가든앞 교차로 구조개선	공 정		0.3%	10.3%	50.6%	100%
	사 업 비	35,100	657	3,000	11,750	19,693
성수대교북단 교차로 개선	공 정			100%
	사 업 비	3,500		3,500
동부간선도로확장 (월계1교~상계교)실시설계	공 정			기본설계	실시설계	공사시행
	사 업 비	205,710		2,500	3,000	200,210

② ‘04 계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	1/4	2/4	3/4	4/4
서울교 및 남단지하차도 확장	공 정		25%	60%	85%	100%
	사 업 비	11,117	2,779	3,891	2,779	1,668
광진교 확장 (북단교차로 개선)	공 정		5%	15%	65%	100%
	사 업 비	3,233	16	320	1,600	1,297
서남권농수산물앞지하차도 건설	공 정		44%	76%	93%	100%
	사 업 비	19,989	8,800	6,400	3,400	1,389
삼호가든앞 교차로 구조개선	공 정				12.5%	100%
	사 업 비	3,000			500	2,500
성수대교 북단교차로 개선	공 정		14.2%	28.5%	57.1%	100%
	사 업 비	3,500	500	500	1,000	1,500
동부간선도로확장 (월계1교~상계교)	공 정			기본설계 20%	기본설계 60%	기본설계 100%
	사 업 비	2,500		500	1,000	1,000

□ 복지․환경 등 공공시설 확충

사회복지․청소년 시설

□ 추진사업 (11건)

동부노인전문요양센터건립 : 지하1층,지상5층,연면적10,400㎡

▷ 사업기간 : ‘02~‘05

▷ 총사업비 : 17,796백만원 (‘04 :6,883백만원)

북부노인병원 및 요양원신축 : 지하2층, 지상5층, 연면적21,631㎡

▷ 사업기간 : ‘02~‘06

▷ 총사업비 : 31,849백만원 (‘04 :5,224백만원)

시립아동병원 증․개축 : 지하1층, 지상4~5층, 연면적13,015㎡

▷ 사업기간 : ’03~‘06

▷ 총사업비 : 24,902백만원 (‘04 :3,046백만원)

시립보라매병원신관신축 : 지하4층, 지상10층, 연면적 34,900㎡

▷ 사업기간 : ‘04. ~ ‘07.

▷ 총사업비 : 56,474백만원 (‘04 :2,689백만원)

서부노인전문요양원건립 : 지하1층, 지상4층, 연면적8,910㎡

▷ 사업기간 : ‘04~‘06

▷ 총사업비 : 16,956백만원 (‘04 :830백만원)

금천청소년수련관건립 : 지하2층, 지상3층, 연면적 5,056㎡

▷ 사업기간 : ‘00.9 ~ ‘04.7

▷ 총사업비 : 10,233백만원 (‘04 :1,778백만원)

중랑청소년수련관신축 : 지하2층, 지상3층, 연면적5,083㎡

▷ 사업기간 : ‘02~‘05

▷ 총사업비 : 12,533백만원 (‘04 :2,080백만원)

서대문청소년수련관 신축 : 지하2층, 지상3층, 연면적264㎡

▷ 사업기간 : ‘02~‘04

▷ 총사업비 : 9,788백만원 (‘04 :5,542백만원)

광진청소년수련관 신축 : 지하2층, 지상3층, 연면적4,959㎡

▷ 사업기간 : ‘03~‘06

▷ 총사업비 : 10,040백만원 (‘04 :1,200백만원)

마포청소년수련관 신축 : 지하2층, 지상4층, 연면적4,950㎡

▷ 사업기간 : ‘04~‘06

▷ 총사업비 : 10,043백만원 (‘04 :1,300백만원)

보라매청소년수련관 리모델링 및 증축 : 2개동 4,720㎡, 증축 : 540㎡

▷ 사업기간 : ‘04~‘06

▷ 총사업비 : 4,900백만원 (‘04 : 228백만원)

□ 연차별추진계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06
동부노인전문요양센터건립	공 정		15%	48.2%	100%
	사 업 비	17,796	1,694	6,883	9,219
북부노인병원 및 요양원신축	공 정		25%	54%	87%	100%
	사 업 비	31,849	11,953	5,224	10,531	4,141
시립아동병원 증개축	공 정		3%	15%	52.2%	100%
	사 업 비	24,902	694	3,046	9,250	11,912
시립보라매병원신관신축			10%	30%	70%	100%
	사 업 비	56,474	670	2,689	28,000	25,115
서부노인전문요양원건립				5%	75%	100%
	사 업 비	16,956		830	11,200	4,926
금천청소년수련관건립	공 정		63%	100%
	사 업 비	10,233	8,455	1,778
중랑청소년수련관신축	공 정		8%	55%	100%
	사 업 비	12,533	3,352	2,080	7,101
서대문청소년수련관 신축	공 정		40%	100%
	사 업 비	9,788	4,246	5,542
마포청소년수련관 신축	공 정		7%	11%	68%	100%
	사 업 비	10,043	800	1,290	4,200	3,713
보라매청소년수련관 리모델링	공 정			5%	70%	100%
	사 업 비	4,900		228	3,150	1,522
광진청소년수련관 신축	공 정		5%	18%	72%	100%
	사 업 비	10,040	800	1,200	3,950	4,090

치수․환경시설

□ 추진사업 (10건)

치 수 시 설 확 충	: 3개소

하수처리시설 개선	: 6개소

자원회수시설 건립	: 1개소

□ 세부추진계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06
반포천 차집관거 및 동부간선 차집관거시설	공 정		53%	91.2%	100%
	사 업 비	4,038	2,133	1,635	270
정릉천복개구간 치수사업	공 정		68.3%	100%
	사 업 비	32,543	22,128	10,415
노유빗물펌프장 설치공사	공 정		30%	55%	100%
	사 업 비	31,487	9,500	8,000	13,987
중랑하수1․2처리장 고도처리시설	공 정		-	19%	52%	84%
	사 업 비	80,155	1,517	26,143	27,301	25,194
탄천하수처리장시설개선	공 정		-	20%	55%	100%
	사 업 비	23,683	819	3,207	10,556	9,101
서남하수처리장 시설개선	공 정		-	20%	55%	100%
	사 업 비	32,554	859	4,142	14,935	12,618
난지하수처리장 시설개선	공 정		-	20%	55%	100%
	사 업 비	27,352	760	3,901	12,129	10,562
탄천하수처리장 복개공원화	공 정		82%	100% 2단계공사 설계	2단계공사 시행
	사 업 비	10,357	8,930	1,427
마포자원회수시설건립	공 정		60%	95%	100%
	사 업 비	170,791	105,349	54,131	11,311
세곡천차집관거설치	공 정			100%
	사 업 비	1,000		1,000

공공청사․문화 체육시설 등

□ 추진사업

건설안전본부 청사 신축	: 지하1층, 지상4층, 연면적 12,961㎡

용산 소방서 신축	: 지하1층, 지상4층, 연면적4,903㎡

강남 소방서 신축	: 지하1층, 지상5층, 연면적4,696㎡

서대문소방서신축	: 지하1층, 지상4층, 연면적4,703㎡

성북소방서신축	: 지하1층, 지상4층, 연면적4,703㎡

남부여성발전센터 지하주차장 건설 : 연면적 4,037㎡

서남권농수산물도매시장시설확장 : 연면적28,446㎡

창동운동장 조성 및 문화체육센터건립  : 연면적14,378㎡

북한산성 성곽복원정비	: 연장 279m (3단계1차)

□ 세부추진계획

(단위:백만원)

사 업 내 용	구 분	계	‘02～’03	‘04	‘05	‘06
건설안전본부청사 신축	공 정		3%(실시설계)	63%	100%
	사 업 비	23,582	817	14,064	8,701
용산소방서 신축	공 정		5%	75%	100%
	사 업 비	9,214	300	1,956	6,958
강남소방서 신축	공 정		51%	87.5%	100%
	사 업 비	6,673	3,763	2,077	833
서대문소방서 신축	공 정		5%	23%	100%
	사 업 비	9,768	150	2,077	7,541
성북소방서 신축	공 정		10%	20%	60%	100%
	사 업 비	8,502	252	1,899	4,200	2,151
남부여성발전센터 지하주차장 건설	공 정		22%	42.3%	100%
	사 업 비	3,884	863	779	2,242
서남권농수산물도매시장 시설확장	공 정		68%	87.4%	100%
	사 업 비	33,275	25,476	3,597	4,202
창동운동장 조성 및 문화체육센터건립	공 정		19%	79%	100%
	사 업 비	30,970	19,455	8,180	3,335
북한산성성곽 복원정비	공 정		25%	100%
	사 업 비	1,675	419	1,256

안전 최우선의 정교한 현장관리

□ 건설현장 무사고 목표 추진

○ 건설현장의 안전관리 체계확립과 주기적인 안전점검을 통하여

사고 없는 공사장 관리

○ 안전의식 함양을 위한 반복교육 강화, 우수현장 표창 등

자발적인 안전관리 의욕고취

□ 건설현장의 다중 안전관리 체계확립

현장기술자, 본부안전점검 전담반, 외부전문가로 3중 안전점검

매월 4일을 안전점검의 날로 지정, 일제 안전점검 실시

안전관리계획의 엄격한 이행으로 자발적 현장안전관리 이행지도

□ 반복적인 안전점검 실시로 안전사고 최소화

일정규모이상 공사장에 대하여 본부 안전점검반 점검실시

해빙기 등 취약시기는 외부전문가와 합동, 정밀 점검시행

□ 안전의식 함양을 위한 안전교육의 내실화

교육기관 : 안전교육전문기관, 구조물진단학회 등

대    상 : 4～5급 공무원 및 각 부서 안전담당자

교육횟수 : 연 2회(상반기 : 안전담당자, 하반기 : 4～5급 공무원)

□ 무사고 달성을 위한 상벌제도 도입

안전관리 우수현장 표창 수여,  안전사고 발생현장 부실벌점 부과

안전사고 발생시에는 경중에 따라 관련자 엄중 문책

안전관리에 따른 수범 또는 실패사례 발굴 교육자료로 활용

□ 정교한 품질관리

ISO9001품질경영시스템 지속적 사후관리

고품질의 도시안전관리기법 창출을 위하여 국제 표준화기구로

부터 취득한 ISO 9001(국제품질경영시스템)의 지속적인

관리로 수준 높은 건설행정 서비스 제공

□ 추진개요

사후관리심사 : 재인증 후 연 1회 (인증기관에서 실시)

직원교육

▷ 전담직원위탁교육 : 연 1회(인증기관에 의뢰 실시)

▷ 신규전입직원교육 : 연 2회(자체 교육실시)

전담 직원 워크샵 : 연2회(내부이행점검 및 사후심사 대비 실시)

□ 세부추진계획

① 연차별 계획

추 진 내 용	계	'02~'03년	‘04년	‘05년	‘06년
총 괄 공 정(%)	(%)	36	44	62	100
사후관리심사	6회	3회	1회	1회	1회
재인증심사실시	2회	1회			1회
직원교육실시(전담팀교육 포함)	13회	4회	3회	3회	3회
전담직원 워크샵실시	9회	3회	2회	2회	2회
총사업비 : 110백만원	110	40	20	20	30

② ‘04년 계획

추 진 내 용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
공 정(%)	39	40	41	44
사후관리심사 (1회)				1회
직원교육실시 (3회)	1회	1회	1회
전담직원 워크샵실시 (2회)		1회		1회
사업비 : 16백만원	8	1	1.2	5.8

건설공사 실명제 내실화

□ 설계․시공․관리의 전과정에 실명제 도입(설계․시공자, 공무원)

실명대상 : 설계자․시공자․담당공무원

▷ 설계부분 : 구조물별 용역참여기술자

▷ 공사부분 : 신설․보수공사, 지하매설공사 참여자

□ 실명제 기록보존․관리

실명준공 표지판, 공사참여자 CD-Rom, 준공도서 보존 등

□ 밀도있는 공정관리로 투자효율 증대

○ 고품질를 유지하면서 공기단축으로 시민불편 해소

○ 최적기간의 공기책정 기법도입으로 공기단축

○ 완벽한 공정관리로 행정 신뢰성 확보 및 예산절감

□ 추진 대상 : 100억이상 대형공사와 특별관리 필요 복합공종공사

□ 추진 계획

조사, 설계단계부터 공정관리 개념 도입

▷ 설계변경으로 인한 공기연장 예방

PERT/CPM 공정기법 도입

▷ 불필요한 여유시간 제거 및 적정한 예산투입

▷ 주공정 사전 파악으로 효율적 공정관리

시공계획 작성 전문화로 공기단축, 능력 보유한 감리자 선정

인터넷을 이용한 공정 전산화(PMIS)

▷ 시행자 ↔ 감리 ↔ 시공자간 신속한 의사교환 가능으로 공사 추진 효율화

공사장 홈페이지 운영 - 정보의 교류로 기술향상 및 공기단축

□ 공사중 시민불편 최소화

□ 추진 방향

도로 점용 최소화로 교통통제 억제

소음․진동 저감 공법 및 장비사용

현장 가림막 수준향상으로 도시 미관 제고

분진 발생 철저 관리로 Clean Seoul 추구

□ 실태 및 문제점

도심지 현장사무실 및 공사자재 과다 적치

불요불급한 도로점용으로 통행불편 유발

도심 발파, 중장비 작업 등으로 소음․진동 민원 유발

□ 추진 계획

현장 사무실 축소

▷ 임차 설치 원칙으로 하되 가설사무실 설치시 노외부지 확보

자재․장비 등 적치장 외곽지역 확보 의무화

▷ 자재는 가공하여 당일 사용분만 현장 반입

교통장애 최소화 및 최적 공법

▷ 기본설계 단계부터 교통 장애저감 공법 검토

▷ 부득이한 교통 통제시에는 우회로 확보 등 사전 홍보

공사시간 조정 - 교통량이 적은  시간, 야간․공휴일 중점시행

입찰안내서 및 계약조건에 교통장애 최소화 지침조건 부여

서울시 전문 시방서에 반영

□ 건설공사의 투명성 제고

전자입찰제 전면 실시

인터넷 온라인방식에 의한 전자입찰제의 전면 실시로 언제 어디서든 입찰에 참가할 수 있는 편리함과 입찰업무의 투명성․공정성을 제고함

□ 개     요

실시시기 : ’03.10.1 발주분부터

대     상 : 법령상 의무조달 발주대상사업(100억이상PQ, 대안․일괄입찰)

을 제외한 공사․용역․물품구매

□ 입찰 절차

개인PC로 조달청홈페이지에         조달청 서버에

입찰신청자     접속후 입찰서제출                 입찰등록 데이터 저장

(조달청에 입찰참가등록된자중)

개찰  낙찰자결정과정        OPEN시스템에 자료입력      서울시 OPEN시스템

(경리과) 및 낙찰자료                  (경리과)              에서자료확인(입찰자)

□ 시행 효과

입찰업무의 투명성․공정성․업무처리의 신속성․편리성 확보

입찰참가자와 접촉없이 인터넷 온라인 상시입찰로 비용절감 및

비리 소지를 사전에 예방

□ 시행상의 문제점에 대한 개선요청(조달청)

국가종합전자조달시스템(G2B)에 행자부기준중 일부가 반영되지 않아 입찰업무에 어려움 발생

G2B에 공고내용 입력과정이 복잡하여 발주부서에서 사전적격심사 입찰공고 등 직접 입력시의 어려움 발생

시스템 집중사용으로 인한 주전산기 용량부족, 장애발생

소규모 건설공사 관리개선

소규모공사에 대한 계약 및 공사집행과정의 불합리한 부분을 개선하여 예산 절감 및 공사 품질의 수준 향상 도모

□ 소규모공사 현황(’03년 기준)

총 94건 657억원

▷ 포장공사 : 12건 200억원

▷ 시설물 유지보수 : 41건 427억원

▷ 용역, 기타 : 30억원

□ 개선 방안

계약업무의 효율성 제고 및 전문성 보강

▷ 각 사업소에서 시행하는 계약업무중 일정규모이상 사업은 본부에서 집중 처리

- 일반공사 1억이상, 전문공사 7천만원이상, 용역․물품 3천만원이상

▷ 계약담당공무원의 전문성 확보 - 유경험자 보직관리. 전문교육 실시

공사 원가 산출의 적정성 확보

▷ 적정한 설계품, 제 잡비용의 합리적 산출, 적극적인 원가 분석 시행

▷ 현장 여건에 맞는 공법․자재 선정으로 근원적인 원가절감

▷ 설계검토 전담반의 설계도서 정밀 검토후 공사 발주

하도급 제도의 합리적 개선방안 (관계기관 건의)

▷ 불법 하도급 방지를 위한 공사감리 및 관리감독 철저

▷ 현행 계약제도 개정 건의

- 면허 취득 요건 강화 - 인원․장비가 없는 회사는 면허 불허

- 5억원이상 소규모 공사도 서울지역 업체로 지역제한 또는 공동 도급

- 소규모공사의 입찰 방식인 제한적 최적가격 입찰방식을 최저가 낙찰 방식으로 개선 건의

공법․자재선정의 객관성 유지

○ 공법․자재선정 과정의 투명화로 객관성 확보

○ 주요 공법․자재 선정시 관련 전문가 검증으로 우수공법 선정

□ 추진방향

공법․자재에 관한 다양한 전문지식과 정보 활용․체계화

▷ 관련 외부전문가 자문 및 외국시공사례 등을 조사 분석

▷ 신기술․신공법․신소재 등에 대한 DB구축

▷ 타기관(연구기관)의 시공 또는 연구실적을 통한 정보 획득

주요 현안 공법․자재는 선정 과정과 결과를 공개

▷ 일반인 및 전문가 의견 수렴(이해 당사자 배제)

▷ 구체적인 시공사례와 상세한 검증 과정을 공개

□ 추진계획

전문가 합동 공법․자재 선정 자문회의 운영

▷ 자문회의시 채택 가능한 공법, 자재를 비교 제시

- 경제성, 친환경성, 현장 적용성, 안정성, 유지관리 등

- 공사실적, 공사기간, 난이도, 타기관 파급효과 등

▷ 제시된 각 항목에 대하여 평가시행

- 용역사, 관계 공무원, 관련전문가, 시공실적이 있는 현장 관계자

▷ 평가과정 및 결과를 본부 인터넷 홈페이지에 공개

시험시공이 가능한 공법에 대하여는 경쟁요인 부여

▷ 공법․자재 평가결과에 따라 필요시 공법 입찰 경쟁

- 설계도면, 시방서, 산출내역서를 공법별 복수 작성 (설계비용 추가)

- 입찰시 현장설명서, 입찰유의서, 공사계약 특수조건에 계약조건 부여

‘04단위사업별 추진계획

◈ 총  괄

구 분	사업시행건수	'04 사업비(단위:백만원)
합 계	157	603,716
시설물 안전관리사업	94	267,131
도로․교량건설 사업	27	146,914
보행환경 개선 사업	3	14,700
공공시설물 건립 사업 등	33	174,971

◈ 분야별 사업시행 현황

(단위:백만원)

분 야 별		건 수	’04사업비
□세계일류 수준의 도로망 확충정비		27	146,914
	∘도시고속도로 건설	6	36,224
	∘한강교량 건설	3	9,067
	∘기존도로 구조개선	8	34,545
	∘도로 단절구간 연결	5	34,802
	∘병목구간 해소	5	32,276
□24시간 안심하고 이용할 수 있는 시설물 유지관리		94	267,131
	∘한강교량의 안정성 강화 및 경관제고	12	113,697
	∘터널방재 시스템 개선	1	3,548
	∘시설물 안전관리의 과학화	3	743
	∘과적차량 단속 내실화	2	3,778
	∘안전등급 수준 향상	4	4,672
	∘터널 보수보강	5	5,037
	∘일반교량 보수보강	23	23,081
	∘지하차도 개보수	12	7,380
	∘하천 복개구조물 보수보강	4	2,550
	∘고가도로 보수보강	16	18,472
	∘기전시설 개보수	2	3,236
	∘도로시설물 일상유지	10	80,937
□보행환경 개선		3	14,700
□국제수준의 공공시설 건립		33	174,971
	∘사회복지시설	5	22,278
	∘치수․환경시설	11	105,306
	∘청소년․문화․체육시설	7	20,308
	∘공공청사 등	10	27,079

단위사업별 추진계획

□ 세계일류 수준의 도로망 확충정비

1. 도시고속도로 건설

(단위:백만원)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	강남순환도시 고속도로건설	∘위치 : 영등포구 양평동 ～ 서초구 수서동 ∘규모 : 도로폭 4～6차선 연장 34.8Km ∘사업기간 : ‘94.7～’08.12 ∘총사업비 : 2,060,000	10,124	4.7	【동서구간 : 4～8공구】 ∘환경영향평가 환경부 협의 완료 ∘민자구간 실시계획 승인 ∘보상 추진 ∘공사 시행 【남북구간 : 1～3공구】 ∘교통․환경영향평가 용역시행 및 제반 법적 절차 이행 ∘실시설계 완료 ∘공사 발주	건설2부1팀 (도로계획과)
2	강변북로 (청담～성수)확장공사	∘도로확장 B=36.8→41.8m (왕복8차로→10차로) ∘영동대교북단I.C개선 ∘뚝섬유원지진입로신설 B=4.0m, L=288m ∘사업기간 : ‘02.12 ～ ’05.12 ∘총사업비 : 113,842	20,000	37	∘영동대교E,F철거 및 일산 방향교통우회 처리완료 ∘본선제외지측옹벽시공 및 지하보차도 시공완료 ∘뚝섬유원지진입로설치예정 B=4.0m, L=288m	건설2부3팀 (도로계획과)
3	동부간선도로 확장(월계1교～상계교)	∘도로확장B=2차로→2～7 차로,L=6,400m ∘고가, 지하차도 : 각2개소 ∘사업기간 : ‘96. ～ ’07.12 ∘총사업비 : 205,710	2,500	설계 47	∘기본설계 준공	건설1부설계 (도로계획과)
4	강변북로 → 원효로 진입 연결로 설치	∘위치 : 마포대교북단IC～ 용산구 원효로 구간 ∘규모 : 고가차도건설 B=7.5m, L=420m ∘사업기간 : '02 ～'05 ∘총사업비 : 7,443	2,000	28	∘ ‘03.7. 4 : 실시설계 용역착수 ∘ ‘04. 3. 4 : 실시설계 완료예정 ∘ ‘04. 7. : 공사시행	건설2부2팀 (도로계획과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
5	기존강변북로구조개선 (성산대교～ 한남대교)	∘ 위치 : 성산대교～한남대교 (하행선) ∘ 규모 : 도로구조개선 (11개소) - 선형조정 : 2개소 - 가.감속차로개선 6개소 - 엇갈림구간개선 3개소 ∘ 사업기간 : '03 ～'05 ∘ 총사업비 : 10,534	1,000	25	∘ ‘02.12.10 : 실시설계 용역착수 ∘ ‘03.10.31: 일부구간 사업 시행방안 방침 ∘ ‘03.12.29 : 토공구간 8개소시행(착수) ※ 일부 구조물구간은 강변북로→원효로 진입연결로 설치구간과 통합시행 예정	건설2부2팀, 서부도로 관리사업소 (도로계획과)
6	내부순환로 연결도로(홍은동～정릉동)구조 개선 실시설계	∘Down 램프설치 B=1차로 L=640m ∘사업기간 :‘02 ～ ’06.12 ∘총사업비 :35,900	600	100	∘실시설계용역 ∘발주 및 착수 ∘현장 및 지반조사	건설1부설계 (도로계획과)

2. 한강교량 건설

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	암사대교 및 연결도로건설 (사가정길～암사동간도로개설)	∘암사대교 B=4～6차로 L=1,130m ∘연결도로 B=4차로 L=1,130m ∘사업기간 :‘98 ～ ’08 ∘총사업비 :300,000	3,834	설계 100	∘용역착수 및 기본설계 검토 ∘현황측량 및 조사	건설1부설계 (도로계획과)
2	광진교 확장	∘본선교량 B=20mL=1,056m ∘램프설치 B=7.5m L=189m ∘남북단도로확장 B=20～40m,L=898m ∘사업기간 :‘97.3.18～’04.12.31 ∘총사업비 :101,878	3,233	100	∘북단상수도이설 ∘남단자전거도로설치 ∘교량점검시설설치 ∘기타1식	건설1부4팀 (도로계획과)
3	월드컵대교건설	․교량건설 B=6～8차로, L=1,500m ∘사업기간 :‘00～’07 ∘총사업비 :262,920	2,000	설계 100	∘실시설계완료	건설1부설계 (도로계획과)

3. 기존도로 구조개선

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	버스우선처리시스템 확대 (강남대로 중앙버스전용차로)	∘B=40～50m, L=14,700m ∘사업기간:‘04.2～’04.6.30 ∘총사업비 : 8,390	8,390	100	∘‘04. 2 공사발주 ∘‘04. 3 공사착공 ∘‘04. 6 준공예정	건설1부
2	중앙버스 전용차로 (도봉․미아)설치	∘버스전용차로설치 L=14,100m ∘중앙승강장설치 32개소 ∘사업기간:‘03.12.31～’04.6.28 ∘총사업비 : 15,200	5,700	100	∘‘03.12 발주 및 계약 ∘‘03.3～’04.6 : 공사착공 및 준공	건설1부2팀 (도심교통 개선반)
3	성수대교북단 교차로 구조개선사업	∘도로개설 B=2차로 L=990m ∘사업기간 :‘04.2～’04.5 ∘총사업비 :3,500	3,500	100	∘‘04. 2 설계용역수행 ∘‘04. 6 공사시행	건설1부설계 (도로계획과)
4	삼호가든앞 교차로 개선	∘지하차도건설 B=4차로 L=650m ∘사업기간 :‘03.7.7～’04.5.6 ∘총사업비 :35,100	3,000	10	∘설계용역수행 ∘공사착공	건설1부설계 (도로계획과)
5	양화대교 및 성산대교 북단램프개선	∘양화대교 B=3.75, L=65m ∘성산대교 B=3.75, L=35m ∘사업기간 : ‘04.2～’04.10 ∘총사업비 : 1,400	60	100	∘설계용역 수행	건설1부설계 (도로계획과)
6	삼일로도로 구조개선	∘도로구로개선 B=6～8차로, L=1,028m ∘도로확장(P-Turn) B=2～3차로, L=1,340m ∘사업기간 :‘03.7.22～’04.7.20 ∘총사업비 :10,629	3,429	100	∘‘04. 4월 도로구조개선 공사 완료(준공)	건설1부 (도로계획과)
7	중앙버스전용차로 (수색, 성산로)	∘중앙차로설치 : L=9.9㎞ ∘승강기설치 214개소 ∘사업기간 : ‘04.2～’04.6 ∘총사업비 : 8,080	8,080	100	∘기본 및 실시설계완료 ∘공사발주 및 착공 ∘준공	건설1부4팀
8	미아고가차도 철거공사	∘미아고가차도 B=6～11m, L=440m ∘교대 및 램프철거 : 3개소 ∘교각철거 : 18기 ∘사업기간 : ‘03.12.29～’04.2.26 ∘총사업비 : 2,386	2,386	100	∘공사착공 및 유관부서 협의 ∘공사 준공	건설1부2팀 (도로계획과)

4. 단절구간 연결

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	용비교～뚝섬길간 도로개설공사	∘도로개설B=8차선, L=460m ∘차로연장B=4.5m, L=460m ∘사업기간 :‘01.12.29～’04.10.30 ∘총사업비 :73,570	4,050	87	∘'04.4 설계용역 준공예정 ∘‘04. 4 공사시행 예정	건설1부3팀 (도로계획과)
2	응봉로～동부간선도로 연결도로개설 (뚝섬길정비)	∘도로개설 B=7.3m,L=1,290m (지하차도 370m) ∘사업기간 :‘03.11.10～’05.7.30 ∘총사업비 :21,100	2,150	32	∘‘04.5. 2차 공사시행	〃
3	용마터널건설 (민간투자시설사업)	∘B=4～6차로 ,L=3,540m (터널4차로, L=2,520m포함) ∘사업기간 : ‘03 ～ ’09 ∘총사업비 :107,800(민자)	(민자5,700)	설계 100	∘용역착수 현황측량 및 지질조사	건설1부설계
4	양녕로 (구약수로)확장	∘도로확장 B=12→20m L=2,700m ∘터널 L=280m ∘사업기간 :‘01.12.20～’04.12.31 ∘총사업비 : 90,517	15,234	100	∘토공 11,998㎥ ∘구조물공(용역)L=446m ∘기타 1식 ∘공사 준공	건설1부3팀 (도로계획과)
5	경인국도～구로가로공원간 도로개설	∘지하보차도 및 연결로개설 B=33～50m L=515m ∘사업기간 :‘01.9～’05.9 ∘총사업비 : 39,771	13,368	80	∘공사 시행 및 착공	건설1부3팀 (도로계획과)

5. 병목구간 해소

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	서남권농수산물 도매시장앞 지하차도건설	∘지하차도 B=4차로 L=1,015m ∘사업기간 :‘01.12～’04.10 ∘총사업비 :38,732	19,989	100	∘본선Box U-Type시공 ∘포장공 및 부대공1식	건설1부4팀 (도로계획과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
2	서울교 및 남단지하차도 확장공사	∘교량확장B=6차로→12차로 L=236m ∘지하차도확장 B=2차로→4차로, L=530m ∘사업기간 :‘99.3.14～’04.12.31 ∘총사업비 :49,158	11,117	100	∘기준교량 PSC 제작 및 거치 ∘기존교량 포장완료 ∘공사준공	건설1부2팀 (도로계획과)
3	가산동79-2주변 도로개설 실시설계	∘도로개설 B=4차로,L=150m ∘사업기간 :‘03.10～’05.12 ∘총사업비 : 5,300	150	100	∘기본설계중 ∘실시설계 발주예정 (3월중)	건설1부설계 (도로계획과)
4	추모공원 진입도로 개설	∘도로개설 B=14～35m L=1,355m(터널320m 포함) ∘사업기간 :‘02.4.30～’06.9.14 ∘총사업비 :17,900	1,000	28	∘기본 및 실시설계 시행 ∘토공 및 포장공 1식 ∘기타 부대공 1식	건설1부2팀 (도로계획과)
5	방화대교 남단 접속도로 건설	∘사업내용 - 도로개설 B=5.75～9m L=3,037m ∘사업기간 :'04.2～'04.9 ∘총사업비 :6,574	20	2	∘실시 설계용역 시행	건설1부설계 (도로계획과)

□ 24시간 안심하고 이용할 수 있는 시설물 유지관리

1. 한강교량의 안전성 강화 및 경관제고

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	마포대교 확 장	∘교량확장(DB24) B=22.75m(5차로) L=1,389m ∘기존교량 철거 후 재가설 B=22.75m,L=1,389m ∘사업기간 :‘96.12～’05.12 ∘총사업비 : 221,356	31,850	86	∘교각 및 교대설치 6개소 ∘강교제작 설치 9,180톤 ∘상부슬래브 설치 915m	교량관리부 5팀 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
2	성수대교 확 장	∘교량확장 B=19.4m→35m(4→8차로) L=1,160m ∘강남․북 IC 1식 ∘사업기간 : ‘98.12～’04.12 ∘총사업비 :130,000	23,343	100	∘포장공 665a ∘슬래브공 3스판 ∘부대공(난간,방호책등) ※ 2004.12.31 준공예정	교량관리부 3팀 (도로관리과)
3	한남대교 확장 및 성능개선	∘교량확장 B=25.5m(6차로) L=919m ∘기존교량보수보강 B=25.7m, L=919m ∘사업기간 :‘96.12～’04.12 ∘총사업비 :158,564	17,505	100	∘우물통 보수및보강 7기 ∘교각 보수 및 보강 13기 ∘교면방수 및 포장 263a ∘램프 상부슬래브 608m ∘신축이음장치 632m ※ 2004.12.31 준공예정	교량관리부 2팀 (도로관리과)
4	천호대교 보 수	∘B=25.6m, L=1,150m -우물통 보수 및 보강 34기 -교량받침 교체 및 보수 734개소 -바닥판 일부 교체 7,532㎡ -교면포장 및 방수 305a ∘사업기간 :‘00.12～’05.11 ∘총사업비 :26,139	6,217	70	∘바닥판 교체 7,532㎡ ∘교면포장 100a ∘교좌장치 교체 300개	교량관리부 1팀 (도로관리과)
5	반포대교 (잠 수) 보 수	∘B=25m, L=1,490m (잠수교 B=18m, L=795m) -교각감조부 보수 955m -교면포장(잠수교) 270a -강교 내부도장 28,854㎡ -바닥판 하면 보수 1식 ∘사업기간 :‘03.10～’06.1 ∘총사업비 :12,530	5,000	55	∘교각감조부 보수955m ∘교면포장 270a ∘강교내부도장28,854㎡	교량관리부 2팀 (도로관리과)
6	영동대교 보 수	∘B=25m, L=850m -우물통 보수 및 보강 37기 -강교도장 52,625㎡ -바닥판 일부교체 10,711㎡ -교면포장 및 방수 215a ∘사업기간 :‘00.12～’05.12 ∘총사업비 :27,970	5,000	55	∘미관보호공 4기 ∘바닥판 교체 4,694㎡	교량관리부 3팀 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
7	한강대교 (신교)보수	∘B=18～20m, L=841m -강교도장 62,906㎡ -교면포장 및 방수 220a -방호울타리 설치 2,456㎡ -점검통로 설치 1,451m ∘사업기간 :‘02.7～’05.7 ∘총사업비 :18,175	5,000	87	∘방호울타리 2,456m ∘강교도장 46,900㎡	교량관리부 4팀 (도로관리과)
8	성산대교 보 수	∘B=27m, L=1,415m -난간교체 2,650m -차량방호울타리설치 4,431m -교면포장 410a -우물통 보수 15기 ∘사업기간 :‘01.8～’04.6 ∘총사업비 :21,620	4,802	100	∘우물통 보수 3기 ∘쉬트파일공 134본 ※ 2004.6.30 준공예정	교량관리부 4팀 (도로관리과)
9	올림픽대교 보 수	∘B=30m, L=1,470m -교면포장 및 방수 555a -교각수면경계부 보호 641㎡ -신축이음장치 교체 32개소 ∘사업기간 :‘03.8～’06.1 ∘총사업비 :11,680	4,150	53	∘교면방수 및 포장 378a ∘신축이음장치교체 26개소 ∘콘크리트 보수 1식	교량관리부 1팀 (도로관리과)
10	원효대교 보 수	∘B=20m, L=1,120m -강교도장 12,232㎡ -접속교 교면포장 231a -차량방호울타리 설치 5,779m -받침장치 보수및도장 380개소 -외부텐던 재긴장 6개소 ∘사업기간 :‘03.7～’06.1 ∘총사업비 :9,980	3,700	76	∘교면포장 231a ∘방호울타리 설치 5,779m ∘받침장치보수및도장380개소	교량관리부 2팀 (도로관리과)
11	한강교량 일상유지 보 수	∘천호대교등19개 교량 -일상유지보수 및 긴급보수 ∘사업기간 :‘04.2～’04.12 ∘총사업비 :3,200	3,200	100	∘난간, 신축이음장치보수 ∘교면포장 및 소파보수 ∘교량부속시설세척및보수 ∘수중 우물통 보수 등	교량관리부 1팀 (도로관리과)
12	동호대교외 2개교량 보 수	[동호, 서강, 양화대교] -강교도장 61,560㎡ -콘크리트바닥면보수 2,425㎡ -우물통 보수 31기 ∘사업기간 : ‘04.11～’05.12 ∘총사업비 :12,580	3,930	29	∘실시설계(100%) ∘공사시행 - 강교도장 8,000㎡ - 우물통 보수26기	교량관리부 4팀 (도로관리과)

2. 터널방재 시스템 개선

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	도로터널 시설물 정비	∘ 대 상 - 남산1호터널외 7개소 (남산1,3,호암2,구기,북악, 자하문, 홍지문, 구룡터널) ∘ 규 모 - 자동화재탐지설치 : 3개소 - 통화및감시설비정비 : 2개소 - 소방시설정비 : 4개소 - 비상방송설비정비 : 2개소 - 환기휀자동운전보완 : 2개소 ∘ 사업기간 : 2004. 1. ～ 12.	3,548	100	∘설계․심의: 2004. 1. ～ 2 ∘공사발주 :2004. 3 ∘공사완료 : 2004. 12	시설관리2부 4팀 (도로관리과)

3. 시설물 안전관리의 과학화

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	안전점검 매뉴얼작성	∘작성대상 157개소 - 기작성 : 117개소 - ‘04작성 : 40개소	85	100	∘현장조사 및 자료수집하여 안전점검 매뉴얼 작성	시설관리1부 (도로관리과)
2	한강 교량 관리시스템 구 축	∘한강교량 On-Line 감시망확립 - 기존계측시스템보완 : 3개교량 - On-Line점검시설설치 : 2개교량 ∘사업기간 : ‘03.3 ～’06.12 ∘총사업비: 1,530	450	34	∘기존계측시스템보완3개소 (올림픽,원효,행주대교)	교량관리부 1팀 (도로관리과)
3	한강 교량 수중구조물 상시 조사	∘천호대교 외19개 교량 - 수중우물통 점검 ∘사업기간 : ‘02. ～ ’05. 12 ∘총사업비: 1,500	208	88	∘우물통 상시점검130기 (천호대교외3개교량)	교량관리부 5팀 (도로관리과)

4. 과적차량 단속내실화

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	중차량노선 시설물성능 개선	∘진형교, 묵동교 등 10개소 성능개선공사 실시설계 ∘사업기간 : ‘02.11～’07.12 ∘총사업비 : 30,882	732	100	∘정밀검토후 성능개선 및 보수․보강 실시설계 : 10개소	시설관리2부2팀
2	과적․중차량 단속	∘단속초소 : 44개소 ∘단속반 : 고정초소44, 기동단속10개반 ∘단속인력 : 973명 ∘단속장비 : 204점	3,046 (본부예산 2,695포함)		∘62개 도로시설물 위주 단속에서 시도로 전체 ∘총중량 및 축하중 병행단속 ∘기동단속반 위주단속	총 무 부

5. 안전등급 수준향상(C등급 → B등급 이상)

연번	사업명	사업개요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	양평교 보수	∘위치 : 영등포구 양평동5가～ 양천구 목동1단지 ∘규모 : 폭20m, 연장570m ∘사업내용 - 방수 및 포장 88a - 강재보수 및 도장 45,300㎡ - 콘크리트 균열보수 등 ∘사업기간: ‘03.7.~’04.12 ∘총사업비 : 4,385	2,915	100	∘교면방수 및 포장 ∘강재보수 및 도장 ∘콘크리트 균열보수 ∘신축이음장치 보수 ∘04년12월 준공예정	시설관리2부 2팀 (도로관리과)
2	서울역 고가도로 보수․보강	∘A램프 철거 - 폭6.0m - 연장 274m - 사업기간 : ‘04.1～’04.6 ∘본선 실시설계 - 폭 6.0~10.3m - 연장 661m - 사업기간: ‘04.3~’04.12 ∘총사업비: 2,318	1,000	100	∘A램프 철거 길이 274m ∘본선 실시설계(건설1부)	시설관리2부 3팀 (도로관리과)

연번	사업명	사업개요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
3	남산3호 터널 보수․보강	∘위치 : 중구 회현동~용산구 용산2가동 ∘터널 보수․보강 -라이닝공동채움 6,648㎡ -균열보수 2,479m -중성화방지 20,320㎡ ∘사업기간: ‘03.7~’04.9.30 ∘총사업비: 2,222	708	100	∘라이닝 배면공동 채움 ∘닥트슬라브, 라이닝 균열보수 ∘닥트슬라브,중성화방지	시설관리2부 1팀 (도로관리과)
4	도림교(구로) 보수	∘실시설계 용역비 -교좌장치 교체 : 260개소 -신축이음 보수 : 198ｍ -난간교체 : 60경간 -총사업비 : 49	49	실시 설계	∘실시설계 용역시행	강서도로 관리사업소 (도로관리과)

6. 터널 보수․보강

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	터널 일상유지 보수	∘위치 : 각 터널 ∘대상터널 : 28개소 ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 2,000	2,000	100	∘균열 및 단면보수 ∘등기구․벽체세척 ∘누수보수 ∘보차도 난간보강	시설관리2부 1팀 (도로관리과)
2	문성터널 보수	∘위치 : 관악구 신림동 1623 ∘규모 : 폭10m, 연장360m ∘사업기간 : ‘04. 4~’04.12 ∘총사업비 : 1,340	1,340	100	∘표면보수 : 7,200㎡ ∘공동충진 : 87㎥ ∘시공이음부 : 1,539m ∘기전시설 : 1식	남부도로 관리사업소 (시설관리2부)
3	금화터널 보수보강	∘위치 : 서대문구 대신동 산 2 ∘규모 : 폭9.0m, 연장 555m(2열) ∘사업내용 -천정보호공 철거및설치 14,896㎡ -타일코팅 6,400㎡ -균열보수 349m -포장보수 22a ∘사업기간: ‘03.12.30~’05.8.25 ∘총사업비 : 2,700	1,197	54	∘천정보호공 철거 및 설치 ∘균열보수 ∘포장보수	서부도로 관리사업소 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
4	내곡터널 유지관리	∘위치 : 서초구 내곡동 ～성남시 산성동 B=36m L=1,050m X 2열	379	100	∘유지관리용역 ∘터널보수․청소 등	시설관리1부 (도로관리과)
5	공릉터널 보수․보강	∘공릉(B21.4m*L220m*2열) 자하문(B19.8m*L485m*2열) 삼청터널(B8.5m*L302.5m) ∘사업기간: ‘04.3~’04.9 ∘총사업비: 121	121	100	∘균열보수 : 90m ∘단면보수 : 444㎡ ∘'04.9 준공예정	북부도로 관리사업소 (도로관리과)

7. 일반교량 보수․보강

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	노량대교 보수. 보강 공사	∘위치 : 동작구 흑석동～동작구 본동 ∘규모 B=43m, L=2,070m ∘내용 : 교면포장 및 취약 부분 보수․보강 ∘사업기간: ‘04.1~’04.12 ∘총사업비: 5,530	5,530	100	∘교면포장 370a, ∘차량방호울타리 1,122m ∘교량받침 보수 71개소 ∘교각단면보강 : 16개소	시설관리1부 (도로관리과)
2	일반교량 일상유지 보수	∘위치 : 우리시 관내 ∘규모 : 일반도로 및 전용 도로상 교량 -일반도로 117개소 -전용도로 53개소 ∘사업기간: ‘04.3~’04.12 ∘총사업비: 4,000	4,000	100	∘신축이음보수 ∘콘크리트 단면보수 ∘균열보수 ∘방호책설치 ∘슈교체 ∘점검통로설치등	시설관리2부 2팀 (도로관리과)
3	월릉교 및 상하단 IC보수	∘위치 : 노원구 월계동22 ～공릉동699 ∘규모 : 신축이음보수 350m 단면보수 1,000㎡ 균열보수 100m 난간철거및신설 350m ∘사업기간: ‘04. 3 ～ 12 ∘총사업비: 1,350백만원	1,350	100	∘교량신축이음 교체 ∘단면 및 균열보수 ∘난간철거 및 신설 ∘04.12.31준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
4	신응교 보수	∘위치 : 은평구 응암동 585-1 ∘규모 : 폭25m, 연장60m ∘사업내용 -단면보수 1,800㎡ -교좌장치교체 72개소 -단면보강 300㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 1,200	1,200	100	∘단면보수 ∘교좌장치교체 ∘단면보강 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
5	삼성교 보수	∘위치 : 강남구 삼성동 171 ․교좌장치교체N=153개소 ․신축이음보수L=184ｍ ․사업기간: 2004.3～9.30 ․총사업비: 2,077	1,149	100	․공사설계중 ․발주예정 ․2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)
6	영동6교 보수	∘위치 : 강남구 대치동 512 ∘교면포장보수 A=160a ∘교면방수 A=16,000㎡ ∘사업기간: 2004.3～9.30 ∘총사업비: 2,620	1,000	100	․공사설계중 ․발주예정 ․2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)
7	여의교 보수	∘위치 : 영등포구 여의도동48 ∘신축이음장치보수 151m ∘교면포장 및 방수 72a ∘방호책 울타리 설치 480m ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 9 ∘총사업비 : 1,860	950	100	∘2001.4.~9. 정밀점검용역 시행 ∘2003. 6.16~11.12 1차공사 시행 ∘2004. 3. : 공사발주 ∘2004. 9. : 공사완료	남부도로 관리사업소 (시설관리2부)
8	청담2교 보수	∘차량방호책 = 1,000ｍ ∘단면보수 A= 5,933㎡ ∘균열보수 L= 227ｍ ∘사업기간: 2004. 3～9.30 ∘총사업비: 1,514	914	100	․2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리1부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
9	원효대교 북단교 보수	∘위치 : 용산구 원효로4가 강변북로 ∘규모 : 폭24.3m, 연장72m ∘사업내용 - 교면방수 및 포장보수 10a - 신축이음보수 100m - 단면보수 1,400㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 900	900	100	∘교면방수 및 포장보수 ∘신축이음보수 ∘단면보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리1부)
10	신천1교 보수	∘신축이음보수 : 100ｍ ∘단면보수 : 4,000㎡ ∘균열보수 : 150ｍ ∘사업기간: 2004. 3～9.30 ∘총사업비: 1,272	783	100	․2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리1부)
11	오목교 보수	∘위치 : 양천구 목동~양평동 ∘교좌장치 교체 : 50개소 ∘신축이음 교체 : 400ｍ ∘상판보수 : 80㎡ ∘균열보수 : 80ｍ ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 11 ∘총사업비 : 730	730	100	∘교량 교좌장치 교체 ∘교량 신축이음 교체 ∘교량 상판보수 ∘교량 균열보수	강서도로 관리사업소 (시설관리2부)
12	청담1교 보수	∘단면보수 A=7,000㎡ ∘사업기간: 2004. 3～9.30 ∘총사업비: 1,185	718	100	․2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리1부)
13	성내교 보수	․단면보수A= 11,100㎡ ․신축이음보수L=145ｍ ․사업기간: 2004.3～9.30 ․총사업비: 1,300	684	100	․공사설계중 ․‘04.4 발주예정 ․‘04.9.30 준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)
14	상계교 보수	∘위치 : 노원구 상계동 856 ∘규모 : 교좌장치교체52개소 아스콘포장1,500㎡ 단면보수 100㎡ 균열보수 100m ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 12 ∘총사업비 : 664백만원	664	100	∘교좌장치교체 ∘단면 및 균열보수 ∘아스콘 재포장 ∘04.12.31준공예정	북부도로관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
15	금천교 보수	∘위치 : 금천구 독산동 ~광명시 하안동 ∘규모 : 폭 16m~28m 연장 576m, 구조 P.F ∘사업내용 -균열보수 476m -죠인트및신축이음보수147m -보도설치 5.3a -방호울타리설치338m ∘사업기간 : ‘04.2~’04.12 ∘총사업비 : 543	543	100	∘균열보수 ∘죠인트및신축이음보수 ∘보도설치 ∘방호울타리 설치 ∘‘04. 3 공사발주 ∘‘04. 12 공사완료	남부도로 관리사업소 (시설관리2부)
16	성동교(구교) 개수	∘위치 : 성동구 행당동 64 ∘규모 : L=240m, B=15m ∘내용 : 탄성받침 140개소 받침교체 28개소 단면보수 100㎡ 교면재포장 32a 신축이음교체 51m ∘사업기간 : ‘04.3~’05.12 ∘총사업비 : 710	490	69.0	∘탄성받침 및 받침교체 공사 ∘단면보수 ∘교면재포장 및 신축 이음교체	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)
17	염천교 보수	∘위치 : 중구 의주로2가 161번지 ∘규모 : B=30.8m, L=52.1m ∘내용 : 단면보수 1,138㎡ 박스포장 1,227㎡ 종형증설 28개소 ∘사업기간 : ‘03.3～’04.12 ∘총사업비 : 1,950	350	100	∘단면보수 300㎡	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
18	동진교 보수	∘위치 : 동대문구 신설동 92 ∘규모 : L=20m, B=31m ∘내용 : 교면재포장 6.2a 교면방수 6.2a 단면보수 50㎡ 신축이음보수 110m ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 278	278	100	∘교면재포장 ∘교면방수 ∘단면보수 ∘신축이음보수	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
19	성내유수지교 보수	∘신축이음보수 : 100ｍ ∘균열보수 : 100ｍ ∘사업기간: 2004.3～9.30 ∘총사업비: 1,842	272	100	∘공사설계중 ∘발주예정 ∘2004.9.30준공예정	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)
20	송정교 보수	∘위치 : 성동구 송정동 73 ∘규모 : B=14.2m, L=386m ∘사업기간 : ‘04.3～’04.6 ∘총사업비 : 250	250	100	∘교면방수 50a ∘교면포장 50a	성동도로 관리사업소 (시설관리1부)
21	이화교 보수	∘위치 : 동대문구 이문동 57-2 ∘규모 : L=10m, B=210m ∘내용 : 교면재포장 28a 교면방수 22a 단면보수 100㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 156	156	100	∘교면재포장 ∘교면방수 ∘단면보수	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)
22	구로공단 I.C보수	∘교좌장치 교체 : 21개소 ∘브라켓 설치 : 7개소 ∘기 타 : 1식 ∘사업기간: ‘04.01~’04.12 ∘총사업비: 150	150	100	∘교량 교좌장치 교체	강서도로 관리사업소 (시설관리1부)
23	탄천2교 보수	∘조류전망대설치 설계용역 - B=20ｍ, L=80ｍ ∘설계용역1식 ∘사업기간: 2004.3～6.30 ∘총사업비: 290	20	실시 설계	․`04.6.30 설계용역완료 ․`05년 공사발주예정	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)

8. 지하차도 개보수

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	지하차도 일상유지 보수	∘지하차도 일상유지보수 - 지하차도 82개소 ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 2,200	2,200	100	∘콘크리트 균열 및 단면보수 ∘벽체세척. 누수보수 ∘보차도 난간보강	시설관리2부 1팀 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
2	경인1․2 지하차도보수	∘위치 : 양천구 목동(제물포길)∘규모 B=19m, L=2,305m ∘사업기간 : ‘04.03～’04.12 ∘총사업비 : 2,000	2,000	100	∘배수로정비:4,600m ∘차도재포장 - B=18～35m, - L=2,800m - A=550@ ∘기타부대공사 : 1식	강서도로 관리사업소 (시설관리1부)
3	의주로 지하차도 외8개소 보수․보강	∘규모 : 의주로외 8개소 ∘사업내용 - 죠인트설치 456m - 방수그라우팅 1,732㎡ - 단면보수 840㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 1,005	1,005	100	∘죠인트설치 ∘방수그라우팅 ∘단면보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
4	창동지하차도 외7개소 보수	∘규모 : 지하차도 8개소 ∘신축이음보수 : 804m ∘배수로정비 : 910m ∘사업기간: ‘04.3~’04.9 ∘총사업비: 550	550	100	∘공사착공전 단계 - 설계 및 발주 준비중 ∘'04.9월 준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)
5	지하차도 방음벽설치	∘위치 : 중랑구 신내동 신내지하차도 ∘규모 : 방음벽 제작설치 H=1.86~2.45m, 난간철거 L=308m ∘사업기간 : ‘04.3～’04.6 ∘총사업비 : 300	300	100	∘방음벽 제작설치 H=1.86~2.45m, 난간철거 L=308m	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)
6	국회앞 지하차도 보수	∘위치 : 영등포구 여의도동17-20 ∘규모 : B=24m, L=523m ∘사업기간 : ‘04.03～’04.12 ∘총사업비 : 270	270	100	∘균열보수 : 650m ∘단면보수 : 700㎡ ∘난간교체 : 330m ∘기타부대공사 : 1식	강서도로 관리사업소 (시설관리2부)
7	지하차도 죠인트 보수	∘위치 : 대치지하차도 외 6개소 ∘신축이음보수 : 341m ∘사업기간 : 2004. 3 ~ 7 ∘총사업비 : 239	239	100	∘2004. 2월 발주 ∘2004. 3월 착공	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
8	지하보차도 보행환경 개선	∘위치 : 잠수교남단 지하보도 ∘규모 : B=14.6m, L=204m ∘타일붙임 : 510㎡ ∘표면처리 : 1,236㎡ ∘기 타 : 1식	230	100	∘‘04.7.30 준공예정	남부도로 관리사업소 (시설관리2부)
9	녹천지하차도 보수	∘녹천지하차도(B20.9m*L307m) - 균열보수 : 119m - 단면보수 : 19㎡ - 표면처리 : 1,500㎡ ∘사업기간: ‘04.3~’04.9 ∘총사업비: 200	200	100	∘공사착공전 단계 - 설계 및 발주 준비중 ∘'04.9 준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)
10	가락 지하차도 보수․보강	∘위치 : 송파구 가락동 479 ∘균열보수 : 500m ∘벽체표면보수 :1,980㎡ ∘포장덧씌우기 : 54a ∘사업기간 : 2004. 3 ~ 7 ∘총사업비 : 173	173	100	∘2004. 2월 발주 ∘2004. 3월 착공	동부도로 관리사업소 (시설관리2부)
11	여의도2 외 3개 지하차도 보수	∘위치 : 여의2, 성산, 고척, 경인철도횡단지하차도 ∘규모 : B=10～46m, L=783m ∘사업기간 : ‘04.03～’04.12 ∘총사업비 : 150	150	100	∘균열보수 : 350m ∘단면보수 : 1,650㎡ ∘기타 부대공사 : 1식	강서도로 관리사업소 (시설관리1부)
12	가양지하차도 보수․보강	∘위치 : 강서구 가양동 ∘규모 : B=8m, L=445m ∘사업기간 : ‘04.03～’04.12 ∘총사업비 : 63	63	100	∘죠인트보수 : 80m	강서도로 관리사업소 (시설관리1부)

9. 하천복개구조물 보수․보강

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	하천 복개구조물 일상유지 보수	∘위치 : 서울시 관내 ∘규모 : 21개하천 43개구간 ∘사업기간 : ‘04.3~’05.12 ∘총사업비 : 1,400	1,400	100	∘신축이음보수 ∘콘크리트 단면보수 ∘균열보수 ∘바닥콘크리트타설 ∘기초보호공 ∘암깨기등	시설관리2부 2팀 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
2	성북천 복개구조물 보수	∘위치 : 성북구 성북동 43-2 ～ 성북동 23-15 ∘규모 : 바닥콘크리트타설 857㎡ 단면보수 100㎡ 균열보수 30m ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 10 ∘총사업비 : 500백만원	500	100	∘바닥 콘크리트 타설 ∘단면 및 균열보수 ∘04.10.30준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)
3	우이천 복개구조물 보수	∘위치 : 성북구 장위동 124～125 ∘규모 : 단면보수 900㎡ 신축이음보수 98m 기초보호공 1,430㎡ ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 10 ∘총사업비 : 350백만원	350	100	∘단면보수 ∘신축이음장치 보수 ∘기초 보호공 ∘04.10.30준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)
4	정릉천 복개구조물 보수․보강	∘위치 : 성북구 정릉동 428 ∘규모 : 신축이음보수 300m ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 10 ∘총사업비 : 300백만원	300	100	∘신축이음장치 보수 ∘04.10.30준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)

10. 고가도로 보수․보강

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	고가도로 일상유지 보수	∘기존고가 일상유지 보수 -고가도로 91개소 ∘사업기간: ‘04.3~’04.12 ∘총사업비: 4,000	4,000	100	∘균열보수 2,090m ∘단면보수 4,605㎡ ∘난간,연석 등 보수 1식	시설관리2부 3팀 (도로관리과)
2	탄천1,2 고가차도 보수공사	∘위치 ; 강남구 삼성동 ～송파구 장지동 ∘규모 B=12m, L=1,980m ∘내용 : 교면포장 정비	2,700	100	∘포장불량구간 정비 ∘교면포장 : 238a	시설관리1부 (도로관리과)
3	남산광고가 도로 보수	∘기존고가 보수․보강 -폭 7.8m -연장 274m ∘사업기간 : ‘03.12~’04.6 ∘총사업비 : 3,300	2,600	100	∘스틸박스거더 철거 및 재설치 L=76m ∘교좌장치교체 40개소	시설관리2부 3팀 (도로관리과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
4	아현고가차도 보수	∘위치 : 마포구 아현동 331 ∘규모 : 폭15m, 연장939m ∘사업내용 -스라브치환보수 153㎡ -거더외부강선보강 25m×2개소 -교면방수 및 포장110a -단면보수 1,230㎡ -난간,연석 교체보강 1,878m ∘사업기간 : ‘03.8 ~ ’04.8 ∘총사업비 : 3,300	1,600	54	∘스라브치환보수 ∘외부강선인장 ∘교면 방수 및 포장 ∘단면보수 ∘난간,연석교체 보강 ∘‘04.8월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
5	노들(북)고가차도 보수	∘PSC거더 보강 20본 ∘교좌장치교체 100개소 ∘교면방수 1,695㎡ ∘신축이음장치보수 78m	1,200	100	∘2002.10. 정밀안전진단 실시 ∘2002.12.~ 2003. 2. 실시설계용역 시행 ∘2004. 3. : 공사발주 ∘2004.12. : 공사완료	남부도로 관리사업소 (시설관리2부)
6	가리봉철도 고가차도 보수	∘위 치 : 가리봉동 515 ∘규 모 - 상판치환 1,395㎡ - 단면보수 290㎡ - 표면보수 1,169㎡ ∘사업기간: ‘04.3 ~ ’04.10 ∘총사업비: 870	870	100	∘노후교량 보수 - 상판치환 1,395㎡ - 단면보수 290㎡ - 표면보수 1,169㎡	강서도로 관리사업소 (시설관리1부)
7	워커힐교 보수	∘기존고가 보수․보강 - 폭 6~23m - 연장 963m ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 734	734	100	∘신축이음장치 교체 240m ∘균열보수 760m	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)
8	현저고가차도 보수	∘위치 : 서대문구 현저동 독립문R ∘규모 : 폭15m, 연장580m ∘사업내용 -난간정비 580경간(H=1.1m) ∘사업기간 : ‘04.3~’04.10 ∘총사업비 : 700	700	100	∘난간교체 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
9	욱천고가도로 보수	∘위치 : 용산구 원효로2가 15-6 ∘규모 : 폭11.4m, 연장454m ∘사업내용 - 주형인장 8본 - 교좌장치교체 8개소 - 단면보수 1,500㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 700	700	100	∘주형인장 ∘교좌장치교체 ∘단면보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
10	서소문고가 차도 보수	∘위치 : 중구 순화동6~중림동406 ∘규모 : 폭15m, 연장490m ∘사업내용 - 단면보수 600㎡ - 균열보수 240㎡ - 신축이음보수 255m ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 656	656	100	∘단면보수 ∘균열보수 ∘신축이음보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
11	한남1고가차도 보수	∘기존고가 보수․보강 -폭 9m, 연장 377m ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 600	600	100	∘방호벽 정비 780㎡ ∘받침교체 8개소	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
12	홍제고가도로 보수	∘위치 : 서대문구 홍은동 98 ∘규모 : 폭15m, 연장375m ∘사업내용 -교면방수 및 포장보수 57a -신축이음보수 20m -교좌장치교체 21개소 ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 600	600	100	∘교면방수 및 포장보수 ∘신축이음보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
13	서대문 고가차도 보수	∘위치 : 서대문구 충정로1가 62 ∘규모 : 폭11.5m, 연장374m ∘사업내용 -교면 포장 44a -교좌장치교체 18개소 -신축이음보수 46m -단면보수 200㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 484	484	100	∘교면포장보수 ∘교좌장치교체 ∘신축이음보수 ∘단면보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
14	화랑고가차도 보수	∘위치 : 노원구 월계동 38-4 ∘규모 : 아스팔트 포장 72a 균열보수 200m ∘사업기간 : ‘04. 3 ~ 12.31 ∘총사업비 : 478백만원	478	100	∘ 아스팔트 재포장 ∘ 균열보수 ∘04.12.31준공예정	북부도로 관리사업소 (시설관리2부)
15	성산고가 도로 보수	∘위치 : 마포구 성산동94~중둥70 ∘규모 : 폭17m, 연장284m ∘사업내용 -교면 포장 44a -교좌장치교체 18개소 -신축이음보수 46m -단면보수 200㎡ ∘사업기간 : ‘04.3~’04.12 ∘총사업비 : 954	470	100	∘교면포장보수 ∘교좌장치교체 ∘신축이음보수 ∘단면보수 ∘'04.12월 준공예정	서부도로 관리사업소 (시설관리2부)
16	복정고가박스내부점검등설치	∘배관 및 케이블설치 -설계비 : 20 -공사비 : 60 ∘사업기간 : 2004. 3 ~ 7 ∘총사업비 : 280	80	100	∘2004. 2월 발주 ∘2004. 3월 착공	동부도로 관리사업소 (시설관리1부)

12. 기전시설 개보수

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	기전시설물 일상유지 보수	∘ 대 상 -터 널 : 25개소 -지하차도 : 54개소 -고가차도 : 46개소 -교 량 : 19개소 ∘ 규 모 -조명시설보수 : 47,562등 -재방송설비보수 : 74개소 -원격감시설비보수 : 10개소 ∘ 사업기간 : ‘04. 1. ～ 12.	3,150	100	∘ 기전시설물 일상유지보수 연간단가계약 ∘ 기전시설물 유지관리용 물품 구매 ∘ 기전시설물 일상정비	시설관리2부 4팀 (도로관리과)
2	지하차도 기전시설 개량	∘ 대 상 -지하차도 2개소(성동, 마장) ∘ 규 모 -배수펌프교체 : 50마력 2대 30마력 4대 ∘ 사업기간 : ‘04. 2. ～ 6.	86	100	∘ 배수펌프 교체 완료 : ‘04.6.	성동도로 관리사업소 (시설관리2부)

13. 도로시설물 일상유지

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	포장도로 유지보수	∘규모 : 42개구간 13,019a ∘내용 : 시소유 도로의 노후․ 파손정비	22,000	100	∘6개 도로사업소 포장도로 보수	시설관리1부 (도로관리과)
2	자동차 전용도로 위탁	∘대상 : 올림픽대로 등 13개 노선 175.62Km ∘내용 : 자동차전용도로 부속시설물 유지관리 ∘수탁기관 ; 시설관리공단	21,782	100	∘도로부속시설 관리 - 가드레일 등 18종등 ∘기전시설관리 - 가로등 12,200주, 지하차도 35, 터널 3 등	시설관리1부 (도로관리과)
3	공동구 위탁관리	∘6개 공동구 L=32.9km ( 여의도, 목동, 가락, 개포, 상계, 상암) ∘수탁기관 ; 시설관리공단	8,559	100	∘공동구 구조체 보수 및 일상 유지 보수, 보안시설보강 등	시설관리1부 (도로관리과)
4	소규모공사 감독업무 위 탁	∘전면책임감리를 시행하지 않는 시비공사 전체의 감독업무 (서울시산하사업소, 25개자치구) ∘수탁기관 ; 시설관리공단	7,843	100	∘소규모공사감독업무 위탁	시설관리1부 (도로관리과)
5	자동차 전용도로 청소위탁	∘올림픽대로 등 13개 노선 175.62km ∘수탁기관 ; 시설관리공단	7,498	100	∘기계에 의한 노면청소, ∘일반폐기물 처리	시설관리1부 (도로관리과)
6	자동차 전용도로 녹지대위탁	∘올림픽대로 등 13개 노선 175.62km ∘수탁기관 ; 시설관리공단	4,641	100	∘녹지관리(면적157만㎢) ∘수목 1,820천주	시설관리1부 (도로관리과)
7	교통사고위험도로개선	∘대상도로 : 강변북로, 소월길, 사당로, 율곡로, 진흥로	945	100	∘5개 도로 현장조사 및 자료수집하여 교통사고 위험 요인 개선	시설관리1부 (도로관리과)
8	강교 용접 결함부보수	∘대상 : 강구조시설물 ∘규모 : 99개시설물 154㎞	250	100	∘용접결함부 보수 ∘볼트체결불량부 보수 ∘구조적취약부 보수․보강	시설관리1부 (도로관리과)
9	아스팔트포장품질향상학술용역	∘개질/특수아스팔트의 시험 시공에 대한 분석 및 평가	70	100	∘도로관리과에서 시행하는 “서울시포장도로수준향상방안에관한학술용역”에 포함하여 시행	시설관리1부 (도로관리과)
10	시설물안전점검 및 진단	∘대상시설물 : 480개 ∘내용 : 정밀안전진단외 3종	7,349	100	∘정기점검 : 13건 ∘정밀점검 : 243건 ∘초기점검 : 5건 ∘정밀진단 : 17건	시설관리1부 (도로관리과)

□ 보행환경 개선사업

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	시청앞광장 조성	∘광장조성 13,200㎡ ∘주변도로정비 B=8～38mL=1,772m ∘사업기간 :‘04.1～’04.4.30 ∘총사업비 :5,300	5,300	100	∘‘04.1 : 공사 발주 및 계약 ∘‘04.2～’04.4 : 공사시행	건설1부1팀 (도로계획과)
2	광화문 지하보도리모델링 사업	∘위치 : 종로구 신문로1가 1번지 ∘규모 -구체 B=8.3~17.2m, H=2.8~3.7m -출입구B=8.3~26.5m.L=40m (4개소) ∘사업기간 : ‘03.12.24~’04.12.23 ∘총사업비 : 5,680	5,050	100	∘노후내부구조공간 변경 ∘구조물 보수보강 ∘배수펌프 등 시설개량	시설관리2부 1팀 (도로관리과)
3	시민광장(광화문～숭례문) 조성공사 기본 및 실시설계	∘광장조성 55,758㎡ ∘보도확폭및조경 L=2,000m ∘사업기간 :‘04.2～’04.6 ∘총사업비 :9.350	4,350	100	∘설계용역착수및준공(6월) ∘공사착공(7월)	건설1부설계 (도시계획과)

□ 국제수준의 공공시설 건립

1. 사회복지시설

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	동부노인전문요양센터 건립	∘위치 : 성동구 홍익동16-1 ∘규모 : 지하1, 지상5층 ∘연면적 : 10,400㎡ ∘사업기간 : ‘02.12～’05.7 ∘총사업비 : 17,796	6,883	52	∘기존건물 철거 ∘골조공사 ∘방수, 미장공사	건축부 (노인복지과)
2	북부노인병원 및 중랑노인전문요양원신축공사	∘위치 : 중랑구 망우동 235-1 ∘규모 : 지하2,지상5층 ∘연면적 : 23,537㎡ ∘사업기간 : ‘02.7~’06.5 ∘총사업비 : 35,763	6,813	55	∘골조공사 완료 ∘조적 및 미장, 방수 공사 진행	건축부 3팀 (보건과, 노인복지과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
3	시립 아동병원 증개축공사	∘위치 : 서초구 내곡동 6-7 ∘규모 : 지하1,지상4～6층 ∘연면적 : 12,547㎡ ∘사업기간 : ‘03.1~’06.12 ∘총사업비 : 24,902	5,046	5	∘기본 및 실시설계 완료 ∘공사계약 및 착공 ∘책임감리 용역업체 선정 ∘가설공사 ∘굴토 및 지하공사	건축부4팀 (보건과)
4	시립보라매병원 신관 신축	∘위치 : 동작구 신대방2동395 ∘건축규모 - 지하4층, 지상10층 - 연면적 : 34,900㎡ ∘사업기간 : ‘04.1～’07.6 ∘총사업비 : 56,474	2.689	5	∘‘04. 6 기본설계 ∘‘04.11 실시설계 ∘‘04.12 공사발주	건축부 (보건과)
5	서부노인전문요양센터건립	∘위치 : 마포구 성산동369-2 ∘건축규모 - 지하4층, 지상4층 - 연면적 : 8,910㎡ ∘사업기간 : ‘04.5～’06.12 ∘총사업비 : 4,900	847	5	∘‘04. 3 입찰안내서작성 ∘‘04. 6설계시공일괄입찰 ∘‘04.12 실시설계 완료	건축부 (노인복지과)

2. 치수, 환경시설

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	마포자원 회수시설 건설공사	∘위치:마포 상암동 481-6번지 (하늘공원과 노을공원 사이) ∘쓰레기소각로 설치 -750톤/일(250톤/일*3기) ∘사업기간: ‘00.12. ~ ’05.4. ∘총사업비:171,166백만원	53,023	95	∘소각설비 제작 설치 ∘전기․계장설비 공사 ∘건축 구조물공사 ∘토목․조경 공사	설비부 2팀 (청소과)
2	하수처리장 고도처리 시설공사	∘위치:중랑 등 4개하수처리장 ∘하수고도처리시설 건설 -하수처리시설 581만㎥/일 -고도처리 46만㎥/일(중랑) -청계천유지용수 12만㎥/일 -시설개선 410만㎥/일 (탄천, 서남, 난지) ∘사업기간 : ‘03.7. ~ ’07.12. ∘총사업비 : 163,744백만원	26,143	20	∘중랑하수고도처리시설공사 -실시설계 및 공사 착공 -청계천유지용수 공급시설 착공(2004. 2.) ∘탄천 등 3개 하수처리장 시설개선공사 -기본․실시설계용역 추진 -공사 착공	설비부 1팀 설비부 4팀 설비부 5팀 (하수계획과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
3	정릉천복개 구간치수사업	∘하수BOX확장 ∘P.C암거 B = 4.0×4.0～5.0×3.2m L=1.854.5m ∘사업기간 : ‘01. 6 ～ ’04.11 ∘총사업비 : 32,543	10,415	100	∘하수암거1,040m 완료예정	건설2부3팀 (하수계획과)
4	노유빗물펌프장설치공사	∘펌프설치: D=1,200mm×180㎥/분 740HP×5대 ∘저류용량:27,400㎥, ∘유․출입관로:4개소/475m ∘사업기간 : ‘03. 8 ～ ’05. 7 ∘총사업비 : 31,487	8,000	55	∘Sheet-Pile시공완료 (1,378본) ∘유수지내 터파기 완료 ∘자연방류관거 170M NTR 추진완료 ∘펌프장 구조물공 완료 예정	건설2부3팀 (치수과)
5	탄천하수처리장복개공원화공사	∘공원조성11,762㎡ ․구조물복개10,283㎡ ∘사업기간 : ‘99.12 ～ ’04.10 ∘총사업비 : 192,777	1,827	100	∘조경시설물성치 및 수목식재 ∘전기, 설비시설 설치예정 ∘2단계공사 설계	건설2부3팀 (하수계획과)
7	세곡천차집 관거설치공사	∘차집관거설치 D=300-400mm, L=1,180m ∘사업기간 : ‘00. 7 ～ ’04.11 ∘총사업비 : 4,258	1,005	100	∘차집관거 설치예정 ∘D300～400mm, L=1,180	건설2부3팀 (하수계획과)
8	반포천차집관거 및 동부간선 차집관거 설치공사	∘압송관 : L=948m ∘오수중계펌프장 :1개소 ∘차집관거 설치 B=2.25×1.7m, L=625m ∘사업기간 : ‘03. 6 ～ ’04.11 ∘총사업비 : 4,038	1,572	91.2	∘차집관거시설 □ 2.25×1,7m, L=200m/625m설치예정 ∘오수중계펌프장 1개소	건설2부3팀 (하수계획과)
9	불광천 좌우안 차집관거 증설공사실시설계	∘U형0.4×0.4m～0.9×0.9m L=3,360m	75	100	∘설계용역착수 및 준공 (10월)	건설1부설계 (하수계획과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
10	녹번천우안 차집관거 증설공사	∘U형0.8×0.8m～1.0×1.0m L=2,120m	60	100	∘설계용역착수 및 준공 (10월)	건설1부설계 (하수계획과)
11	전농천차집관거및계곡수분리 시설 실시설계	∘□2.0×1.8 L=400m ∘계곡수분리12개소 L=9,520m	116	100	∘탄천 및 난지하수 처리구역완료	건설1부설계 (하수계획과)
12	백운동천․중학천 차집관거 설치공사	∘차수벽 설치 : L=8,881m ∘하수관로 설치 D=300-1,100mm L=288m ∘사업기간 : ‘04. 4 ～ ’04.11 ∘총사업비 : 4,500	3,070	68	∘차집관거 설치예정 ∘D300～400mm, L=1,180	건설2부3팀 (하수계획과)

3. 청소년, 문화, 체육시설

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	시립창동운동장조성및문화체육센타건립공사	∘위치:도봉구 창동 1-6 ∘건축규모 - 지하2층, 지상4층 - 연면적 14,378㎡ ∘사업기간: ‘02.10~’05.6 ∘총사업비:33,370	8,180	65	∘골조공사완료 ∘내부마감공사 60%	건축부 1팀 (체육청소년과)
2	서대문청소년 수련관신축공사	∘위치 : 서대문구연희동 167-1외 7필지 ∘규모 - 대지면적 : 6,257㎡ - 층수 : 지하2층,지상3층 - 연면적 : 5,264㎡ ∘사업기간: `03.1.~`05.3 ∘총사업비: 9,798백만원	5,542	80	∘골조공사 완료 ∘마감공사 ∘수련관 접근도로 개설 ∘수영장 내부마감 추진 ∘체육관 내부마감 추진 ∘외벽 마감 추진 ∘부지 정지 추진	건 축 부 2팀 (체육청소년과)
3	광진청소년 수련관건립	∘위치 : 광진구 광장동 318-2 외 2필지 ∘건축규모 - 지하2층, 지상3층 - 연면적 : 4,959㎡ ∘사업기간: `03.10.~`06.12 ∘총사업비: 10,040백만원	1,200	5	∘‘04. 6 실시설계 ∘‘05. 2 공사발주	건축부 (체육청소년과)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
4	중랑청소년 수련관건립	∘위치 : 중랑구 망우동 241-2 ∘규모 : 지하2, 지상3층 ∘연면적 : 3,083㎡ ∘사업기간 : ‘02.6~’05.12 ∘총사업비 : 12,533	2,080	50	∘토공사․골조공사 추진	건축부 2팀 (체육청소년과)
5	금천청소년 수련관신축공사	∘규모 -층수: 지하2층, 지상3층 -연면적: 5,056㎡ ∘사업기간 : .1.7~’04.7.10 ∘총사업비: 10,233	1,778	100	∘내외부 수장 및 마감공사 ∘조경 및 부대토목공사 ∘‘04.7.10 준공예정	건축부 (체육청소년과)
6	마포청소년 수련관 건립	∘위치 : 마포구 성산동373-1일대 ∘건축규모 - 지하2층. 지상4층 - 연면적 4,950㎡ ∘사업기간: `04.4~`06.12 ∘총사업비: 10,043	1,300	5	∘실시설계 용역시행	건축부 (체육청소년과)
7	보라매청소년수련관리모델링및증축	∘위치 : 동작구 신대방동395 ∘조성(리모델링)규모 - 2개동 4,720㎡,증축540㎡ ∘사업기간: `04.1~`06.5 ∘총사업비: 16,996	228	5	∘‘04. 1 실시설계 용역시행	건축부 (체육청소년과)

4. 공공청사

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	건설안전본부 청사 신축공사	∘위치 : 종로구 신문로2가 1-43 ∘규모 : 지하1,지상4층 ∘연면적 : 12,961㎡ ∘사업기간 : ‘03.08~’05.12 ∘총사업비 : 23,582	14,064	15	∘기존건물 철거 ∘굴토 및 가시설공사	건축부4팀 (총무부)

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
2	서남권농산물도매시장 시설확장공사	∘위치 : 서울시 강서구 외발산동 42번지 5호 일원 ∘규모 -대지면적 : 66,058㎡ -층수 :지하1층,지상2층 -연면적 : 29,734.06㎡ ∘사업기간: `02. 6. 29 ～ ‘04. 6. 30 ∘총사업비: 39,484백만원	3,597	100	∘골조공사 완료 ∘마감공사 ∘수련관 접근도로 개설 ∘수영장 내부마감 추진 ∘체육관 내부마감 추진 ∘외벽 마감 추진 ∘부지 정지 추진	건 축 부 1팀 (서남권농산물도매시장건설기획단)
3	성북소방서 재건축	∘위치 : 성북구 종암동3-72 ∘건축규모 - 지하1층, 지상4층 - 연면적 4290㎡ ∘사업기간 : ‘04.9～’06.8 ∘총사업비 : 7,800	2,553	10	∘‘04. 1 실시설계 ∘‘04. 9 공사착공	건축부 (성북소방서)
4	강남소방서 신축공사	∘강남소방서 신축 -지하 1층 -지상5층 -연면적 4,695㎡ ∘사업기간: 2002.9.2~2003.8.22 ∘총사업비:7,902	1,817	100	∘주차시설 44대 설치완료 ∘소방차고, 직원대기실 설치 완료 ∘대강당,옥상훈련장 설치 완료	건축부 1팀 (강남소방서)
5	서대문소방서신축	∘위치 : 은평구 연희동 76-12 ∘대지면적 :2,439㎡ ∘규모 : 지하1 지상4층, 연면적:4,703㎡ ∘사업기간 : 2003.10.20.~2005.10.09. ∘총사업비 : 8,869백만원	2,027	60	∘토공사추진 -흙막이,터파기 및 되메우기 ∘건축공사추진 -골조공사 완료 -조적 및 미장공사	건축부 1팀 (소방방재본부-소방행정과)
6	용산소방서 신축공사	∘위치:용산구 한강로 2가 2-89 ∘건축규모 -지하1층, 지상4층 -연면적 4,903㎡ ∘사업기간: ‘03.12~’05.12 ∘총사업비:9,945	1,956	65	∘골조공사완료	건축부1팀 (용산소방서)
7	남부여성 발전센터 지하주차장 건립공사	∘위치 : 금천구 시흥동 산 139-2 ∘규모 : 지하2층, 연면적 4,032㎡ ∘사업내용 : 남부여성발전 센터 운동장지하에 주차장 건립 (주차면수 130면) ∘사업기간 : ‘03.12~’04.7 ∘총사업비 :4,654	779	100	∘흙막이설치공사 준비 ∘‘04. 7.26 준공예정	건축부 1팀 (주차계획과)

□ 정교한 품질관리

연번	사업명	사 업 개 요	‘04 예산	계획 공정 (%)	사업추진계획	시행부서 (주관부서)
1	화약발파피해 저감대책 연구용역	∘과업명 : 확약발파 피해 저감재책 연구용역 ∘과업기간 : ‘04.3～’05.2 ∘총사업비 : 150	150	80	∘시민생활권 보호와 민원해소 등을 위한 건설공사 화약발파시 기준 및 피해저감 방안 등	건설2부 (도로계획과)
2	건설공사 사후평가 학술용역	∘과 업 명:「건설공사 사후 평가」학술용역 ∘과업대상 - 내부순환로 : 40km - 북부간선도시고속도로 : 8km ∘과업기간 : ’04.3～’04.11(9개월) ∘총사업비 : 120	120	100	∘공사비 및 공사기간 (예상/실제)비교․분석 ∘수요 및 기대효과(기획/ 공사완료 후)비교․분석 ∘당해 건설공사의 문제점과 개선방안 등	건설2부2팀 (도로계획과)
3	ISO9001 사후관리	∘ ISO 9001 품질경영시스템의 지속적 개선 및 보완 ∘ 사후관리심사 ∘ ISO 9001 품질경영 시스템 전환 (94년판 → 2000년판)	16	100	∘ISO 9001품질경영 시스템 (94년판→2000년판) 전환 ∘ISO추진팀 워크샵 및 위탁교육 ∘신규 전입직원에 대한 ISO교육 ∘품질경영시스템 이행점검 ∘사후관리심사	시설관리1부 (도로관리과)