설계변경 소위원회 자문요청서

자문안건 (1건)	1. 서초역~방배로간 도로개설공사 ------------- 방재시설부 ο 인접건물 사전안전점검 조사비 ⇒ 증 211,756천원

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 조 동 협		요청일		2016년 04월 일
공 사 명	서초역~방배로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		□ 토공사 : 흙깎기 49,046m3, 흙쌓기 6,151m3, 사토 138,296m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 287m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식
	공사기간		2015. 10. 20 ~ 2019. 01. 31
	감 리 사		㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
	설 계 사		㈜이산 외2개사
	시 공 사		롯데건설㈜
자문 안건명			인접건물 사전안전점검 조사비				요청금액		211,756천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ☑ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 당초 인접건물 사전안전점은 미확정설계공종으로 17개동으로 설계되어 있으나 발파영향권내에 있는 건물41동에 대해 사전안전검을 시행하고 계약내역에 반영하고자 설계변경 심의를 요청함.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음.
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 인접건물 사전안전점검 추가조사비 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 사전안전점검 17개동 - 변 경 : 사전안전점검 41개동					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 68,243천원 - 변 경 : 280,000천원 - 증 감 : 211,756천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 미확정설계공종(PS)
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본1부. 2. 실정보고서 사본1부.					▪ 공사예정시기 - 2016.02.~2016.04 ▪ 소요관급자재 - 해당없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	서초역~방배로간 도로개설공사
계약금액	44,158,210천원	계약일	2015.10.08.	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2015.10.20 ~ 2019.01.31	낙찰율	71.467%	설계자	㈜이산 외2개사
계약형태	공개경쟁입찰( ● ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사			감리자	㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외2개사
공사규모	□ 토공사 : 흙깎기 49,046m3, 흙쌓기 6,151m3, 사토 138,296m3 □ 구조물공사 : U-TYPE 155m, 개착터널 103m, L형옹벽 287m □ 터널공 : NATM 252m(병렬터널) □ 포장공 및 부대공, 조경공 1식			※ 작성자 : 업무당당 조 동 협 (☎02-3708-8774)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	인접건물 사전안전점검 17개동		인접건물 사전안전점검 41개동	인접건물 사전안전점검 24개동
공 사 비	68,243천원		280,000천원	211,756천원
적 용 요 율	없 음		100%(견적금액)
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 1의 가항
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	• 인접건물 사전안전점검 추가 비용 반영
효 과	① 공기단축( 월 ), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 ☑ 미이행

□ 관련문서

-  실정보고승인(도시기반시설본부-16-646 (2016. 2. 1) )